		돈화문 민요박물관 건립 개요

□  사업개요

○ 위    치 : 종로구 와룡동 5-9 외 1

○ 규    모 : 부지 903.57㎡, 연면적 1,480㎡

○ 사업기간 : 2015~2019년(19년 10월 개관예정)

○ M     P : 최상일 PD (전 MBC PD, ‘우리의 소리를 찾아서’ 제작)

※ 돈화문 전통문화시설건립 개요

구 분	서울돈화문국악당	민요박물관
소 재 지	종로구 와룡동 12-2	종로구 와룡동 5-9외 1
토지면적	834.8㎡	903.57㎡
연 면 적	1,773.64㎡ (지상1/지하3층)	1,480㎡ (지상1/지하2층)
주요시설	공연장, 국악마당 연습실, 대기실, 사무실, 카페테리아	음원보관실, 전시실, 감상실, 다목적공간, 사무실
비 고	2016. 3월 준공 세종문화회관 위탁운영	2019년 12월 준공 예정 운영단체 미정

□ 추진경과

○ '08.11.13	돈화문지역 전통문화 보존 육성계획(시장방침 제647호)

○ '09. 5.24	돈화문로 전통문화시설 건립계획(문화국장방침 제279호)

○ '09. 8.31	공유재산관리계획 심의(토지취득)

○ '15. 2. 2	돈화문로 전통문화시설 건립 변경계획

○ '15. 11.10	건립 추진계획 수립

○ '15. 12~7.	기본계획 수립 용역

□ 향후 계획

○ '16. 8~9월	건립계획 수립

○ '16. 10~'17. 2월	각종 심의, 총괄건축가 자문 및 설계공모

○ '17. 3~10월	기본설계 및 실시설계

○ '17. 11~12월	공사 발주 및 문화재 정밀발굴조사

○ '18. 1~'19. 6월	건립공사

○ '19. 7~9월	전시설치

○ '19. 10월	완공 및 개관

□ 공공건축 통합기획TF팀 구성

○ 공공건축 통합기획 TF팀 운영 취지

- 사업계획을 수립하기 이전에 운영전문가를 통합기획TF팀에 자문위원으로 포함하여 설계지침 등에 충분히 반영

※ 도시기반시설본부 건축-1629(시장방침26호, 2016. 2.10)호 관련

통합기획TF팀 : 기획부서, 운영전문가, 도기본, 설계전문가, 설계자문위원

○ 운영전문가 자문 내용 및 형태

- 자문 내용 : 유사사업 운영현황 소개, 사업계획 적정성 자문,

운영 및 유지관리 분야 아이디어 제공

- 자문 형태 : 설계준비·설계 및 공사 단계에서 자문회의 참여

□ 위치도 및 현황

민요박물관	국악예술당(세종문화회관 위탁)