문서번호	교통행정과-36608		주무관			주차장시범사업팀장		교통행정과장			안전건설교통국장
결재일자	2016.8.29.		최광식			代최광식		신동수			전결 08/29 이학구
공개여부	대시민공개
			협조
방침번호

설계변경 검토 보고

(2016년 그린파킹 담장허물기 공사(연간단가))

이면도로 주차난 해소 및 주택가 생활환경 개선을 위하여 시행 중인『2016년 그린파킹 담장허물기 공사(연간단가)』수행 중 누락공종 확인 및 신규공종이 발생하여 설계변경 시행으로 공사시행에 철저를 기하고자 함

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 2016년 그린파킹 담장허물기 공사(연간단가)

공사규모

담장허물기 참여주택 : 37동

그린파킹 주차면 설치 : 45면

공사기간 : 2016. 3. 23 ~ 12. 31

도 급 자 : 세정토건㈜  대표 정영호

도 급 비 : 202,463천원(주차장특별회계)

Ⅱ		보고내용 및 검토의견

당초 설계 누락공종 추가

연번	공 종	검토의견	비고
1	관급자재(보도블럭) 하차비	인도조건 현장 차상도로 내역 반영 타당
2	관급자재(보도블럭) 소운반 및 상․하차비	중간집하장에서 현장까지 자재운반 필요 내역반영 타당
3	사급자재(도로경계석) 하차비	인도조건 현장 도착도로 내역 반영 타당
4	사급자재(도로경계석) 소운반 및 상․하차비	중간집하장에서 현장까지 자재운반 필요 내역반영 타당

민원에 의한 신규공종 추가

연번	공 종	검토의견	비고
1	빗물받이 설치(1호)	2016년 동작구 설계기준에 의거 일위대가 산출
2	횡단하수거 설치 (H=0.3m, 400*10,000)	2016년 동작구 설계기준 중 빗물받이 설치에 준하여 일위대가 산출

계약금액 변경 여부 : 계약금액 변경 없음

계약금액 : 202,463천원

※ 계약 물량 조정

Ⅲ		조 치 의 견

누락공종 및 민원에 의한 신규공종을 추가하여 변경계약 함으로써 적정한 공사비 지급을 통한 공사의 품질향상 및 주민만족 향상을 기대하고

9월 추석연휴 전 기성금 지급을 위하여 조속한 변경계약이 필요함

붙  임  :  1) 신규공종 내역 1부

2) 변경 내역서 1부.  끝.