투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(1차) 시행 - 2016년 교통 및 도로부속물 유지보수공사(연간단가)

우리사업소에서 시행중인 『2016년 교통 및 도로부속물 유지보수공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 교통 및 도로부속물 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2016. 03. 02~ 2016. 12. 31

다. 계약금액 : 금123,067,420원

라. 도 급 자 : ***************

마. 설계변경사유

○ 봄맞이 및 추석맞이 교통 및 도로부속물 세척작업 실시로 방호울타리 세척물량이 당초 예상물량보다 증가

○ 서울시 응답소 및 각 구청에서 발생되는 민원의 신속한 해소를 위한 작업지시로 시선유도봉 및 개방형중앙분리대 등 일부 공정 물량변경 발생

바. 변경내역                                          (단위 : 원)

공 종	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
계	142,159,960	142,159,960	-
도급비	123,067,420	123,067,420	-
관급비	19,092,540	19,092,540	-
이전비	0	0	-

사. 예산과목

- 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물 관리, 도로부속시설물 일상유지관리, 시설비

- 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 교통안전관련

도로부속물 설치, 시설비

붙임 : 1, 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.   끝.

주무관	이기영		도로보수과장	이상호		성동도로사업소장	09/02 이종엽
협조자	계약1팀장	조현
시행	도로보수과-4200	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41	/
전화	2210-1538	/전송	2210-1549	/		/	부분공개(5)