문서번호	청년정책담당관-9800
결재일자	2016.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		청년공간지원팀장		청년정책담당관
장재완		황금영		09/02 구종원
협 조

청년활동공간 청년청 내부수선공사 시행계획

2016. 8.

서울혁신기획관

(청년정책담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

청년활동공간 청년청 내부수선공사 시행계획

노후화 된 청년청 내부수선공사를 시행하여 입주단체가 안전하고 쾌적한 공간에서 청년문제에 대한 해결방안을 스스로 모색하고, 다양한 혁신활동을 통해 미래사회의 주체로서 성장을 뒷받침 할 수 있는 공간으로 거듭날 수 있도록 하고자 함

Ⅰ		추진근거

❍ 서울특별시 청년 기본 조례 제20조(청년시설의 설치·운영) 및 제22조

(청년단체 등에 대한 행정적·재정적 지원)

❍ 청년활동공간 청년청[가칭] 조성 계획(서울특별시장 방침 제173호, 2015.6.24.)

❍ 2016 청년활동공간「청년청」운영 계획(청년정책담당관-3742, 2016.4.1.)

Ⅱ		추진경과

❍ 청년활동공간 청년청(가칭) 조성계획 수립	:‘15.6.24.

❍ 22동 분임잭산관리관(청년정책담당관) 지정	:‘15.6.25.

❍ 입주단체 선정 결과 공고	:‘15.8.17.

❍ 청년단체 입주 및 활동	:‘15.12.~

Ⅲ		기본현황

❍ 위    치 : 서울혁신파크 22동 (서울특별시 은평구 소재)

❍ 입주단체 : 장애인여행문화연구소 등 55개 청년단체 (‘16. 8월말 기준)

❍ 계약기간 : ‘15.12. ~ ‘17.2.

❍ 층별용도

구분	용도	총면적(공용면적) 4295.7* (3324.22)
4층	컨퍼런스 홀, 세미나실, 공동창고 등 (예정)	659.34* (659.34)
2․3층	입주공간, 공용공간, 공유서재 등	1818.18* (846.7)
1층	카페, 공동연습실, 공동작업실, 세미나실 등	909.09* (909.09)
지하	다목적 제작실, 공동창고 등 (예정)	909.09* (909.09)

Ⅳ		추진방향

❍ 공간조성 기본방향

- 예산규모, 공사기간 및 건물상태를 고려하여 카페, 공용공간, 방수
공사, 시설개보수 등 최소한의 수준*으로 공간 조성

* 예산사용 최소화와 청년들의 활동이 가능한 ‘원시적인 상태’로 조성(시장 지시사항)

❍ 시설물 내구연한 증가 및 기능향상을 위한 최소한의 보강공사

- 설비시설 교체 또는 보수·보강으로 ‘안전성’ 최우선 확보

- 유휴공간(지하1층, 4층) 활용을 위한 전기·조명 보강공사를

통해 공간 이용 극대화

Ⅴ		추진개요

❍ 추진기간 : ‘16. 9. ~ 11.

❍ 추진내용

구분	주요 내용	비고
지하	외부 연결 출입문 교체 및 도어락 설치 전기설비 보강 및 조명 교체 공사
1층	전기차단기 분리작업(105호~107호)
2층~3층	화장실 보수작업(세면대, 배수관, 양변기 등)
	청소도구 보관 창고 천장 보수	2층
4층	전기설비 보강공사
기타	계단 논슬립 교체 전등 점검 및 안정기 교체 방화벽 설치

❍ 추진방법 : 수의계약(전기설비 보강공사) 및 일상경비지급(기타보수공사)

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제25조 제1항 제5호 및 제30조 제1항 제2호

Ⅶ		추진일정

❍ 전기설비 보강공사

- 공사계약	‘16. 9.

- 공사시행	‘16. 9.~10.

- 준공검사 및 대금지급	‘16. 10.

❍ 기타 내부수선공사	‘16. 9.~11.

Ⅵ		소요예산

❍ 소요액 : 45,000천원

- 산출내역

· 전기설비 보강공사 : 20,000천원

· 기타 내부수선공사 : 25,000천원

❍ 예산과목 : 서울혁신기획관 청년정책담당관, 청년의 삶의 질 획기적 개선, 청년거버넌스 활성화 및 자립기반 조성, 청년활동공간 청년청 운영, 일반운영비, 공공운영비

붙임 1. 청년활동공간 청년청(가칭) 조성계획 1부.

2. 2016 청년활동공간 청년청 운영 계획 1부.   끝.