붙임 2		도시철도(경전철) 각 노선별 추진현황 및 향후계획

노선명	추진 현황	향후 계획
우이신설선	○ '09. 9. : 실시계획승인 및 공사착수 ○ '14.10. : 실시계획변경 승인(공기연장) ○ '15.11. : 차량 반입 · 궤도부설 완료 ○ '16. 3. : 본선 시운전 시행 ○ '16. 9월 : 공사 중(건축마감 등)	○ '16.12. : 출입구 등의 부대공사 완료 ○ '17. 3. : 시운전 ○ '17. 7. : 종합시험운행 및 개통
신림선	○ '15. 8. : 실시협약 체결 ○ '15.12. : 시의회 의견청취(원안가결) ○ '16. 3. : 도시계획위원회심의(조건부 가결) ○ '16. 4. : 도시계획시설(철도)결정 고시 ○ '16. 9월 : 이해관계자 및 중토위 의견조회	○ '16. 9. : 실시계획승인(가시설 및 보상) 및 공사착공
동북선	○ '07. 3. : 최초제안서접수(민간사업자) ○ '10. 5. : 제3자 제안공고 ○ '10.10. : 우선협상대상자 지정 ○ '15. 3. : 주간사(경남기업) 법정관리 확정 ○ '15.12. : 우선협상대상자 지정 취소 ○ '16. 3. : 수정사업계획서 제출(상계역포함) ○ '16. 9월 : 실무 협상 중	○ '16년 하반기 : 본협상 및 가 협약 체결 ○ '17년 상반기 : 민투심 심의 등 민자 사업 절차 이행
위례선	○ '15. 7. : 민자사업제안서 접수 ○ '15.11. : 민자적격성조사의뢰(시→PIMAC) ○ '16. 9. : 민자적격성 조사중	○ '16.하반기 : 민자적격성조사 완료 ○ '17년 : 제3자 제안 공고 등 민자사업 관련 절차이행
위례 신사선	○ '08. 2. : 민자사업제안서 접수 ○ '13.12. : 도시철도 기본계획 변경안 승인 요청(시→국토부) ○ '15. 6. : 도시철도망구축계획 변경 승인 ○ '15. 7. : 도시철도 민간투자사업 설명회 ○ '15. 9. : 민간투자사업제안서 제출요청 ○ '16. 8. : 민간투자사업자 면담	○ '16. 9. : 사업제안서 제출(민간사업자→서울시) ○ '16년말 이후 : 민자적격성조사 의뢰 등 민자사업 관련 절차이행
서부선	○ '08. 8. : 최초제안서 접수 ○ '09. 8. : 민자적격성조사 ○ '13.12. : 도시철도 기본계획 변경안 승인 요청(시→국토부) ○ '15. 6. : 도시철도망구축계획 변경 승인 ○ '15. 7. : 도시철도 민간투자사업 설명회 ○ '15. 9. : 민간투자사업제안서 제출요청 ○ '16. 8. : 민간투자사업자 면담	○ '16. 하반기 : 사업제안서 제출(민간사업자→서울시) ○ '17년 : 민자적격성 조사의뢰 등 민자사업 관련절차 이행

노선명	추진 현황	향후 계획
면목선	○ '07.12. : 민자사업제안서 접수 ○ '09. 8. : 민자적격성조사 ○ '11. 7. : 제3자 제안공고 ○ '11.12. : 우선협상대상자 미지정 (평가기준 미달) ○ '15. 9. : 제3자제안 재공고 ○ '15.10. : 사전자격심사(PQ) 평가서류 접수결과 접수업체 없음 ○ '16. 1. : 민간투자대상사업 지정 취소	○ 민간기업의 사업제안에 따라 추진
우이-신설 연장선	○ '08.11. : 서울시 도시철도 기본계획확정･고시(국토부) ○ '11. 9. : 예비타당성조사(PIMAC) ○ '13.12. : 도시철도 기본계획 변경안 승인요청(시→국토부) ○ '15. 6. : 도시철도망구축계획 변경 승인 ○ '15. 7. : 도시철도 민간투자사업 설명회개최	○ 민간기업의 사업제안에 따라 추진
목동선	○ '05. 7. : 민자사업제안서 접수 ○ '07.11 : 민간제안서 반려(적격성 조사결과 부적격) ○ '08.11 : 서울시 도시철도 기본계획 확정･고시(국토부) ○ '13.12. : 도시철도 기본계획 변경안 승인요청(시→국토부) ○ '15. 6. : 도시철도망구축계획 변경 승인 ○ '15. 7. : 도시철도 민간투자사업 설명회개최	○ 민간기업의 사업제안에 따라 추진
난곡선	○ '10. 3. : 난곡길 지하경전철 도입발표 ○ '10. 8. : 민간사업제안(민간사업자) ○ '12.11. : 민간사업제안서 철회 ○ '13.12. : 도시철도기본계획 변경(안) 승인요청(시→국토부) ○ '15. 6. : 도시철도망구축계획 변경 승인 ○ '15. 7. : 도시철도 민간투자사업 설명회 개최	○ 민간기업의 사업제안에 따라 추진