하자제로 품질만족 불신제로 고객감동

	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	송파권역 도시개발사업 제영향평가용역 용역재개 및 용역기한 연장 검토

1. 우리공사에서 용역 시행중인  「송파권역 도시개발사업 제영향평가용역」과 관련입니다.

2. 위 용역에 대하여 아래와 같이 용역재개 및 용역기한을 연장코자 하오니 재결하여 주시기 바랍니다.

- 아	래 -

가. 용역명 : 송파권역 도시개발사업 제영향평가용역

나. 과업기간 : 2005.06.27. ~ 2015.12.31

다. 용역비 : 848,018,600원

다. 용역중지일 : 2015.12.11. (잔여일수 20일)

라. 용역재개 사유 : 문정지구 북측도로(동남로) 확장(4차선→6차선)에 따라 올림픽훼미리아파트 입주민들이 제기한 소음대책 민원해소를 위하여 추진한 사항에 대하여 교통영향분석 개선대책 변경심의에 따른 과업수행을 위해 기존 수행업체의 용역재개 및 용역기한 연장이 필요한 실정임

마. 용역재개 관련

1) 용역 재개일 : 2016.09.09.일

2) 용역 준공일 : 2016.12.31.일

붙임  용역사 공문.  끝.

부 원						택지설계부장				택지계획처장			택지사업본부장		09/09
		김유수						나재하			김소겸			정현규
협조자

시행			택지설계부-2514				(2016.09.09)			접수				()
방침번호			본부장 방침 제564호
우	135-988			서울특별시 강남구 개포로 621								/	www.i-sh.co.kr
전화		02-3410-7608			전송	02-3410-7408		/	lionheart99@i-sh.co.kr					/	공개