출력일자 :

2016-09-21 09:39:05

(시 구 : 서부공원녹지사업소,)   (부 서 : 공원운영과)   (세 목 : [시일반]위약금및지체상금)

기관명 :서부공원녹지사업소

부서명 : 공원운영과

부과 결의내역서

결의번호

납부자명

납부자주소

주민등록번호

결의일자

물건명

부과/등록일자

세목코드

세목명

국세 가산금

구세 가산금

총액(부가세 제외)

기금 가산금

본세 가산금

국 세

구  세

기 금

본 세

과세키(세목코드-과세년월-과세구분-과세번호)

결의금액

징수부 등재일

부가세

본세 이자

기금 이자

국세 이자

구세 이자

납부일자

항목1

항목2

항목3

항목5

항목4

항목6

(주)서호산업개발 대

선유도공원 환경체험마당 개선공사 지연에 따른 지체상금

-  서울특별시 성북구 보문로 193-2(삼선동4가)

10-228301

[시일반]위약금및지체상금

1,556,130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10**************2-000001

0

6375123

산출근거 : 계약금액 47,155,680원*지체일수 : 33일 *지체상금률 0.1% = 1,556,130원

1,556,130

2098122430

2016-09-10

1,556,130

1

1,556,130

총건수

총금액(부가세 포함)

1,556,130

본세 합:

국세 합:

0

0

구세 합:

기금 합:

0

1,556,130

총액(부가세제외):

0

부가세: