투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경시행

1. 기반시설과-3834호(‘16.09.22.)와 관련입니다.

2.『2016년 한강공원 야외수영장 보수공사(토목)』에 대하여 아래와 같이 설계변경 정산 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 한강공원 야외수영장 보수공사(토목)

나. 공사기간 : 2016.03.23. ~ 2016.9.30.(변경없음)

다. 도 급 사 : ㈜목양건설 대표 김영권

라. 설계변경 내역

1) 변경사유 : 보수물량 증․감에 따른 설계변경 정산

2) 변경금액

(단위 :원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도 급 액	1,321,402,870	1,384,075,000	증62,672,130
공 급 가 액	1,201,275,337	1,258,250,000	증56,974,663
부 가 세	120,127,533	125,825,000	5,697,467

마. 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설관리및개선, 수영장 유지관리, 시설비 (100-401-01)

첨 부:  1. 변경내역서 및 관련문서 각1부

2. 합의각서 1부. 끝.

주무관	김일문		기반시설과장	박일연		시설부장	09/23 박상돈
협조자	주무관	심옥경		총무과장	박병현
시행	기반시설과-3859	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0676	/전송	02-3780-0744	/	kim751515@seoul.go.kr	/	대시민공개