문서번호	설비부-14866
결재일자	2016.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
김원태		임현근	09/26 권오식
협조

『동부간선도로확장공사(3공구) 전기공사(6차공사)』

관급자재(배전반) 납품기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 09.

서울특별시도시기반시설본부

(설비부)

『동부간선도로확장(3공구) 전기공사(6차공사)』

관급자재(배전반) 납품기한 연기 검토보고

「동부간선도로확장(3공구) 전기공사(6차)」상도지하차도에 소요예정인 관급자재(배전반)의 납품기한을 아래와 같이 연기하고자 보고드림

Ⅰ. 관련근거

□ 동삼감 제2016-154(2016.09.22) : 관급자재(배전반) 납품기한 연기요청

Ⅱ. 공사개요

□ 공 사 명 : 동부간선도로확장공사(3공구) 전기공사(6차)

□ 공사위치 : 상계주공16단지~의정부시계간 2.25km내 지하차도 2개소

□ 공사기간 : 2016. 01. 22 ～ 2016. 12. 10

□ 공 사 비 : 421,767천원

□ 시 공 사 : ㈜정등전력 대표 김병갑

□ 감 리 사 : 동부ENG(주)

Ⅲ. 관급자재(배전반) 계약현황

납품 요구번호	규 격	계약업체	계약금액	납품기한	비고
12162083700	배전반 및 MCC반	㈜삼성파워텍 박봉서	75,000,000원	2016.09.30

Ⅳ. 연기내용 검토

□ 연기사유 : 선행(토목)공정 지연으로 납품(설치)시기 미도래

□ 관급자재 납품기한 연기

건 명	금 액	납품요구번호	납품기한		비 고
			당 초	변 경
배전반 및 MCC반	75,000,000	12162083700	2016.09.30	2016.12.10	72일 연기

□ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅴ. 조치 의견

∙납품시기가 미도래한 관급자재(배전반)에 대하여 공정에 맞춰 납품될 수 있도록 연기하고자 함.

따로붙임 : 관련공문 및 연기합의서 각  1부.   끝.