	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기의뢰[탄천물재생센터 복개공원(4단계) 조성 전기공사]

우리부에서 시행중인『탄천물재생센터 복개공원(4단계) 조성 전기공사』에 소요되는 관급자재 납품기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 조치하여 주시길 바랍니다.

가. 공 사 명 : 탄천물재생센터 복개공원(4단계) 조성 전기공사

나. 관급자재 납품기한 연기 내용 : 따로붙임

다. 연기사유 : 선행공정(토목) 공사기간 연기에 따른 관급자재 설치시기 미도래

라. 계약금액 및 수량 : 변경없음

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 : 1. 관급자재 납품기한 연기내용 1부.

2. 합의서 각1부.  끝.

	설비부장
주무관	김두환		열빛총괄과장	유병기		설비부장	09/27 권오식
협조자
시행	설비부-14941	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8(무교동 96) 프리미어 플레이스 빌딩 15F 도시기반시설본부 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송	02-3708-8659	/	buckgolje@seoul.go.kr	/	부분공개(5)