투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	관급자재(레미콘) 납품기한 연기(현장근로자 근로환경 개선공사)

1. 시설과-5202(2016.09.27.)호와 관련입니다.

2. 상기 대호와 관련「보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(별동 신축)」에 소요되는 관급자재의 납품기한을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

가. 납품명 : 보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사 관급자재 구매

나. 관급자재 구매현황

구 분	납품요구번호	수 량	계약금액	납품회사	납품기한
레미콘	12-16-1-20253-00	653.0㎥	43,185,380	서울경인레미콘	‘16.09.30

다. 납품기한 연기

- 레미콘 : 2016.09.30. → 2016.10.10.

라. 납품기한 연기사유

- 공사기간 연장

마. 지체상금 부과검토

- 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임 : 1. 납품기한 연기조치 의뢰서 1부.

2. 관급자재 납품기간 연장보고 1부. 끝.

	시설과장
★주무관	김영균		시설팀장	임록화		시설과장	09/27 진병규
협조자	주무관	이전호
시행	시설과-5213	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/
전화		/전송	02-2181-1169	/		/	대시민공개