설계변경자문회의(소회의)결과(제1차)

【2014. 2. 18(화)】

문서요청부서			방재안전시설부					담 당 자			김상용					요청일자			2014. 2
공 사 명			서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업										심의안건		④ 대체 축구장 조성
공 사 개 요			공사규모				○ 축구장 설치 : 폭 91m, 길이 63m
			공사기간				2012.02.06 ~ 2014.02.28
			감 리 사				㈜도화엔지니어링외 1개사
			설 계 사				(주)한국종합기술
			시 공 사				대림산업㈜ 외 5개사
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 383,000천원
설계변경사유(요약) ○ 강서지역 축구동호회, 서남환경(센터 운영사) 등과 협의를 통해 샌터內 이전 위치를 결정, 국제규격 수준의 규모로 설계하였으며, 축구장에 통상적으로 반영되는 배수시설 및 포장 적용 및 부지여건 및 기타 의견을 수렴하여 4면휀스(H=5~7m), 간이화장실 등 부대시설 설치 .
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 터파기 수량산출 재검토(p303) → 집수정 터파기 수량 오류 ○ 출입문 견적서 단가적용 재검토 → 출입문에 대한 견적서 가격 차이가 크므로, 추가 견적을 받아 단가 비교 검토하여 신뢰성 확보 ○ 협의율 적용근거 불분명 → 협의율 적용근거를 추가 보완
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원