구민이 주인되는 희망강북!
		강북구
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(1회-정산)-인수봉로17길 하수관로 정비공사

우리구에서 시행하고 있는 「인수봉로17길 하수관로 정비공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회-정산)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명: 인수봉로17길 하수관로 정비공사

2. 착 공 일: 2016. 05. 13.

3. 준공기한: 2016. 09. 30.

4. 도 급 자: 대민공영(주)  대표 전인영

5. 설계변경 내역                                        (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총공사비	362,855,700	400,000,000	증 37,144,300
도 급 비	284,095,700	359,144,000	증 75,048,300
관 급 비	37,131,000	37,842,120	증 711,120
이 전 비	41,629,000	3,013,880	감 38,615,120

6. 예산과목

- 안전치수과, 하수기반시설의확충및정비, 하수관거정비및준설사업지속추진, 인수봉로17길하수관로정비공사, 시설비및부대비, 시설비(구비)

※ 계약심사(2016. 9. 22.) 및 일상감사(2016. 9. 26.) 완료

붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 변경설계서(정산) 1부.

3. 제비율검증대장 1부.

4. 일상감사 및 계약심사 결과 각 1부.

5. 방침서 각 1부.  끝.

주무관	전기훈		하수관리팀장	장현준		안전치수과장	함명수		건설안전교통국장	전결 09/28 김희동
협조자	계약팀장	지우경		재무과장	김영모
시행	안전치수과-16772	(		)	접수		(		)
우	01133	서울특별시 강북구 솔매로49길 14(미아동)	/	http://www.gangbuk.go.kr
전화	02-901-5883	/전송	02-901-5880	/	junshgh@gangbuk.go.kr	/	부분공개