함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	계약사항 변경(납품기한) 요청

1. 기전설비과-8154(2016.9.28.)호와 관련입니다.

2. 우리 부에서 추진중인 ‘자양취수장 구의계통 취수펌프 제작 구매’건의 계약기간을 변경하고자 하오니 아래와 같이 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 자양취수장 구의계통 취수펌프 제작 구매

나. 계약번호 : 제12162094700호

다. 계약대상 : 한성중공업(주) 대표자 : 김흥철

라. 변경사항 : 계약기간 변경

1) 당초 : 2016.05.24. ~ 2016.09.30.

2) 변경 : 2016.05.24. ~ 2016.10.31.(31일 증)

마. 변경사유 : 9월1일 펌프 설치 및 구의계통 통수 예정이었으나, 도수관로 누수 및 보수로 인하여 통수일이 지연되어 펌프 효율츶정이 불가하므로 계약 기간을 연장하고자 함.

바. 귀책사유 : 우리 본부

붙임  1. 연기 보고서        1부.

2. 합의서(부경이엔지) 1부.

3. 최초 계약서        1부.  끝.

	기전설비과장
주무관	배성준		기전설비과장	09/29 서대훈
협조자
시행	기전설비과-8161	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	3146-1337	/전송	3146-1319	/	baesj9710@seoul.go.kr	/	대시민공개