주간 진척보고서				시스템명		2016년 항공사진 고도데이터 서비스 용역
문서번호	R160930	작성자	박성원	작성일	2016/9/30	버 전	1.0

프로젝트명	2016년 항공사진 고도데이터 서비스 용역
프로젝트책임자	박철희	진척율	개발	DB구축	사업관리	전체
		계획	23.19/50.0	2.4/40.0	4.81/10.0	30.4/100.0
		실적	21.71/50.0	2.4/40.0	4.77/10.0	28.88/100.0

주요 내용	1. 항공사진 다운로드 통계 기능 개선
업무구분	금 주 실 적 (2016.09.26 ~ 2016.09.30)	차 주 계 획 (2016.10.04 ~ 2016.10.07)
사업관리	1. 사업관리 - 개발 및 DB구축 일정 체크 - 월간보고 작성(9월) - 중간보고회 일정 문의 : 2016년 10월 24일(예정)	1. 사업관리 - 개발 및 DB구축 일정 체크 - 중간보고회 자료 작성
시스템개발	1. 구현 - 통계정보 개선 1.1 항공사진 보유 현황 1.2 항공사진 이용 통계 1.3 항공사진 활용 목적 통계	1. 구현 - 항공사진 촬영성과 관리 기능 개선 1.1 Tab으로 구분되게 UI개선
D B 구 축	1. 2016년 항공사진 입수 - 입수일 : 2016년 9월 28일(수) 2. 항공사진 DB변환 및 정비 - 자료 분석 및 확인 : 포맷 및 에러 데이터 확인(진행중) : 주기 표시 및 사진 외곽선 유무 확인(진행중) 3.수치표고모델 입수(공간정보산업진흥원) - 입수일 : 2016년 9월 27일(화) - 입수 데이터 현황 - 데이터 포맷 : img 4. 수치표고모델 구축 - 자료 분석 및 확인 :수치표고모델 고도값 에러 확인 (마이너스 표고값 등) - 자료 분석 결과 전달 : 공간정보산업진흥원 담당자에게 관련 내용 전달, 내부 검토 후 처리여부 전달받기로 함 (10월초 예정)	1. 항공사진 DB 변환 및 정비 - 자료 분석 및 확인 : 포맷, 주기 및 외곽선, 사진 상태 등 - 파일 포맷 변환 : JPEG2000
이슈사항