문서번호	녹지관리과-9312
결재일자	2016.10.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	녹지관리과장	중부공원녹지사업소장
김희태	강병기	김윤철	10/04 이용태
협 조

2017년 예방사방사업 추진계획

2016. 10.

서울시중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

2017년 예방사방사업 추진계획

’17년 예방사방사업을 우기 전(’17.6월)에 완료하여 집중호우 시 산사태 피해 등을 사전에 예방하고자 함

Ⅰ. 추진근거

❍ 산지방재과-10367호(2015.9.21), 2017년 산사태 예방사업 추진계획

Ⅱ. 사업개요

❍ 대    상 : 용산구 용산동2가 산1-3등 12개소              (단위: 천원)

연번	소 재 지	사업종	사업비	비고
1	용산구 용산동2가 산1-3 (팔각휴게소인근)	계류보전	304,000
2	용산구 후암동 산1-2(독일문황원 건너)	산지사방	41,000
3	중구 회현동1가 산1-16(남산3호터널 기계실 옆)	계류보전	76,000
4	중구 장충동2가 산14-3(동국대남산학사 옆)	위험절개지	55,000
5	종로구 창신동 615-279(낙산공원 버스종점)	산지사방	38,000
6	용산구 한남동 산9-23(3호지)	산지사방	31,000
7	용산구 한남동 산10-96	계류보전	15,000
8	중구 예장동 산5-6(1호지)	계류보전	112,000
9	중구 예장동 산5-6(2호지)	위험절개지	19,000
10	중구 예장동 산5-6	위험절개지	83,000
11	중구 장충동 산14-21	계류보전	83,000
12	중구 장충동 산14-55	위험절개지	12,000

❍ 사업기간 : ’16. 10. ~ ’17. 6.

❍ 사 업 비 : 824,000천원(공사비 750,000천원, 설계비 74,000천원)

❍ 예산과목 : 푸른도시국 산지방재과, 산림안전관리, 산림재해방지, 사방사업, 시설비및부대비, 시설비

Ⅲ. 추진계획

❍ ’16. 10.         : 실시설계 기술용역타당성 심사

❍ ’16. 10.         : 실시설계용역 발주 및 업체 선정

❍ ’16. 11. ~ 12. : 설계용역 시행(설계심의 등)

❍ ’17. 01. ~ 02. : 입찰, 공사계약

❍ ’17. 03. ~ 06. : 공사 시행 및 공사준공

Ⅳ. 보고자의견

❍ 예방사방사업을 우기전(’17. 6월) 완료하기 위하여 설계용역은 금년도 예산집행잔액을 산지방재과로부터 재배정받아 ‘16년 12월말까지 완료

붙임 : 사엉ㅂ대상지 현황사진 각 1부. 끝.