문서번호	조경과-5108
결재일자	2016.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	주무관		조경과장		관리부장		서울대공원장
조진성	강금완		강인호		홍순길		10/07 송천헌
협 조
	주무관					박치순
	전문관					서동민

「입구숲(진입로) 조성공사」공정회의 결과보고

2016. 10.

조 경 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「입구숲(진입로) 조성공사」공정회의 결과보고

「입구숲(진입로) 조성공사」추진과 관련 공정회의를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림

□ 회의개요

○ 일    시 : 2016. 9. 30(금) 14시

○ 장    소 : 공사현장

○ 참 석 자 : 원장님, 시설과장, 조경과장, 박치순, 강금완, 서동민, 조진성, 시공사 현장대리인

○ 회의안건 : 공사 추진사항 보고, 현안사항 검토 및 논의

□ 회의내용 및 처리방안

○ 경관개선 등 사업효과 극대화를 위해 지하철입구 ‘만남의 장소’ 조성은 보류하고, 2차구간 우선 조성할 것(원장님 요청사항)

⇒ 2차구간 일부(약 2,000㎡) 편입하고, 지하철역 주변은 금회공사 제외

공사제외

공사제외

➡

공사구간 추가

○ 경관숲의 품질을 높이기 위해 외곽의 불량느티나무 추가 제거, 숲길은 제외하는 방안 검토

□ 추진계획

○ 연장구간에 대하여 공사가림막(약150m) 설치 및 임시통행로 개설

- 추가 공사구역내 노점상 운영 제한(운영과)

- 임시통행로상 보행자 안전을 위한 유도등 연장 설치(시설과)

○ 공사구역 추가로 인한 소요예산은 데크, 키오스크 등 일부시설물 제외한 차액과 낙찰차액 활용

○ 공사구역 및 공종 변경으로 인한 공사기한 연장은 별도 조치

○ 위와 같이 우선 조치하도록 시공사에 통보하고 추후 설계변경 처리.  끝.