문서번호	시설과-6749
결재일자	2016.10.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
전문관	시설과장
서동민	10/10 공헌구
협 조
	주무관		代이강호

2016년 서울대공원 하수관 준설공사 설계변경 및 준공정산 검토 보고

2016. 10.

서 울 대 공 원

(시 설 과)

『2016년 서울대공원 하수관 준설공사』

설계변경 및 준공정산 검토보고

2016년 서울대공원 하수관 준설공사 시행중 물량증감에 대한 설계변경 및 준공정산에 대하여 검토 보고함.

Ⅰ		추진근거

□ 2016년 서울대공원 하수관 준설공사 시행 시설과-6028(2016. 9. 6)

□ 서울특별시 하수도 사용 조례 및 서울시 하수도 유지관리 지침

Ⅱ		공사개요

□  공 사 명 : 2016년 서울대공원 하수관 준설공사

□  공사기간 : 2016. 9.13 ～ 2016.10.12

□  도 급 자 : 은송토건(주) 대표 민은아

□  계약금액 : *************************

Ⅲ		현재까지 추진현황

□ 추진현황

○ 2016. 9. 9 : 공사계약

○ 2016. 9.13 : 공사착공

Ⅳ		설계변경 사유

□ 설계물랑과 시공물량 변동 발생

○ 당초계약시 시공예상 물량을 반영 계약하였으나 작업지시에 의한    물량 증·감 발생

○ 동물사 주변 하수관 준설 및 세정 요청에 따른 물량 변동

□ 4대보험료, 퇴직공제부금비, 하도급발급수수료외 기타경비 정산.

Ⅴ		설계변경 사항

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
도급비	19,830,000	19,830,000	변경없음
공사기간	2016. 9. 13 ~ 2016. 10. 12	2016. 9. 13 ~ 2016. 10. 12	변경없음

※ 계약금액 및 계약기간 변경없는 내역서 변경

Ⅵ		설계변경 내용

□ 공종별 변경내용 증·감

공종	설계변경 내용	공사비 증.감	비 고
흡입준설	V = 40㎥ → 36㎥	감) 300,696
하수도세정	L = 2,000m → 2,500m	증) 1,499,000
빗물받이 준설	N = 200개소 → 8개소	감) 788,661
준설토운반	V = 50㎥ → 34㎥	감) 82,304
준설토처리	V = 60TON → 55TON	감) 105,000
CCTV 조사	L = 420m → 445m	증) 109,600
제경비	간접노무비, 보험료, 경비, 안전관리비, 퇴직공제부금비, 이윤, 부가가치세 등	감) 436,939
계		증감없음

Ⅶ		처리의견

□  위와 같이 공사물량 변동 사항에 대하여 설계변경하고 준공정산 처리하고자 함. 끝.