문서번호	설비부-14344
결재일자	2016.9.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박경철		임현근	전결 09/13 권오식
협조

‘개포디지털 혁신파크 조성 전면 리모델링 기계설비공사’

실정보고에 대한 검토보고

2016. 09.

도시기반시설본부

(설비부)

‘개포디지털혁신파크 조성 전면 리모델링 기계설비공사’

실정보고에 대한 검토보고

‘개포디지털혁신파크 조성 전면 리모델링 기계설비공사’ 관련, 건설사업관리 기술단으로부터 제출된 실정보고 사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 개포디지털 혁신파크 조성 전면 리모델링 기계설비공사

❍ 위    치 : 강남구 개포로 416(개포동 153,153-1)

❍ 공사규모 : 본관(지하1층/지상5층), 신관(지하1층/지상5층)

체육관(지상2층), 수위실(지상1층), 연면적 6,078㎡,

❍ 공사기간 : 2016. 01.20. ~ 2016. 09.30.

❍ 공 사 비 : 1,489백만원(도급 634, 관급 855)

2		관련근거

❍ 디지털창업과-741(2016.09.08.) : 공기순환기 덕트 테이핑 요청

❍ ㈜포스코에이앤씨건축사사무소 개포씨엠-263(2016.09.12.)

- 공기순환기 덕트 테이핑 실정보고

3		실정보고내용

❍ 실정보고 내용 및 사유

공 종	당 초	변 경	실정보고 사유 및 변경금액
공기순환기 설치 (본관, 신관, 다목적동)	- 아연도 강판 덕트 ‣ D200 : 1,220m	- 아연도 강판 덕트 외부 마감 : 흰색테이핑 마감처리 ‣ D200 : 1,220m	- 주관부서(디지털창업과)변경요청 ‣ 공기순환기 덕트 디자인 제고를 위한 외부 마감 - (증) 12,000천원

❍ 소요예산 : (증) 12,000천원(제경비를 제외한 개략금액임)

❍ 건설사업관리단 검토의견

상기와 같이 도급사에서 제출한 실정보고 내용을 검토한 결과, 주관부서 요청에        의한 반영 사항이며 또한 원활한 시설관리 및 디자인 제고를 위한 변경사항으로         적정하다고 판단됨

4		보고자 의견

❍ 주관부서 요청사항 반영 및 디자인 제고를 위한 건설사업관리단의 검토보고

내용이 적정하다고 판단되므로, 우선 승인하여 선 시공토록 조치하고       추후 설계변경 반영하고자 함.

따로 붙임 : 실정보고 관련 문서 1부.  끝.