의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-21388
결재일자	2016.10.19.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	건설총괄부장

주무관		광역도로과장	토목부장	시설국장		결재
한병찬		진재섭	김영수	10/19 형태경
협 조

제 목	시의회 행정사무감사 요구자료 제출(연번 86, 131, 188)

시의회 행정사무감사 요구자료를 따로붙임과 같이 제출코자 합니다.

연번	요구의원	요 구 자 료	비고
86	문종철 의원	○ 구리암사대교 건설공사 관련 - 시설물 인수인계를 위한 합동점검결과 및 지적사항 및 조치(계획)내역 - 잔여공사 내역 - 시공사 공사이행지체 사유 및 지체상금 부과내역
131	유광상 의원	○ 구리암사대교 건설공사 관련 - 시공사의 공사계약이행지체 사유 및 지체상금 부과내역 - 시설물 인수 인계를 위한 합동점검 결과 - 당초 설계대비 변경사항 세부내역,사유,증감금액
188	이종필 의원	○ 구리암사대교 지체상금 산출내역 및 납부기한

붙임 : 요구자료 3 부.  끝.

문종철 의원(도시안전건설위원회, 더불어민주당)

86. 구리암사대교 건설공사 관련

(1) 시설물 인수 인계를 위한 합동점검 결과 및 지적사항 및 조치(계획)내역

(2) 잔여공사 내역

(3) 시공사 공사이행지체 사유 및 지체상금 부과내역

□ 시설물 인수인계를 위한 합동점검 결과 및 지적사항, 조치(계획)내역은

아래와 같습니다.

○ 점검기간 : 2016. 7.19. ∼ 8. 30.

○ 점검기관(부서) : 교량안전과 등 4개 기관(부서)

○ 점검결과 : 297건 지적

- 배수시설 불량 및 가드레일 보완(시공 표찰 등)

- 분전반 점검계단 설치, 거더 내부 오염 등 박스내부 부점등

○ 조치(계획)내역

(’16.10.20.기준)

지적건수	조치완료	조치 중	비고
297건	176건	121건

□ 잔여공사 내역

○ 현재 잔여공사는 아천IC 교통광장내 ‘군․경 합동검문소(초소)’ 건축공사로

2016.11.30.일까지 완료할 예정입니다.

- 건축 규모 : 지상 3층, 연면적 816.07㎡

□ 시공사 공사이행지체 사유 및 지체상금 부과내역

○ ‘구리암사대교 건설공사’는 2006.3.23. 장기계속계약공사로 체결하여 계약 준공기한인 2016.8.31.까지 미 이행된 건축공사(군·경 합동검문소)지연으로 ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’ 제26조(지체상금) 및 공사계약일반조건 제25조(지체상금)의 규정에 의해 계약이행 지체상금을 부과 조치하였습니다.

※ 잔여공사(건축) 공정(’16.10.20.기준 47.5%)

○ 공사계약이행 지체에 따른 지체상금은 계약상대자가 제출한 완료기한(’16.11.30.)을 기준으로 총 91일간 240,968천원이며, 잔여공사 완료시 정산 조치할 예정입니다.

- 지체상금 부과금액 : 240,968천원(2,648천원/일)

⇒ 0.1% × 2,648,000천원 × 91일(’16.11.30.) = 240,968천원

‣ 지체상금율 : 0.1%

‣ 지체일수 : 91일 (’16.9.1.∼ ’16.11.30.)

‣ 부과대상 : 2,648,000천원(계약액 3,163,000천원 – 기성액 515,000천원)

작성자	기관명 (부 서 명)	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (토목부)	담당사무관	진재섭
	☎3708-2557	주무관	한병찬
	작 성 일 : 2016. 10.

유광상 의원(도시안전건설위원회, 더불어민주당)

131. 구리암사대교 건설공사 관련

(1) 시공사의 공사계약 이행지체 사유 및 지체상금 부과내역

(2) 시설물 인수인계를 위한 합동점검 결과

(3) 당초 설계 대비 변경사항 세부내역,사유, 증감 금액

□ 시공사의 공사이행지체 사유 및 지체상금 부과내역은 다음과 같습니다.

○ ‘구리암사대교 건설공사’는 2006.3.23. 장기계속계약공사로 체결하여 계약 준공기한인 2016.8.31.까지 미 이행된 건축공사(군·경 합동검문소)지연으로 ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’ 제26조(지체상금) 및 공사계약일반조건 제25조(지체상금)의 규정에 의해 계약이행 지체상금을 부과 조치하였습니다.

※ 잔여공사(건축) 공정(’16.10.20.기준 47.5%)

○ 공사계약이행 지체에 따른 지체상금은 계약상대자가 제출한 완료기한(’16.11.30.)을 기준으로 총 91일간 240,968천원이며, 잔여공사 완료시 정산 조치할 예정입니다.

- 지체상금 부과금액 : 240,968천원(2,648천원/일)

⇒ 0.1% × 2,648,000천원 × 91일(’16.11.30.) = 240,968천원

‣ 지체상금율 : 0.1%

‣ 지체일수 : 91일 (’16.9.1.∼ ’16.11.30.)

‣ 부과대상 : 2,648,000천원(계약액 3,163,000천원 – 기성액 515,000천원)

□ 시설물 인수인계를 위한 합동점검 결과

○ 점검기간 : 2016. 7.19. ∼ 8. 30.

○ 점검기관(부서) : 교량안전과 등 4개 기관(부서)

○ 점검결과 : 297건 지적

- 배수시설 불량 및 가드레일 보완(시공 표찰 등)

- 분전반 점검계단 설치, 거더 내부 오염 등 박스내부 부점등

○ 조치(계획)내역

(’16.10.20.기준)

지적건수	조치완료	조치 중	비고
297건	176건	121건

□ 당초 설계 대비 변경사항 세부내역,사유, 증감 금액 : 붙임 참조

붙  임 : 설계 대비 변경내용 1 부.     끝.

작성자	기관명 (부 서 명)	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (토목부)	담당사무관	진재섭
	☎3708-2557	주무관	한병찬
	작 성 일 : 2016. 10.

이종필 의원(도시안전건설위원회, 새누리당)

188. 구리암사대교 지체상금 산출내역 및 납부기한

□ 시공사 공사이행지체 사유 및 지체상금 부과내역은 다음과 같습니다.

○ ‘구리암사대교 건설공사’는 2006.3.23. 장기계속계약공사로 체결하여 계약 준공기한인 2016.8.31.까지 미 이행된 건축공사(군·경 합동검문소)지연으로 ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’ 제26조(지체상금) 및 공사계약일반조건 제25조(지체상금)의 규정에 의해 계약이행 지체상금을 부과 조치하였습니다.

※ 잔여공사(건축) 공정(’16.10.20.기준 47.5%)

○ 공사계약이행 지체에 따른 지체상금은 계약상대자가 제출한 완료기한(’16.11.30.)을 기준으로 총 91일간 240,968천원이며, 잔여공사 완료시 정산 조치할 예정입니다.

- 지체상금 부과금액 : 240,968천원(2,648천원/일)

⇒ 0.1% × 2,648,000천원 × 91일(’16.11.30.) = 240,968천원

‣ 지체상금율 : 0.1%

‣ 지체일수 : 91일 (’16.9.1.∼ ’16.11.30.)

‣ 부과대상 : 2,648,000천원(계약액 3,163,000천원 – 기성액 515,000천원)

작성자	기관명 (부 서 명)	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (토목부)	담당사무관	진재섭
	☎3708-2557	주무관	한병찬
	작 성 일 : 2016. 10.