재해위험지역 정비사업 실적보고서

1. 지구지정·해제 현황

ㅇ 지 구 명 : 화곡1재해위험개선지구, 유형 및 등급 : 침수위험지구/ “가”등급

ㅇ 위    치 : 서울특별시 강서구 화곡동 1106-1 일원

ㅇ 지정면적 : 110,720㎡

ㅇ 지정일자/해제일자 : 2011년 4월 18일/ -

2. 정비사업 추진 현황

ㅇ 사 업 명 : 강서구청사거리~가양빗물펌프장간 하수암거 정비공사

ㅇ 사업내용 및 규모 : 하수암거 신설(▣3.0×2.5@2연, L=2,060m)

ㅇ 사업기간 : 2012. 5. 11. ~ 2017. 12. 15.

ㅇ 총사업비 : 49,310백만원(공사비 49,310)

ㅇ 시행기관 : 서울특별시 강서구

ㅇ 시공회사 : 케이월드종합건설(주) 외 4

3. 지구 지정 및 사업추진 실태

4. 연차별 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
사업내용		· 하수암거 신설 · 지장물이설	· 실시설계	· 하수암거 신설 · 지장물이설	· 하수암거 신설 · 지장물이설	· 하수암거 신설 · 지장물이설	· 하수암거 신설 · 지장물이설	· 하수암거 신설 · 지장물이설
예산	계	42,518	900	5,788	7,227	11,973	10,044	6,586
	국 비	22,652 (53%)	(%)	3,000 (52%)	4,336 (60%)	5,986 (50%)	5,022 (50%)	4,308 (65%)
	지방비	19,866 (47%)	900 (100%)	2,788 (48%)	2,891 (40%)	5,987 (50%)	5,022 (50%)	2,278 (35%)
집행	계	36,048	900	5,788	7,227	11,973	10,044	116
	국 비	18,344 (51%)	(%)	3,000 (52%)	4,336 (60%)	5,986 (50%)	5,022 (50%)	(%)
	지방비	17,704 (49%)	900 (100%)	2,788 (48%)	2,891 (40%)	5,987 (50%)	5,022 (50%)	116 (100%)
집행잔액	계	6,470						6,470
	국 비	4,308 (67%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	4,308 (67%)
	지방비	2,162 (33%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	2,162 (33%)

※ 2016년 집행잔액은 지장물 이설 지연 등으로 인해 해당년도 내 집행이 어려워 명시이월 조치

ㅇ 총 사업비 세부 집행현황

공종	세부공종	설계상내역	집행액	비 고
실시설계비	실시설계비	900	900
도급비 (하수암거 신설)	도급비 (하수암거 신설)	21,760	21,760
관급비	관급비	4,974	4,974
이설비	이설비	7,134	7,134
감리비	감리비	1,280	1,280

5. 정비사업 시행을 통한 개선사례

□ 위    치 : 서울특별시 강서구 화곡동 1106-1 일원

□ 피해원인 및 내용

○ 피해개요 : 2010.9.21 집중호우 시 침수피해 발생

○ 피해상황 : 주택 및 상가침수 1,464동, 시가지 11.1ha 침수

○ 피해현황

- 우리구 전역의 하수도관 시설 용량은 지선 65mm, 간선 75mm 이나 9월 21일 강우는 시간당 96mm(일강우량 293mm)로 기존 배수시설의 시설  용량을 초과하는 강우량에 의한 침수피해로 화곡동, 등촌동, 방화동, 염창동 등 강서구 일원에서 주택, 상가, 공장, 주요 간선 및 이면도로 침수피해 발생

□ 정비효과

○ (사업내용) ‘12년~’17년까지 총 사업비 49,310백만원 투자, 하수암거를 신설하여 강우 시 우수처리 능력을 향상시켜 침수 예방

- 하수암거 신설 2.06㎞

○ (정비효과) 공사 완료(2017.12.15.) 후 침수해소 효과 거양할 것으로 사료됨

6. 주요사진

□ 사업시행 전

사진설명 : 2010.9.21 집중호우 시 침수발생

□ 사업시행 후(완료구간)

사진설명 : 하수암거 부설

재해위험지역 정비사업 실적보고서(요약)
□ 기본현황
	지 구 명		화곡1재해위험지구
	위 치		서울특별시 강서구 화곡동 1106-1 일원
	유형/면적/등급		침수위험지구/ “가”등급
	지정ㆍ해제일자		(지정일) 2011.4.18 / (해제/예정일)
	수 혜		인명보호 63,038세대 161,796명, 건물 56,773동, 침수예방 500ha(시가지)
□ 과거 피해사례
	발생일자		2010.9.21
	강우현황		일강우량 293mm 1시간 최대 96mm
	피해내용		주택 및 상가침수 1,464동 시가지 11.1ha침수 등
□ 정비내용
	정비기간		2012. 5월 ~ 2017. 12월(6년 68개월간)
	투자현황 (국비+지방비)		총 49,310백만원(’11년 900, ’12년 5,788, ’13년 7,227, ’14년 11,973, ’15년 10,044, ’16년 6,586, ’17년 이후 6,792)
	정비내용		하수암거 신설 ▣3.0×2.5@2연, L=2,060m
□ 정비효과
	정비효과 (공사 시행중)		2010.9.21 일강수량 293mm 집중호우가 발생하였으나, 공사 완료 후 해당 지역의 침수피해가 발생되지 않을 것으로 사료됨

□ 정비 전․중․후 사진대지
		2010.9.21 집중호우 시
		하수암거 신설 공사 중
		공사 완료 사진 (완료구간)