‘16년 퇴적물 준설사업 완료 보고서

□ 사업개요

ᄋ 사 업 명 : 한강준설(상수원) 정비공사

ᄋ 사업기간 : 2016. 4. 1 ~ 2016. 12. 30

ᄋ 총사업비 : 941백만원

ᄋ 처리구역 : 잠실수중보 상류~강일동 시계구간

- 성남, 풍납, 강북 취수장 주변 준설

□ 추진경위

ᄋ ‘16년 02월 00일 공사 발주

ᄋ ‘16년 03월 28일 공사 계약

ᄋ ‘16년 04월 01일 공사 착공

ᄋ ‘16년 12월 20일 공사 준공

□ 추진결과

구 간	준설기간	계획 준설량(m3)	완료 준설량(m3)	처리방법
성남취수장	16.8 ~ 9	2,400	2,400	농지 성토재 사토처리
풍납취수장	16.9 ~ 10	20,000	21,050	농지 성토재 사토처리
강북취수장	16.10 ~ 11	900	900	농지 성토재 사토처리
사토반출	16.11~12	-	24,350	사토운반

□ 기타사항

ᄋ 추진성과

- 잠실 상수원 취수장 주변 준설에 따른 수질개선

ᄋ 사업 추진과정에서 나타난 문제점 및 개선방안

- 없음

ᄋ 각 구간별 현장사진 : “첨부”

□ 현장사진