【작성서식】

급수부

□ 2017년 신속집행 집중관리 대상사업

(단위:백만원)

사 업 명	예산현액	대상액	집행 계획						상반기 집행률
			계	1․2월	3월	4월	5월	6월
간선배관부설공사	3,000	3,000	2,565		284	290	435	1,556	86%

		간선배관부설 공사

급수수요 증가 등에 대비한 상수도 관로 신규부설, 구경확대 및 단절관에 대한 정비

□ 사업 개요

○ 위 치 : 서울특별시 급수구역

○ 규 모 : D50~300㎜, L=6,500m

○ 기 간 : 2017.1 ~12월

□ ’17년 신속집행 추진 계획

○ 신속집행 추진 계획

(단위:백만원)

사 업 명		예산현액	대상액	집행 계획						상반기 집행률
				계	1․2월	3월	4월	5월	6월
간선배관부설공사	계	3,000	3,000	2,565	-	284	290	435	1,556	86%
	단위사업 (4건)	1,950	1,950	1,950	-	240	290	390	1,030
	연간단가 (21건)	615	615	615		44		45	526
	하반기 집행	285	285
	미배정	150	150

※ 연간단가 21건 중 7건은 도로굴착 통제로 하반기 완료 예정(285백만원)

□ 실적 제고방안

○ 발주 공사

- 3월중 발주 및 선금급 지급

- 공사 자재의 선 구매 및 굴착 복구비 선납

- 상반기 안에 준공하여 조기 집행 실적 제고

○ 연간단가 업체 시행 공사

- 상반기 내 공사 완료 및 정산 시행

- 공사 자재의 선 구매 및 굴착 복구비 선납

		간선배관 부설공사 추진 및 집행계획

□ ’17년 신속집행 추진 계획(상반기)

○ 신속집행 추진 계획

(단위:백만원)

연번	사 업 명	대상액	발주구분	공사진행 및 집행 계획
				계	3월	4월	5월	6월	비고
계	계	3,000
				2,565	284	290	435	1,556
1	종암동 3-551~81-63 D100㎜, L=240m	100	연간 단가				공사시행	정산시행
				100				100
2	종암동 54-395~54-401 D100㎜, L=150m	60	연간 단가			공사시행		정산시행
				60	-	-		60
3	홍제동 460~13-62번지 D50~80㎜, L=460m	250	발주		발주 및 착공	공사시행	준공
				250	50	50	150
4	갈현동 413-1 ~ 391-46번지간 D100㎜, L=50m	25	연간 단가			공사시행	정산시행
				25		-	25
5	진관동 88-17 ~28번지간 D200㎜, L=25m	20	연간 단가			공사시행	정산시행
				20		-	20
6	역촌동 19-27~39번지간 D100㎜, L=80m	40	연간 단가						하반기시행
				0					도로굴착통제
7	면목동 68-7 ~ 50-46 D300㎜, L=15m	15	연간 단가						하반기시행
				0	-	-			굴착통제
8	중화동 274번지 일대 D150㎜, L=240m	110	연간 단가		공사시행			정산시행
				110	-	-		110
9	묵동 122-1 ~ 122-295 D150㎜, L=50m	25	연간 단가		공사시행			정산시행
				25	-			25
10	묵동 240-212 ~ 240-220 D100㎜, L=75m	40	연간 단가						하반기시행
				0					굴착통제
11	신내동 278-12~산52-14 D100㎜, L=100m	50	연간 단가		공사시행			정산시행
				50	-			50
12	중곡동 150-255~126-11 D=100mm, L=85m	45	연간 단가				공사시행	정산시행
				45			-	45
13	우이동 255~산69번지 D50~150㎜, L=1,900m	1,200	발주		발주 및 착공 (선금급)	공사시행 (개발행위부담금)	공사시행 (펌프구매)	준공
				1,200	100	120	240	740
14	수유동 291-162~158번지 D100㎜, L=90m	40	연간 단가		자재구매	공사시행	공사시행	정산 및 복구비 지출
				40	10			30
15	수유동540-21~540-1구간D80㎜, L=60m	15	연간 단가		자재구매	공사시행	공사시행	정산 및 복구비 지출
				15	5			10
16	미아동734-300~734-251구간 D80㎜, L=100m	35	연간 단가		자재구매	공사시행	공사시행	정산 및 복구비 지출
				35	8			27
17	미아동324-7~324-46구간간선배관 D80㎜, L=60m	25	연간 단가		자재구매	공사시행	공사시행	정산 및 복구비 지출
				25	6			19
18	노원구 관내 미급수지역(정암사) 급수공사	450	발주		자재구매	발주 및 착공 (선금급)	공사시행	준공
				450	80	100		270
19	노원구 관내 미급수지역(도선사) 급수공사	50	발주		자재구매	발주 및 착공 (선금급)	공사시행	준공
				50	10	20		20
20	도봉구 방학동 540일대 미급수지역 급수공사	65	연간 단가		자재구매	공사시행	공사시행	정산 및 복구비 지출
				65	15			50
21	궁동197-1~198-25번지간간선배관공사	30	연간 단가						하반기시행
				0					굴착통제
22	여의도동45~47번지간 간선배관공사	70	연간 단가						하반기시행
				0					굴착통제
23	행운동 1692-3~1692-9번지간 간선배관공사	60	연간 단가						하반기시행
				0					굴착통제
24	양재동174~177-2번지	30	연간 단가						하반기시행
				0					굴착통제
25	미배정	150

붙임 1	집중관리 대상 사업별 현황 (대상액 5억 이상)

[단위 : 백만원]
연번	사 업 명	예 산 현 액	대 상 액	목 표 액	총괄부서
	계	58,975	260,304	156,180
1	노후 상수도관(배급수관) 정비	57,467	57,467	34,480	시설안전부
2	노후 상수도관(송배수관)정비	41,041	41,041	24,625	급수부
3	뚝도 시설현대화 및 고도시설공사	34,318	34,318	20,590	시설안전부
4	노후밸브 정비	25,900	25,900	15,540	시설안전부
5	정수장시설 정비	19,525	19,525	11,715	생산부
6	수도계량기 검침 및 송달	17,639	17,534	10,520	요금관리부
7	국사봉배수지 건설공사	6,765	6,765	4,059	시설안전부
8	서비스장비 확충 및 환경개선	5,635	5,635	3,381	경영관리부
9	수도계량기 교체	4,873	4,871	2,923	요금관리부
10	직원 후생복지제도 운영	4,870	4,070	2,442	경영관리부
11	사당배수지 건설공사	3,642	3,642	2,185	시설안전부
12	가압장·배수지 노후시설개량	3,580	3,580	2,148	시설안전부
13	아리수 인식개선	4,516	3,489	2,093	경영관리부
14	상수도 GIS 구축	4,000	3,158	1,895	시설안전부
15	간선배관 부설공사	3,000	3,000	1,800	급수부
16	상수도관 전식방지공사	3,000	3,000	1,800	시설안전부
17	우면산가압장 급수체계 개선	2,987	2,987	1,792	시설안전부
18	뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량	2,632	2,632	1,579	생산부
19	광암정수센터 취수원 이중화	2,526	2,526	1,515	급수부
20	아리수통합정보센터 시스템 고도화	2,467	2,467	1,480	급수부
21	소블록 배급수관망 개선	2,113	2,113	1,268	시설안전부
22	정수장시설유지보수	25,197	1,729	1,037	생산부
23	수질시험연구	1,886	1,610	966	서울물연구원
24	상시 누수진단시스템 장비 임차	1,700	1,445	867	시설안전부
25	수질시험 연구장비 확충	1,263	1,263	758	서울물연구원
26	병물아리수 공급	1,378	1,254	752	생산부
27	행정정보시스템 구축	1,116	1,116	669	요금관리부
28	수도요금부과징수	1,082	626	376	요금관리부
29	수도계량기 및 부속자재 구매	14,604	530	318	요금관리부
30	암사 배출수시설 개량 및 증설사업	510	510	306	생산부
31	유량계 신설 및 교체	501	501	301	시설안전부