개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

2015 이클레이 세계총회 개최

담당자

기후변화대응과  석은주

(☎2133-3622)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2015년 이클레이 세계총회 개최를 통해 우리시의 기후변화대응 선도 우수정책 뿐만 아니라 사회∙경제적으로 모범적인 정책을 국내•외에 널리 알리는 계기 마련

○ 환경분야를 비롯한 우리시 우수정책 및 관련기술을 세계에 전파하며, 기후변화에 대응하는 국제적 협력 계기 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015.4.8.(수)~2015.4.12.(일), 5일간

○ 위 치 : 동대문 디자인플라자(주 행사장), 신청사 및 서울광장

○ 규 모 : 3,067명(국외 824, 국내 2,243), 88개국 240개 도시 및 190개 연구기관 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,821백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,821	499	2,322	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,821	499	2,322	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 서울선언, 서울액션플랜, 서울의 약속등으로 기후변화대응 실행력 확보

- 온실가스 배출량 ‘20년까지 ’05년 대비 25%, ‘30년까지 40% 감축 약속

○ 신기후체제(post-2020) 출범을 위한 가교역할

□ 향후계획

○ ICLEI 회장도시로서 시장협약 확산 및 이행을 위한 시장포럼 개최

- 일시/장소 : 9.1(목)~9.2(금)/서울신청사

- 참석대상 : 시장협약 ‘홍보대사’ 도시시장 및 대표단, 관련학계 및 국제기구 관계자등 100여명

○ 중국도시 ICLEI 회원가입 확대 지속 추진

- 동북아지역 기후변화 대응 공동 노력을 위해 ICLEI 동아시아본부와 협업 추진

사업명

마곡지구 집단에너지 공급시설 건설

담당자

녹색에너지과 박흥식(☎2133-3571)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사업목적 : 마곡도시개발지구를 자연친화적 생태타운으로 건설하기 위해 친환경에너지인 지역냉･난방 공급을 위한 집단에너지공급 시설 설치

○ 필 요 성 : 마곡지구, 방화뉴타운, CJ공장부지, 기존 강서지구 열공급

주택 75천호, 연구 및 산업시설, 업무용 건물 등

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2020년

○ 위 치 : 서울시 강서구 마곡동 72번지 일원

○ 규 모 : 열원시설(발전설비 285MW(190Gcal/h), PLB(136Gcal/h), 연료전지 (12Gcal/h), 하수열(30Gcal/h), GS 연계열(130Gcal/h), 열수송관(21Km × 2열)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 446,040백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	446,040	20,920	8,094	17,555	399,471
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	446,040	20,920	8,094	17,555	399,471
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 6.5%)

○ ‘15. 12월 : 열수송관 설치공사 총 41,860m중 41,860m 완료(공정율 100%)

○ ‘16. 07월 : 마곡 집단에너지공급시설(1단계) 착공

□ 향후계획

○ ‘17. 10월 : 마곡 집단에너지공급시설(1단계) 준공

※ 2단계 사업은 에너지공사 출범 후 정책적 결정에 따라 시행여부 검토

□ 사업변경 내역                                      (단위 : Gcal/h)

구분	사업비 (백만원)	시설 규모
		계	가스터빈	하수열	소각열	연료전지	부천열연계	목동열연계	PLB
당초	307,894	348	37 (50MW)	100	3	8	-	40	160
변경	446,040	428	190 (285MW)	30	폐지	12	130	-70	136

사업명

서울재사용플라자 조성

담당자

자원순환과 이경주(☎2133-3694)

□ 사업목적 및 필요성

○ 취약한 업사이클링, 재사용 등 관련 인재육성 및 업사이클링 제품의 홍보•판매 등을 지원하고, 시민들이 직접 재활용 과정을 체험교육실시를 통해 업사이클링 산업육성 및 재활용 문화확산을 허브공간으로서  『서울새활용플라자』 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014.12.~2017.3

○ 위 치 : 서울시 성동구 자동차시장길 49(중랑물재생센터 부지내)

○ 규 모 : 연면적 16,530㎡, 부지면적 6,943㎡(지하2층, 지상5층)

- 주요시설 : 재사용작업장, 소재은행, 공방, 전시·판매장, 교육장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 49,992백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	49,992	16,201	4,850	18,943	9,998
국 비	10,000	4,757	1,000	1,950	2,293
시 도 비	39,992	11,444	3,850	16,993	7,705

□ 추진상황 : 공정율 45% (지상4층 바닥골조공사 및 전기•기계설비 배관작업 중)

□ 향후계획

○ 서울새활용플라자 준공(‘17.3월)

□ 사업변경 내역

(단위 : 백만원)

구 분			당초	현재	비고
사업기간			‘12.10.~ ’16.12.	‘12.10. ~ ’17. 3.	설계변경에 따른 공사기간 증가
사업규모			- 부지면적 : 6,943㎡ - 연면적 : 16,228㎡	- 부지면적 : 6,943㎡ - 연면적 : 16,530㎡	설계변경으로 연면적 증가(302㎡)
총사업비			49,892	49,992
	공사비		44,909	45,176	연면적 증가로 공사비 증가
	실시설계		2,168	2,168
	감 리		2,535	2,383	감리원 적정관리
	기타		280	265
		시설부대비	시설부대비 280	시설부대비 115
		사무관리비		사무관리비 50	설계자문 및 플라자 홍보 추진 등
		연구용역비		플라자 운영방안 연구 100	효율적인 플라자 운영방안 연구수행

사업명

양천주민편익시설 증축 및

리모델링 공사

담당자

자원순환과

최영우(☎2133-3683)

□ 사업목적 및 필요성

○ 양천자원회수시설 공동이용 협약(2010.5.10.)에 따라 기존 양천주민편익시설이 협소하고 열악하여 증축 및 리모델링 공사를 통해 주변영향지역 주민들의      복리증진에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013.01. ~ 2016.07.

○ 위 치 : 양천구 안양천로 1121(목동)

○ 규 모 : 지하3층/지상3층(연면적 : 5,841.52[eqn: m ^{2}])

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,058백만원                                 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	12,058	3,597	4,000	4,461	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	12,058	3,597	4,000	4,461	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2010.08. : 투자심사의뢰(사업비 16,875백만원)

○ 2010.10. : 투자심사결과(신축 조건부 추진)

○ 2011.07. : 정밀안전진단 용역결과(증축계획 제시)

○ 2011.08. : 투자심사결과 조건부 보고(정밀안전진단 결과 제출)

○ 2012.06. : 양천주민편익시설 신·증축사업 추진계획 수립(신축 ⇒ 증축)

(투자심사결과에 따른 계획 변경, 사업비 10,058백만원)

○ 2012.08. : 투자심사위원회 보고완료(적정)

○ 2012.08. : 양천주민편익시설 증축사업 추진계획 수립

○ 2013.12. : 설계용역 착수

○ 2014.08. : 설계용역 준공

○ 2014.12. : 증축 및 리모델링 공사 착공

○ 2016.07. : 공사 준공완료

□ 향후계획

○ 2016.08. : 인수인계(도기본 ⇒ 자원순환과)

○ 2016.08. ~ 09. : 내부인테리어 공사 및 물품구입

○ 2016.09. : 개관예정