문서번호	교량보수과-2549
결재일자	2014.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	동부도로사업소장
협 조
	주무관
	주무관
	주무관
	주무관

(도로시설물 안전점검 개선계획에 따른)

2014 하반기 안전(정기)점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부도로사업소

(교량보수과)

(도로시설물 안전점검 개선계획에 따른)

2014 하반기 안전(정기)점검 계획

한강교량 및 자동차전용 도로시설물에 대한 안전점검 개선계획에 따라 2014 하반기 안전점검계획을 수립하여 체계적이고 효율적인 점검으로 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점검개요

추진근거

❍ 도로시설물 안전점검 방법개선(도로시설과-10671호, ’14.6.19)

❍ 한강교량 및 자동차전용도로 정기점검 세부실시계획(교량보수과-530호,14.2.5)

점검대상 시설현황                                  (단위:개소)

구 분	계	한강교량	자동자전용도로					비고
			일반교량	고가 차도	지하 차도	입체교차	터널
계	28	5	14	2	4	2	1
1 종	9	천호,올림픽, 잠실,청담대교 잠실철교	청담2교	탄천 1고가 탄천 2고가	-	-	구룡
2 종	7		청담1교, 신천1,2교 한남대교남단2교	-	개포,일원	내곡I.C	-
법정 외	12		상행1~4교,고덕천교 하행1~4교	-	암사,수서	수서I.C	-

2014 시행중인 점검(진단, 정밀점검)현황

구 분	1종		2종		법정 외		비고
	시 설 명	용역기간	시 설 명	용역기간	시 설 명	용역기간
정 밀 안전진단	- 잠실대교 - 탄천2고가교	4.21~ ‘15.2.14 4.15~ ‘15.4.09	-	-	-	-
정밀점검	- 올림픽대교 - 탄천1고가교	6.09~12.05 6.16~12.12	-내곡 I.C교 -개포지하차도 -일원지하차도 -한남대교남단2교	6.17~11.13 “ “ 6.16~12.12	-수서지하차도 -암사지하차도 -상행1~4교 -하행1,2,4교 -고덕천교	6.17~11.13 자체점검 6.10~10.07 “ 6.16~12.12

Ⅱ		안전점검 세부추진계획

개선방안(도로시설과)

❍ 현장관리제(2인1조) 점검      6개사업소 합동 집중점검제 실시

- 교량 주치의, 전차용역업체 참여하여 시설물특성,중점점검부재 교육후 점검

❍ 정기점검은 일일점검계획에 따라 실시

❍ 맞춤형 점검. 순찰실시

- 해빙기, 동절기      : 취약부 중점점검

- 설날, 우기, 추석    : 순찰 실시

집중점검제 실시

❍ 점검대상 : 잠실대교(7월)

❍ 점검방법 : 6개 도로사업소(교량보수과 직원) 합동점검 시행

※ 잔여시설물은 현장관리제로 운영(필요시 자체 집중점검제 실시)

❍ 점검내용 : FCMS, 전차점검.진단결과 중대한 결함에 대해 중점점검

❍ 점검요령 : 시설물 담당직원이 5개사업소 사전협의후(점검인원 등)

세부점검계획 수립후 시행

맞춤형 점검.순찰 실시

❍ 정기점검

- 점검방법 : 일일 점검계획에 따라 실시(별첨 점검일정표 참조)

※ 상위점검 대체기간 중복 도로시설물은 순찰점검 시행

- 점검기간 : 2014. 7 ~ 12

- 점검횟수 : 매주 화, 금 시행(혹서기 7~8월은 주 1회 실시)

- 점검반 편성

구 분	1 조		2 조		비 고
정기점검	조장	교량보수과장	조장	윤철식	3인/1조
	조원	나철흠, 배상현	조원	조장호,박두철

- 조별 시설물 점검순서

조별	월별/차수별 점검대상 도로시설물
	1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차	8차
1조	신천1,2	상행1~2	상행3~4	청담1,2	탄천2고가	청담대교	올림픽대교	구룡터널
2조	- 수서,암사 지하차도 - 수서I.C	하행2~4	- 고덕천교 - 하행1교	-탄천1고가교 -개포,일원 지하차도	- 한남대교 남단2교 - 내곡I.C	잠실대교	잠실철교	천호대교

- 점검요령

• 각 조별 따로붙임 『일일정기점검계획』 및 차수별 도로시설물 점검

• 정밀점검,정밀안전진단 시행중인 교량의 정기점검은 상위점검으로 대체

※ 상위점검 대체 시행계획

안전점검	시 설 명	용 역 사	용역기간	상위점검 대체 (순찰점검 시행)	비고
정 밀 안전진단	잠실대교	㈜한국재난연구원	4.21~ ‘15.2.14	7 ~ 9월
	탄천2고가교	케이에스엠기술(주)	4.15~ ‘15.4.09	7 ~ 9월
정밀점검	올림픽대교	㈜부영이엔씨	6.09~12.05	7 ~ 9월
	탄천1고가교 외 (고덕천교,한남대교남단I.C교)	아우토반건설(주)	6.16~12.12	7 ~ 9월
	내곡 I.C 외 (수서,개포,일원지하차도)	천담개발	6.17~11.13	7 ~ 9월
	상행 1교 외 (상행2~4, 하행1,32,4교)	코비스건설(주)	6.10~10.07	7 ~ 8월

• 기타 계절별 취약시기 점검기간과 중복시 병행 실시(보고서 제출)

❍ 설날, 해빙기, 우기, 추석, 동절기 점검 등

- 점검방법

취약부 중점점검(해빙기,동절기) 및 순찰점검(설,우기,추석) 시행

※ 순찰 : 시설물 상부구조물의 외관 파손(포장파손 등)을 파악하기 위하여 차량을 이용한 점검을 실시하고 필요시 도보 점검 실시하는 활동

- 점검시기 :  점검시기 도래시 별도 세부점검계획수립 시행

Ⅲ		행정사항

보고서식

❍ 점검결과 보고서 제출(양식 1)

❍ 반기별 점검결과 수합보고(양식 2)

지적사항 조치

❍ 단순 경미한 지적사항은 “한강교량” 및 “자동차전용도로”일상유지공사 작업지시

❍ 공사규모가 크고 많은 예산이 소요되는 지적사항은 향후 년도 예산반영 조치

붙임 : 1) 안전점검 개선방안(도로시설과) 1부.

2) 점검결과 보고서 1부(양식1).

3) 반기별 점검결과 수합보고 1부(양식 2).

4) 일일정기점검계획 일정표 1부.  끝.