문서번호	시설관리과-61
결재일자	2014.1.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리과장	시설관리부장

'14. 상수도관 전식방지사업 추진계획

2014. 1

상수도사업본부

(시설관리부)

’14. 상수도관 전식방지사업 추진계획

전식방지 시설이 미설치된 송․배수관 등에 대하여 전식방지 시설을 설치하여 부식으로 인한 누수를 방지하여 유수율을 향상시키고, 안정 급수체계를 강화 하고자 함.

사업개요

○ 대    상 : 송 ․ 배수관 514㎞(700㎜이상 강관)

○ 사업기간 : ’06. ~ ’19.

○ 사 업 비 : 29,694백만원

○ 연차별 추진계획

구 분	계	’10이전	’11	’12	’13	’14	’15년 이후	비고
전식공사(㎞)	514	176	10	24	8	15	276
소요예산(백만원)	29,694	10,322	1,280	2,000	1,000	1,500	13,092
기 타		전위보강8 (강동4,동부4)			전위보강1 (남부 노들길)

※ 본부장방침 제705호(2008.12.26) 및 예산조정안 반영

’14 사업계획

○ 사업대상 : 15㎞(대현산 7㎞, 불광 2㎞, 백련 2㎞, 우장산 3㎞ 신월 1㎞)

○ 사업부서 : 4개사업소(중부, 서부, 동부, 강서)

○ 추진방법(우선순위)

① 갱생한 강관 중 전식 누수가 발생된 곳 : 수명연장 보완

② 전식 누수가 발생한 곳 중 최근에 부설(20년 이내)된 관 : 경제성 고려

③ 전식 설계용역이 완료된 강관 중 굴착복구 가능여부 등 현장여건을 감안하여 대상 선정 : 투자심사 결과에 따른 단계별 사업추진

④ 기존 방식시설 강관 중 전위불량 구간 : 전위보강

⑤ 전식 누수 발생 구간 중 관련 부서에서 요청하는 구간

○ 사업예산 : 1,500백만원                            (단위 : 백만원)

사업소	계	중 부	서 부	동 부	강 서
계	1,500	177	329	492	502
시설비	1,350	160	296	442	452
감리비	150	17	33	50	50

※ 시설비 중 설계용역비 포함 : 중부 12,000천원, 강서 10,000천원

○ 세부 사업대상 : 4개사업소 9개소 시설 설치(중부1, 서부2, 동부3, 강서3)

사업소	사업대상위치	수계 및 관경 (mm)	설계 연도	설계도면번호	우선순위 사유
중부	성북구청입구 ~ 대광고교	대현산 800	2010	C-AB-7	비방식 관로 설계 잔여물량
	세종문화회관뒤 ~ 서대문역	대현산 800 ~ 1,000	설계필요	설계 용역	전위불량 보강
서부	연신내역 ~ 신사오거리	불광 700	2010	W-AB-7	비방식 관로 설계 잔여물량
	마포구청역 ~ 합정역 6월까지 굴착통제	백련 700	2010	W-AB-14	비방식 관로 설계 잔여물량
동부	대현산배수지 ~ 응봉배수지	대현산 900 ~ 1,000	2010	E-AB-27	비방식 관로 설계 잔여물량
	응봉배수지 ~ 고산자교	대현산 700 ~ 900	2010	E-AB-29	비방식 관로 설계 잔여물량
	도로교통공단 ~ 고산자교	대현산 900 ~ 1,200	2010	E-AB-30	2001부설강관 전식 누수
강서	증미산역 3번 출구	우장산 700	설계필요	설계 및 공사	전위불량 보강
	강서구청 앞	우장산 700	설계필요	설계 및 공사	전식 누수 (급수부 요청)
	신월배수앞 ~ 화곡로 입구	신월 900	2009	A-038	전식 누수 (갱생 구간)

○ 사업기간 : ’14. 1. ~ 8.

추진일정

○ 사업소별 공사․감리용역 설계           : ’13. 1. 17

○ 공사 계약심사 및 용역 발주전심의 의뢰 : ’13. 1. 20

○ 공사 계약심사 및 용역 발주전심의 완료  : ’13. 2. 05

○ 공사 및 용역 발주                    : ’13. 2. 12

○ 공사, 용역 계약 및 착공               : ’13. 3. 20

○ 공사, 용역 준공                      : ’13. 8. 29

행정사항

○ 4개사업소(중부, 서부, 동부, 강서)에 대하여는 사업시행토록 즉시 통보하고, 사업소별로 예산을 재배정하여 사업 추진

첨 부 : ’14년도 사업구간 관로 현황도 1부. 끝.

’14년도 사업구간 관로 현황

⋯⋯	’10년 투자심사 전 완료구간
━━	’11~’13년 완료구간
━━	’14년 대상구간
━━	’15년이후 사업대상 구간