문서번호	방재시설부-8599
결재일자	2018.7.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
협조

서초역~방배로간 도로개설공사

건설폐기물 처리용역(3차1회)준공기한 연기 검토 보고

2018. 7.

방재시설부

서초역~방배로간 도로개설공사

건설폐기물 처리용역(3차1회)준공기한 연기 검토 보고

서초역~ 방배로간 도로개설공사의 건설폐기물 처리용역(3차1회)에 대한 준공기한 연기 검토 보고임.[관련공문:서방관리 제18-172호(2018. 7. 2.)]

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 서초역~방배로간 도로개설공사 건설폐기물 처리용역

○ 용역기간 : '17.7. 4 ~ '18. 7. 3(총차 '15.12. 4 ~ '19. 4. 3)

○ 도 급 액 : 72,887,000원(총차 509,508,400원)

○ 도 급 사 : (주)건용환경개발

□ 계약현황(3차 용역)

단위 : 톤

구 분	계약물량	기성물량	잔여물량	비고
폐아스콘	3,000	605	2,395
폐콘크리트	1,794	1,774	20
혼합건설폐기물	5	-	5
계	4,799	2,379	2,420

□ 보고내용

○ 제3차 폐기물처리용역 계약내역 작성시 예산현황과 공정계획에 따른 처리예정물량을 고려하여 발주 및 계약하였으나

○ 시점부(내방역측) 다수 민원발생으로 당초 공정계획에 차질이 발생되어 예정된 처리물량을 소화하지 못한 상태이며

○ 제3차 계약분에 대한 준공기한('18.7.3)이 도래하고 있어 부득이 원활한 건설폐기물 처리를 위한 준공기한 연기가 필요한 실정임.

- 준공기한 연기 내역

․ 당초 2017.7. 4 ～ 2018.7. 3

․ 변경 2017.7. 4 ～ 2018. 10.19(108일 연장)

- 귀책사유 : 도시기반시설본부

- 지체상금 : 미 부과

□ 조치계획

○ 건설총괄부에 준공기한 연기 내용을 통보하여 계약업무 후속절차를 시행하고자 함.

붙임 : 준공기한 연기 조치 의뢰서 1부.  끝.