2024년 지하수 보조측정망 관리개선 용역 개요

○ 사업목적

- 현 지하수 보조수위측정망 측정지점 재설계 및 신규 측정지점 확보로 지하수 측정 신뢰성을 높이고, 측정자료를 분석·관리하여 지하수 보전·관리를 위한 정책 의사결정 기초자료를 확보

○ 사업기간 : 2024. 4. 17. ~ 12. 20.

○ 과업범위

- 공간적 범위

· [측정지점 개선] 중구, 용산구, 성동구, 광진구

· [측정자료 분석·관리] 서울특별시 전역

- 시간적 범위

· [지하수위 분석] 측정 개시일로부터 최근 측정일까지

· [측정연보 작성] 2023년 1월 ~ 12월

- 내용적 범위

· 현 지하수 측정지점 재설계, 지하수 측정연보 발간, 지하수 변동 조사 등

○ 주요과업

1. 지하수 보조수위측정망 부적합 측정지점 대체 신규지점 조사 ‧ 선정

- 대상지역 주변 지하수 개발이용시설 현황 조사(대상지역 : 중구, 용산구, 성동구, 광진구)

- 대상지역 보조수위측정망 부적합 측정지점 선정

※ 2023년 지하수 보조측정망 현황상 최소 9개 지점 이상 재설계 필요

<다음 쪽 그림 참조>

<참고자료>

- 대체 신규지점 지하수시설 제원, 이용실태 조사 ※ 새올행정시스템 등 관련 자료 검토

- 장기간, 인위적 영향 없이 지하수 측정 가능한 관정 등 대체지점 선정

※ 「서울시 지하수 수위 보조관측망 타당성 조사 및 개선 용역」 결과 반영, 필요시 발주기관과 협의하여 변경 가능

2. 지하수 측정설비 이설(재배치)

- 선정된 부적합 측정지점의 자동측정시설 재배치 계획 수립

- 대체 신규지점 간 상대평가로 우선순위를 결정, 고평가된 지점에 우선 재배치 추진

- 신규지점 관정 소유주와 협의 등 측정시설 이설 관련 사전 협의 수행

- 측정시설 이전, 시운전, 검증

※ 검증은 ‘지하수 보조관측망 통합관리시스템’을 통해 정상적으로 측정자료가 수집되는 것으로 판단

- 신규 측정지점 수준측량 조사 수행

3. 지하수 측정을 위한 전용측정시설 신설

- 대상지역 내 지하수 전용측정시설 신설 지점 조사(국·공유지 대상)

- 국·공유지 등 부지사용 승낙 관련 관계기관 협의

- 전용측정시설 신설 공사 관련 인·허가 등 협의 수행(자치구별 2공)

- 전용측정시설 착정, 보호시설물 설치  ※ 세부 기준은 아래 참고

1) 전용측정시설 착정

- 굴착깊이(자치구별 2공씩 착정)

· 암반측정시설 : 가뭄, 주변 지하수 양수 등에도 안정적으로 암반대수층의 지하수위 측정이 가능한 깊이까지 굴착(70m~200m)

· 충적측정시설 : 충적대수층을 관통하여 풍화암 상부 0.5m까지 굴착

- 굴착제원 : 굴착직경은 200㎜ 이상, 내부케이싱은 직경 100㎜ 이상으로 설치

- 설치자재 : KS 규격의 자재 사용

※ 내부케이싱은 KS M 3401와 동등하거나 그 이상의 성능인 자재를 사용

2) 전용측정시설 보호시설물 설치

- 상부보호공 설치 : 스테인리스 재질 제작

- 메쉬펜스 설치 및 안내판 제작·부착

3) 전용측정시설 설치 시 부지 소유자와 협의하여, 정당한 요청사항에 대해 성실히 충족시키며. 환경부고시 제2022-192호「지하수 측정망 설치 및 운영계획」및 서울특별시 보조측정망 표준설계를 참조하여 측정시설 설계 및 착정

※ 「2017년 서울시 지하수 보조관측망 관리개선 용역」 최종보고서 참조

- 신규 측정지점 수준측량 조사 수행

4. 지하수 측정연보 발간

- 2023년 지하수 보조수위측정망 측정자료 검토(오류값, 결측), 보정, 확정

- 보조수위측정망 지점별 평균·최대·최소 등 통계치 산정, 그래프 도시화

- 거시적인 지하수 변동 원인을 분석하여 기술 등 결과 요약

- 월평균, 연평균 수위분포도 수록

※ 제공자료 중 오류(오타, 계기이상, 결측 등)에 대해서는 발주기관 및 해당 자치구와 확인·보정하여 기초 자료로 확정

- 보조수질측정망 운영개요, 현황, 분석결과 등 통계치 산정, 그래프 도시화

- 측정연보 작성기준을 마련하여 제시

5. 지하수 보조수위측정망 지하수위 변동 분석

- 측정자료 상세검토로 지하수위 이상 지점을 선별

※ 선별 기준은 지속적인 수위 강하나 상승 지점을 선별하도록 하고 일시적 급변 지점 등도 포함

※ 분기별 선정된 이상지점 측정지점에 대해서는 발주기관을 통해 해당 자치구에 전달하여 확인할 수 있도록 조치

- 이상지점 중 정밀조사 대상지역 선정, 현장조사 실시(2개소)

- 원인규명을 위한 자료 수집·해석 수행 등 이상지점 정밀조사 실시

※ 대상지점 선정은 발주기관과 협의하여 결정하고, 관급 공사장 굴착 영향을 우선 선정

- 지하수위에 영향을 미칠 수 있는 인자 조사 및 원인 규명

※ 원인 규명을 원칙으로 하나, 그렇지 않는 경우 개연성이 현저히 있는 인자를 도출

6. 특정지역 지하수위 측정

[석촌호수 일대]

- 송파구 석촌호수 일대 지하수 측정지점 9개소에서 지하수위 측정

※ 삼학사어린이공원(SCW-10) 측정시설 망실

- 2016년 이후 지하수위 측정자료와 석촌호수 수위 자료 함께 비교·검토하여 지하수위 변동 추세를 분석‧평가

- 향후 석촌호수 수위 관리를 위한 최적의 측정지점 도출, 측정시설 제원 등 제시

[신월여의지하도로 일대]

- 양천구, 영등포구 신월여의지하도로 일대 지하수 측정시설 2개소(6개공)에서 지하수위 측정

- 2019년 이후 측정자료와 함께 지하수위 변동 추세를 분석‧평가

※ 측정 주기 : 1시간, 측정 기간 : 과업 종료 시까지

7. 용역 전후 지하수 보조측정망 비교·분석 및 향후 관리방안 제시

- 「서울시 지하수 수위 보조관측망 타당성 조사 및 개선 용역」('16) 당시 보조측정망 현황과 현재를 정량적 지표(자료 신뢰성 등)를 통해 다각도로 비교 및 평가

- 지하수 유동 방향을 고려한 측정지점 선정방안 제시

- 지속 가능한 측정망 운영을 위한 관리방안 제시 등