휴일 작업 계획서

일 자	작 업 내 용	인 원	장 비	비고
1주차 (4일)	○ 활성탄흡착지 공사 - 활성탄 자재 투입 - 외벽 잔손보기 및 옥상 두겁판넬 취부 ○ 오존접촉지 - 기자재 설치 - 케이블 포설 ○ 배슬러지지 - U형측구 설치 및 되메우기 - 토공정리 및 도로포장 ○ #2여과지 - 역세척수 퇴수로 수문 개선 작업 - 기자재 설치공사 ○ 송수펌프동 - 이뻬목 가공 및 설치	목수 10명 기계공 3명 전기공 5명 설비공 4명 배관공 2명	백호 2대 크레인 1대
2주차 (11일)	○ 활성탄흡착지 공사 - 활성탄 자재 투입 - 외벽 잔손보기 및 옥상 난간 설치 - 탁도계, 입자계수기 설치 및 시운전 ○ 오존접촉지 - 기계 배관 설치 - 케이블 포설 및 단말 ○ 중계펌프장 - 옥상 난간 설치 - RCS결선 및 TEST ○ 배슬러지지 - 토공정리 및 도로포장 ○ 송수펌프동 - 이뻬목 가공 및 설치	목수 10명 기계공 3명 전기공 5명 설비공 4명 배관공 2명	백호 2대 크레인 2대
3주차 (18일)	○ 활성탄흡착지 공사 - 활성탄 자재 투입 - 외벽 잔손보기 및 옥상 난간 설치 - 탁도계, 입자계수기 설치 및 시운전 ○ 오존접촉지 - 기계 배관 설치 - 케이블 포설 및 단말 ○ 중계펌프장 - 옥상 난간 설치 - RCS결선 및 TEST ○ 배슬러지지 - 모체침투 방수 - 케이블 포설 및 단말 ○ 송수펌프동 - 이뻬목 가공 및 설치	목수 10명 기계공 3명 전기공 5명 설비공 4명 배관공 2명	백호 2대 크레인 2대
4주차 (25일)	○ 활성탄흡착지 공사 - 활성탄 자재 투입 - 탁도계, 입자계수기 설치 및 시운전 ○ 오존접촉지 - 케이블 포설 및 단말 ○ 중계펌프장 - 옥상 난간 설치 - RCS결선 및 TEST ○ 배슬러지지 - 모체침투 방수 - 케이블 포설 및 단말 ○ 송수펌프동 - 이뻬목 가공 및 설치	목수 8명 기계공 3명 전기공 5명 설비공 4명 방수공 3명	백호 2대 크레인 2대

현장관리자 휴일 근무계획

일 자	건설사업관리단	시 공 사	비 고
4월 04일 토	보조사업관리자 김광원	서용석 부장
4월 11일 토	보조사업관리자 이윤선	박용학 팀장
4월 18일 토	보조사업관리자 김준기	윤여경 소장
4월 25일 토	보조사업관리자 강석봉	황윤상 팀장

※ 건설사업관리단 일요일 근무는 분야별 주요공종(레미콘 타설,기자재설치 및 검측사항 등)이 발생시에만 근무