5월 휴일 작업 계획서

일 자	작 업 내 용	인 원	장 비	비고
1주차 (2,5일)	○ 활성탄흡착지 공사 - 활성탄 자재 반입 및 투입 - 옥상 장비투입구 도장 및 이페목 마감 - 지내부 사다리 설치 ○ 오존접촉지 - 관랑실 관받침 설치 및 배관 설치 - 케이블 포설 ○ 배슬러지지 - LO형측구 설치 ○ 중계펌프동 - 판넬 코킹	목수 10명 기계공 3명 전기공 3명 설비공 2명 배관공 3명 잡철공 2명 보통인부 10명	백호 3대 크레인 2대
2주차 (9일)	○ 활성탄흡착지 공사 - 활성탄 자재 반입 및 투입 - 옥상 장비투입구 도장 및 이페목 마감 - 지내부 사다리 설치 ○ 오존접촉지 - 관랑실 관받침 설치 및 배관 설치 - 케이블 포설 ○ 배슬러지지 - 토공정리 ○ 중계펌프동 - 옥상 두겁판넬 코킹	목수 10명 기계공 3명 전기공 3명 설비공 2명 배관공 3명 잡철공 2명 보통인부 10명	백호 3대 크레인 2대
3주차 (16일)	○ 활성탄흡착지 공사 - 활성탄 자재 반입 및 투입 - 옥상 장비투입구 도장 및 이페목 마감 ○ 오존접촉지 - 관랑실 관받침 설치 및 배관 설치 - 케이블 포설 ○ 중계펌프동 - 옥상 두겁판넬 코킹 ○ 배슬러지지 - 토공정리	목수 5명 기계공 3명 전기공 5명 설비공 4명 배관공 2명 보통인부 10명	백호 2대 크레인 2대
4주차 (23,25일)	○ 활성탄흡착지 공사 - 활성탄 자재 반입 및 투입 - 옥상 장비투입구 도장 및 이페목 마감 ○ 오존접촉지 - 관랑실 관받침 설치 및 배관 설치 - 케이블 포설 ○ 고도화구간 - 각 건물 옥상 두겁판넬 마무리 ○ 시설현대화구간 - D1-Line 관로공사	목수 8명 기계공 3명 전기공 5명 설비공 4명 방수공 3명 관로공 3명 보통인부 10명	백호 3대 크레인 2대
5주차 (30일)	○ 활성탄흡착지 공사 - 활성탄 자재 반입 및 투입 - 옥상 장비투입구 도장 및 이페목 마감 ○ 오존접촉지 - 관랑실 관받침 설치 및 배관 설치 - 케이블 포설 ○ 고도화구간 - 각 건물 옥상 두겁판넬 마무리 ○ 시설현대화구간 - D1-Line 관로공사	목수 8명 기계공 3명 전기공 5명 설비공 4명 방수공 3명 관로공 3명 보통인부 10명	백호 3대 크레인 2대

현장관리자 휴일 근무계획

일 자	건설사업관리단	시 공 사	비 고
5월 2일 토	보조사업관리자 이윤선	황윤상 팀장
5월 5일 화	보조사업관리자 김광원	윤여경 소장
5월 9일 토	보조사업관리자 강석봉	서용석 부장
5월 16일 토	보조사업관리자 김준기	황윤상 팀장
5월 23일 토	보조사업관리자 김문갑	박용학 팀장
5월 25일 월	보조사업관리자 이윤선	서용석 부장
5월 30일 토	보조사업관리자 김광원	박용학 팀장

※ 건설사업관리단 일요일 근무는 분야별 주요공종(레미콘 타설,기자재설치 및 검측사항 등)이 발생시에만 근무