4월 휴일 작업 계획서

일 자	작 업 내 용	인 원	장 비	비고
1주차 (2일 토)	○ 배출수지 - 광케이블 포설 및 단말작업 ○ #3여과지 - 정수유출수로 벽체 내부 거푸집설치 - 기계실 기초철근 조립 - A-Zone 정수거 기초철근 조립 ○ #2-3침전지 - 경사판 설치 ○ #3침전지 - 신설벽체 철근 및 거푸집 조립 ○ 고도화구간 - 조경 식재공사	보통인부 20명 철근공 20명 목공 10명 전공 4명 조경공 5명	타워크레인 1대 굴삭기 1대
2주차 (9일 토)	○ #3응집침전지 - 하부 트레이 설치(전기) ○ #3여과지 - 정수유출수로 벽체 외부 거푸집설치 - 기계실 기초벽체 내부 거푸집 - A-Zone 정수거 벽체 Slab철근 조립 - B-Zone 정수거 기초철근 조립 ○ #2-3침전지 - 경사판 설치 ○ #3침전지 - 경사판 설치 - 신설벽체 철근 및 거푸집 조립 ○ 고도화구간 - 조경 식재공사	보통인부 20명 철근공 15명 목공 25명 전공 4명 조경공 5명	타워크레인 1대 굴삭기 1대

일 자	작 업 내 용	인 원	장 비	비고
3주차 (16일 토)	○ #3여과지 - 기계실 내부거푸집 조립 - A-Zone 정수거 벽체, 슬라브 Slab철근 조립 ○ #2-3침전지 - 경사판 설치 ○ #3침전지 - 경사판 설치 - 신설벽체 철근 및 거푸집 조립 ○ 고도화구간 - 조경 식재공사	보통인부 20명 철근공 10명 목공 10명 전공 4명 조경공 5명	타워크레인 1대 굴삭기 1대
4주차 (23일 토)	○ #3여과지 - 기계실 벽체 철근조립 - A-Zone 지 기초철근 조립 - B-Zone 정수거 벽체 Slab외부거푸집 조립 ○ #2-3침전지 - 경사판 설치 ○ #3침전지 - 경사판 설치 - 신설벽체 철근 및 거푸집 조립	보통인부 20명 철근공 30명 목공 15명 전공 4명	타워크레인 1대 굴삭기 1대
5주차 (30일 토)	○ #3여과지 - 기계실 벽체 외부거푸집 조립 - A-Zone 지 기초 철근 및 거푸집 조립 - 정수거 토공정리 ○ #3침전지 - 경사판 설치 - 신설벽체 철근 및 거푸집 조립	보통인부 20명 철근공 20명 목공 15명 전공 4명	타워크레인 1대 굴삭기 2대

현장관리자 휴일 근무계획(변경 가능)

일 자	건설사업관리단	시공사	비 고
4월 2일 토	책임사업관리자 안 충남	황 윤상 차장
4월 9일 토	보조사업관리자 조 성만	박 용학 차장
4월 16일 토	보조사업관리자 김 문갑	조 병주 차장
4월 23일 토	책임사업관리자 안 충남	황 윤상 차장
4월 30일 토	보조사업관리자 조 성만	박 용학 차장