문서번호	의사담당관-248
결재일자	2015.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	의정정보화팀장	의사담당관	시의회사무처장

본회의장 전광판 영상표출시스템 재구축 사업 추진계획

2015. 01

서울특별시의회

[의사담당관]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

본회의장 전광판 영상표출시스템 재구축 사업 추진계획

노후화되고 복잡하게 구성된 전광판 영상표출시스템을 디지털방식으로 재구축하여 안정적 본회의 의사운영 체계를 확보하고자 함

Ⅰ		추진근거

본회의장 전광판 영상표출시스템 점검․자문 결과 보고

(의장방침 제194호, ’14. 11. 5)

Ⅱ		현 황

전광판 : 총 16대 설치․운영

❍ 본회의장 13대(전면 2, 단상 6 , 후면 3, 2층 2), 본회의장 외부 3대(로비 2, 2층복도 1)

- 전면 : 대형(176인치) LED 전광판, 후면･2층 : 중형(55~84인치) LED TV

- 외부 : 중형(55~84인치) LED TV

영상표출시스템 : 전광판 표출제어 운영장비(총 34대)

❍  ’08년 통합컨트롤러 등 17개 장비를 1세트로 연결․구성 후, 비상시를 대비하여 이중 구성 운영중

<영상표출시스템 장비 1식>

- 메인컨트롤러, 쿼드뷰어, RGB분배기, AV분배기, RGB라우터 등 17종(내용연수 6년)

❍ 본회의장 음향조정실(2층)에서 직원이 전광판 표출 및 제어

Ⅲ		추진경과

전광판 장애 :  ’14. 9. 19 10시 12분 ~ 35분(23분간)

❍ 장애내용 : 시정질문 3일차 첫 번째 질문자인 유청 의원 질문 시, 정면 단상  전광판 좌측 장애 후 우측 전광판도 데이터 수신 장애로 미작동

❍ 복구조치 : 예비장비로 수동전환하여 회의진행

그간의 조치사항

❍ 고장장비(RGB라우터) 긴급구매 교체(’14. 10월, 5,125천원)

❍ 근본적인 장애 재발방지를 위한 전문기관 점검․자문 실시

- 기간 : ’14. 10. 13 ~ 10. 26(기간 중 7일)

- 업체 : 대신정보통신(주)

- 내용 : 개별 장비별 환경설정, 장비상태, 장비간 연결상태와 출력결과 점검, 점검결과에 따른 문제점 도출 및 향후 재구성안 작성

- 예산 : 1,600천원

점검 및 자문결과

❍ 점검 결과 장비 및 연결회선의 특별한 이상은 없음.

- 영상표출시스템 17종 및 장비간 연결케이블에 대한 개별 장비 및 장비간 연결상태를 점검 결과 특별한 이상은 없음

❍ 다만, 자문결과 영상표출시스템 재구성 및 노후 장비 교체 필요하다는 의견임.

- 카메라와 영상표출시스템 장비가 각각 디지털․아날로그 방식으로 혼용되어 정보변환․송출시 오류 발생 가능성 상존

※ 카메라(5대) : 디지털 방식, 영상표출시스템(34대) : 아날로그 방식

- 영상표출시스템이 ’08년도 구축, 노후되었고 여러 송출기기가 복잡하게 연결되어 시스템 구성을 1대로 통합, 정보 조정․송출이 용이하도록 재구축 필요

Ⅳ		추진방향

❍ 기존 아날로그 방식으로 구축된 노후되고 복잡한 영상표출시스템을 디지털 방식으로 통합․재구축하여 안정적인 시스템 운영 확보

❍ 장애발생 시, 예비장비로 운영이 가능토록 실질적인 이중화 구성

Ⅴ		사업개요

사 업 명 : 전광판 영상표출시스템 재구축

사업기간 : ’15. 3월 ~ 6월

사업예산 : 385,000천원

계약방법 : 협상에 의한 계약(일반경쟁입찰)

사업내용

❍ 전광판 디지털 영상표출시스템 장비 구매․설치

- 영상전송방식을 디지털 방식으로 통합, 불필요한 아날로그 장비 및 영상변환장치 제거

- DVI 매트릭스 스위쳐 등으로 다단계 아날로그 장비를 대체해 단순화 구성

※ DVI : Digital Visual Interface

- 화면 전환 시 깜빡이지 않고 자연스러운 전환(Seamless)이 가능한 장비를 도입하여 끊김없는 화면 표출

- 장애 시 예비장비로 바로 전환되도록 이중화 구축

❍ 광케이블 설치 및 케이블 철거 공사

- 고품질 영상 전송을 위한 디지털 전용 DVI케이블과 광케이블로 교체

- 케이블 장애에 대비 케이블 이중화 구성

- 불필요한 케이블 및 노후 케이블 철거

구축내역

❍ 도입 장비 : DVI 매트릭스 스위쳐 등 38대

주요장비내역	기 능
DVI 매트릭스 스위쳐 2식	여러 개의 디지털 신호 입력 중 표출을 원하는 신호를 선택하여 출력장비로 보내 주는 장비
전광판 디지털 컨트롤러 4식	디지털 신호를 받아 전광판 디스플레이 유닛단위로 쪼개어 신호를 보내는 장비
영상제어시스템 2식	영상입출력 선택을 편리하게 한번에 처리할 수 있도록 제어하는 장비
쿼드뷰어 2대	2개의 화면을 하나의 전광판에 표출할 수 있도록 처리하는 장비
광전송기 3대, DVI 분배기 12대 등 기타 28대	DVI신호와 광신호를 상호 변환, DVI신호를 메인과 서브장비로 보내주는 장비 등

❍ 전광판 영상표출시스템 재구축 구성도

※    재구축 장비

Ⅵ		소요예산

❍ 소요예산 : 385,000천원

- 전광판 디지털 영상표출시스템 장비 구매․설치 : 367,444천원

- 광케이블 설치 및 케이블 철거 공사            :  17,556천원

❍ 예산과목

- 의정담당관, 의정활동의 적극홍보 및 정보화 사업 추진, 정보화 사업,  본회의장 전광판 영상표출시스템 재구축, 자산 및 물품취득비(100-405-01)

- 의정담당관, 의정활동의 적극홍보 및 정보화 사업 추진, 정보화 사업,  본회의장 전광판 영상표출시스템 재구축, 사무관리비(100-201-01)

Ⅶ		계약방법

❍ 계약방법 : 일반경쟁입찰(협상에 의한 계약)

※ 관련근거

‣ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조(협상에 의한 계약체결) 및 제44조(지식기반사업 등의 계약방법)

‣ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정 기준(안전행정부 예규 제73호, ’14. 2. 5)

❍ 입찰참가자격

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 소정의 자격을 갖춘 자

- 소프트웨어산업진흥법 제24조에 의거 소프트웨어사업자(컴퓨터관련 서비스사업) 및 정보통신공사업 제14조에 따른 정보통신공사업 등록한 자

Ⅷ		추진일정

❍ 계약심사 및 입찰공고         : ’15. 2월

❍ 제안평가․협상 및 계약체결   : ’15. 3월

❍ 입찰공고 및 제안평가 실시   : ’15. 2월

❍ 협상 및 계약체결            : ’15. 3월

❍ 장비 납품․설치 및 케이블 공사 : ’15. 4월 ~ 5월

❍ 장비 테스트 및 시험운영     : ’15. 5월 말 ~ 6월 중순

❍ 정상 운영                   : ’15. 6월(제260회 임시회) ~

Ⅸ		행정사항

❍ 공사 및 장비 테스트․시험운영 시 업무협조 : 의정담당관, 공보실

붙임 : 세부 사업추진 일정 1부.  끝.

(붙임)

세부 사업추진 일정

세부 일정	2015년 2월				3월				4월				5월				6월
계약심사 : 2.4 ~ 2.11
사전공고(긴급) : 2.12 ~ 2.16
공고(긴급) : 2.25 ~ 3.8
제안서 접수 : 3.9
제안평가 : 3.16
협상 및 계약체결 : 3.17 ~ 3.20
장비 납품 : 3.23 ~ 4.23
케이블철거 및 광케이블 공사 : 4.24 ~ 4.30
장비 설치 및 제어프로그램 개발 : 5.1 ~ 5.14
장비테스트 및 제어프로그램 보완 : 5.15 ~ 5.29
시험운영(청소년의회 교실 진행) : 6.1 ~ 6.12
제260회 임시회 준비 : 6.15 ~ 6.19
정상운영(제260회 임시회) : 6.22 ~