서울특별시고시 제2014 -   호

서울특별시 에스에이치공사에서 시행하는 주택건설사업계획에 대하여 「주택법」 제16조, 「주택법시행령」 제15조, 제17조 및 「주택법시행규칙」 제9조 및 11조의 규정에 의하여 변경승인하고 「주택법시행령」제17조 제5항의 규정에 따라 이를 고시합니다.

2014.  12.   .

서울특별시장

1. 사 업 명 : 강남구 수서동 공공임대 주택건설사업

2. 사업주체 : 서울특별시 에스에이치공사  사장  변 창 흠

(서울시 강남구 개포로 621)

3. 사업위치 : 서울특별시 강남구 수서동 721-1

4. 사업기간 : 2014년 3월 ~ 2016년 1월

5. 주택건설사업계획승인내역 : 붙임

6.「주택법」제17조 1항에 의한 의제처리 사항

○「건축법」제11조에 의한 건축허가

7. 관계도서는 서울특별시(임대주택과 ☎ 02-2133-7069) 및 서울특별시 에스에이치공사(임대건설1팀 ☎ 02-3410-8526)에 비치하여 이해관계인과 일반인에게 보입니다.

주택건설사업계획 변경승인 내역

구 분						사 업 승 인 내 역							비 고
						변경전				변경후
① 대 지 위 치						서울특별시 강남구 수서동 721-1
② 대 지 면 적(㎡)						1,985.00
③ 건 축 면 적(㎡)						680.06				505.15			감)174.91
④ 연 면 적 (㎡)						6,418.15				6,018.62			감)399.53
⑤ 건 폐 율(%)						34.24				25.45			감)8.79
⑥ 용 적 률(%)						216.07				227.39			증)11.32
⑦ 주택 규모	동수 및 층수					1동, 지하1층, 지상12층				변경 없음
	주택 형별			공공임대		전용 35㎡ : 50세대 전용 45㎡ : 23세대				전용 35㎡ : 51세대 전용 45㎡ : 22세대			증)1세대 감)1세대
				계		총 73세대				변경 없음
⑧ 사 업 기 간						2013.11. ~ 2015.08.				2014.03. ~ 2016.01.
⑨ 부대 복리 시설 현황	관리사무소					66.91㎡				36.31㎡			감)30.6
	주민공동시설					463.44㎡				206.67㎡			감)256.77
	경 비 실					54.46㎡				-			감)54.46
	어린이놀이터					242.30㎡				244.79㎡			증)2.49
	기계/전기실					369.02㎡				284.07㎡			감)84.95
	주 차 장					옥내 : 36대(1,275.80㎡) 옥외 : 22대(519.65㎡)				옥내 : 34대(1,220.81㎡) 옥외 : 18대(451.47 ㎡)			감)2대 감)4대
⑩ 공동저수시설(TON)						65 Ton				변경 없음
⑪ 단위 세대 면적 변경		구분				세대수	전용	주거공용	공급면적		기타공용	계약면적
		당초	장기 전세		35A	44	35.21㎡	17.73㎡	52.94㎡		27.97㎡	80.91㎡
					35B	6	35.21㎡	17.73㎡	52.94㎡		27.97㎡	80.91㎡
					45A	18	45.29㎡	21.91㎡	67.20㎡		35.97㎡	103.17㎡
					45B	5	45.29㎡	21.91㎡	67.20㎡		35.97㎡	103.17㎡
		변경	장기 전세		35A	40	35.37㎡	18.81㎡	54.18㎡		22.13㎡	76.31㎡
					35B	11	35.37㎡	18.81㎡	54.18㎡		22.13㎡	76.31㎡
					45	22	45.01㎡	23.51㎡	68.52㎡		28.16㎡	96.68㎡