지하시설물(상·하수도) 정보 수정·갱신 사업

[ooo시·도 000시]

2025.   00.

기관명	000시 000과
담당부서	000팀	TEL	000-000-000
담당업무	지하시설물 전산화	FAX	000-000-0000
작 성 자	성명 : 000 직급 : 시설6급	E-mail	000@korea.kr

지하시설물(상·하수도) 정보 수정·갱신 사업

□ 사업 계획

ㅇ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년(4년간)

ㅇ 사업위치 : ㅇㅇ시 ㅇㅇ동,읍 도면이기 구축지역(0000㎢)

ㅇ 사업내용 : ‘00년~’00까지 도면이기로 전산화 구축한 상·하수도를 대상으로 측량·탐사를 실시하여 정확도를 개선

ㅇ 총 사업량

(단위: ㎞)

연도별	계	상수도	하수도	해당지역	도면이기 년도
계	243.46	69.02	123.01	ㅇㅇ동,읍
‘22년	39.21	21.21	11	ㅇㅇ동,읍	‘98년도
‘23년	41.97	18.70	10.19	ㅇㅇ동,읍	‘01년도
‘24년	47.74	17.13	12.97	ㅇㅇ동,읍	‘02년도
‘25년	42.58	4.5	29.58	ㅇㅇ동,읍	‘03년도

ㅇ 총 사업비

(단위: 백만원)

구분	총사업비	‘22년	‘23년	‘24년	‘25년	비 고
합계	1,430	250	217	270	232
국비 (30%)	858	150	130	162	139
지방비 (70%)	572	100	87	108	93

<참고> 국토부의 수정·갱신 적용단가(‘21년 기준 1㎞ 당 8,883천원)

(단위 : 천원)

구 분	계	기준점 설치	측량·탐사	정위치편집	구조화편집
신규 전산화	10,722	888	8,777	627	430
수정·갱신(안)	8,883	-	8,777	63	43

- (기준점 설치 비용) 국가기준점(GPS) 사용할 수 있어 미반영
- (정위치·구조화 편집 비용) 기존 데이터의 활용이 가능하여 10%만 반영

※ 다만, 지자체 계약(과업내용 등) 시 산출단가를 달리 적용 가능

□ 2025년 사업 계획

ㅇ 사업비 :  000백만원(국비 : 000백만원, 지방비 : 000백만원)

ㅇ 사업량 :  000km(상수 : 00km, 하수 : 00km)

(단위: 백만원, km)

구분	합계				상수도		하수도		비고
	사업비			사업량	사업비	사업량	사업비	사업량
	합계	국비 (30%)	시비 (70%)
계	509.5	152.8	356.7	60	3.4	0.39	506.1	57.38
ㅇㅇ동/읍	509.5	152.8	356.7	60	3.4	0.39	506.1	57.38	‘02년 도면이기 지역
ㅇㅇ동/읍

ㅇ 세부내용

- 지하시설물 전산화 기 구축 도면이기 전산화 물량 수정·갱신(측량·탐사)

․ 상수도 조사/탐사 : 도면이기지역의 관로를 조사․탐사

․ 상하수도 조사/탐사 : 도면이기지역의 관로를 조사․탐사

- 정위치 편집 : 탐사·측량된 상․하수도 자료를 전산화

- 구조화 편집 : 정위치 자료를 시스템구조에 맞게 전산편집

ㅇ ‘25년도 사업 산출근거 및 산출내역

- 1km당 단가 : 000백만원

(상수 : 000백만원, 하수 : 000백만원, 제경비, 기술료, 부가세 포함)

- 공종별 산출 내역: 세부 설계내역서(별첨)

ㅇ ‘25년도 사업 지방비 확보계획

- 대응 지방비 예산확보 내부방침(‘24.00월) → 예산(안) 지방의회 제출(‘24.00월), 지방의회 예산 승인(’24.00월)

□ 기타

ㅇ 지하시설물 전산화 수정·갱신 사업 추진계획(방침서 등) : ‘00.00.00 (시장 방침)

ㅇ 수치지도 보유현황

공간정보명	구축년도	최근갱신년도	구축지역 (행정구역)	면 적 (㎢)
1/1,000 수치지도	2019	2023	ㅇㅇ시 (음성동)	26.27

ㅇ 재정자립도: 00.00%

ㅇ 기 구축 지하시설물 도면이기 물량 현황

구분	구축년도	계	상수도(㎞)	하수도(㎞)
계		1,146.90	504.52	296.41
ㅇㅇ동	1998년	243	69.02	123.01
ㅇㅇ면	2000년	46	98	63.4
ㅇㅇ동	2001년	63.8	29.6	-
ㅇㅇ면	2002년	98.1	43.7	-

* 구축현황 색인 관망도 -별첨-

붙임 1. 사업대상지 위치도 1부

2. 지하시설물 전산화 수정·갱신 사업 추진계획(방침문서) 1부.

3. ‘25년 수정·갱신사업 세부 설계내역서 1부.  끝.

붙임1		사업대상지 위치도

□ 사업대상지 위치도

기 구축 상수관로 위치도	도면이기 물량 위치도
지거측량 물량 위치도	‘24년 사업대상 위치도

□ 사업대상지 전체 인덱스

작성예) 전체 사업 인덱스 1/5,000이상으로 작성, 도면이기 지역을 대상

□ 사업대상지 항공사진

<작성 요령>

1. 기 조사된 총 사업비 및 총 사업물량 내에서 연도별 세부계획을 작성 ☞ (양식1)의 푸른색으로 작성된 부분(검정색 작성은 변경 금지)

- 사업 개요 : 사업기간(최대 4년), 사업위치(도면이기 지역), 사업내용(도면이기지역을 측량·탐사실시 내용) 기재(작성 page 1)

- 총 사업물량 및 총사업비 : 최대 4년간 사업물량을 지자체 계획에 맞게 연도별로 작성, 국비보조에 따른 대응 지방비확보(70%) 계획에 따라 총사업비를 연도별로 작성(작성 page 1)

- ‘25년 사업계획 : 기 작성한 총 사업계획 중 ‘25년도 추진계획에 대해 세부 사업내용을 작성(page 2)

2. 붙임자료 : 사업대상지 위치도 및 항공사진, 상·하수도 수정·갱신 사업 추진계획(방침서 등)에 대한 市의 방침서류 첨부, 재정자립도(‘23년 기준) 작성, ‘25년도 사업 산출근거 및 산출내역서 작성 및 설계내역서 첨부(page 2~3)

< 작성 시 유의 사항 >

- 본 상·하수도 정보 수정·갱신 사업은 기존 전산화 데이터 중 전산화 과정에서 측량·탐사 없이 DB화*한 市지역을 대상으로 측량·탐사를 통해 정확도를 개선하기 위한 것임

* 종이 도면 단순이기(스캐닝→디지타이징→DB화), 지거측량(줄자를 사용하여 측정대상물에 대한 위치를 측량하는 방법)

※ 본 사업은 기존 데이터의 정확도 개선 사업으로 신규 구축 사업이 아님을 숙지(신규물량 반영 시 전체 미반영 예정)

문의: 국토교통부 공간정보진흥과 최의현(044-201-3477)