성북동·한양도성 관광안내광장 조성사업 정산보고서

자치구명		성북구
부 서 명 (담당자명)		문화체육과 (전 혜 란)		전화번호	02-2241-2632	전자우편		uiseon81@sb.go.kr
사 업 명		성북동·한양도성 관광안내광장 조성
사업개요		□ 사업기간 : 2012. 4월 ~ 2013. 12월 □ 사업내용 ○ 성북동 관광안내공원 조성 - 성북구 성북동 118-2 성북쉼터 일대 (1,456㎡) ○ 성북예술창작터 조성 : 성북구 성북동1가 74-1 성북전시관 ○ 성북동 무인관광안내시스템 설치 : 성북동 관광안내공원 외 3개소 ○ 성북동 아트벤치 프로젝트 : 성북동 1가 115-24 성북동 빌딩 앞 ○ 조지훈 집터 앞 어반폴리 프로젝트 : 성북동 142-1 일대
총사업비 집행내역 총괄표 (단위: 원)
구분	교부액		집행액				집행잔액
2012년	900,000,000		447,879,960				27,120,040
2013년	-		409,459,310				15,540,690
계	900,000,000		857,339,270				42,660,730
2012~2013년 시비보조금 지원 사업의 실적 및 정산보고서를 제출합니다. 2014년 10월 일 자치단체명 : 성북구 대표자 : 김 영 배 (직인) 서울시 관광정책과장 귀하
[첨부] : 사업실적 및 정산내역서 1부.

성북동 한양도성 관광안내광장 조성사업 실적보고서

1. 사업개요

□ 사 업 명 : 성북동 한양도성 관광안내광장 조성사업

□ 사업기간 : 2012. 8월 ~ 2013. 12월

□ 사업예산 : 900백만원(시비보조금)

□ 사업위치

○ 성북동 관광안내공원 : 성북구 성북동 118-2 성북쉼터 일대(1,456㎡)

○ 성북예술창작터 : 성북구 성북동1가 74-1 성북전시관

○ 성북동 무인관광안내시스템 : 성북동 관광안내공원 외 3개소

○ 성북동 아트벤치 프로젝트 : 성북동 1가 115-24 성북동 빌딩 앞

○ 조지훈 집터 앞 어반폴리(Urban folly) 프로젝트 : 성북동 142-1 일대

□ 추진경과

○ 성북동 관광안내정보센터 건립계획 수립(서울시 예산요구) - 2012. 4

○ 시비보조금 교부 - 2012. 4

○ 성북동 관광안내광장 조성계획 수립 : 2012. 8

※ 계획수립을 위한 관계부서 회의 실시

○ 각 사업부서별 사업계획수립 및 집행 : 2012. 9 ~ 2013. 12

2. 주요사업 추진실적

□ 성북동 관광안내공원 : 성북쉼터 정비(조경) - 공원녹지과

○ 소요예산 : 140백만원

○ 사업내용 : 성곽의 조망을 가리는 큰 나무 등 식재 정비 후 조망권 확보

○ 추진현황

- 문화재청 현상변경 허가 : 2012. 10

- 공사기간 : 2012. 11 ~ 2012. 12

○ 예산집행내역

- 성북쉼터 리모델링 설계용역 : 7,280천원

- 성북쉼터 리모델링 공사 : 108,557천원

- 성북쉼터 리모델링 설계변경 시행 : 16,790백만원

- 가로수보호판 구매 : 3,553천원

□ 성북동 관광안내공원 : 성북쉼터 보도정비 - 도로시설과

○ 소요예산 : 170백만원

○ 사업내용 : 성북쉼터 보행로 목재 보도데크 설치

○ 추진현황

- 공사기간 : 2012. 12 ~ 2013. 4

○ 예산집행내역

- 성북동길 보행통로 정비공사 설계용역 : 17,750천원

- 성곽길정비 및 심우장앞 정비데크 설치공사 : 88,828천원

(※ 구비 20,000천원)

- 성곽길정비 및 심우장앞 정비데크 설치공사 설계변경 : 20,000천원

- 관급자재(합성목재 등) 구매 : 42,639천원

□ 성북동 관광안내공원 : 한양도성·성북동 상징조형물 설치 - 문화체육과

○ 소요예산 : 73백만원

○ 사업내용 : 성북쉼터 내 한양도성과 성북동을 상징하는 조형물 설치

○ 추진현황

- 제안서 평가 및 업체선정 : 2012. 12

- 문화재청 현상변경 허가신청 : 2013. 1

- 문화재청 현상변경 허가 불허통보 : 2013. 2

- 문화재청 현상변경 허가 재신청 : 2013. 4

- 현상변경 허가 가결 통보 : 2013. 4

- 공사기간 : 2013. 6 ~ 2013. 10

○ 예산집행내역

- 상징조형물 제작·설치 : 73,000천원

□ 성북동 관광안내 연계 성북예술창작터 조성 - 문화체육과

○ 소요예산 : 200백만원(리모델링 160백만원, 물품구매 등 40백만원)

○ 사업내용 : 성북전시관을 리모델링하여 성북예술창작터 조성

○ 추진현황

- 설계용역 : 2012. 10 ~ 11

- 공사기간 : 2012. 12 ~ 2013. 1

- 성북예술창작터 개관 : 2013. 4. 11

○ 예산집행내역

- 리모델링공사 설계용역 : 10,920천원

- 성북예술창작터 리모델링 공사 : 113,130천원

- 리모델링 설계변경 시행 : 12,838천원

- 성북예술창작터 내외부 사인물 설치공사 : 8,604천원

- 리모델링 공사 전기공사 : 6,869백만원

- 관급자재(조명기구) 구매 : 6,561천원

- 가구 및 PC 등 전산장비 구매 : 40,077천원

□ 성북동 무인관광안내시스템 조성(키오스크) - 문화체육과

○ 소요예산 : 110백만원

○ 사업내용 : 성북동 관광안내공원(성북쉼터) 외 3개소에 관광안내

키오스크 설치

○ 추진현황

- 제안서 평가 및 업체선정 : 2012. 12

- 계약 및 발주 : 2013. 3

- 키오스크 설치 완료 : 2013. 5

성북동 역사

문화체험공원

한성대역

5번출구 앞

심우장 입구

홍익중고입구

버스정류장

○ 예산집행내역

- 키오스크 및 컨텐츠 제작․설치 : 93,000천원

- 키오스크 설치에 따른 전기․통신공사 등 : 18,211천원

□ 공공미술 특화거리 조성(아트벤치 프로젝트) - 도시디자인과

○ 소요예산 : 85백만원 ※ 구비 : 15백만원 (총사업비 : 100백만원)

○ 사업내용 : 만해 한용운의 이미지를 형상화한 아트벤치 조성

○ 추진현황

- 제안서 평가 및 업체선정 : 2012. 12

- 공사기간 : 2013. 2 ~ 2013. 5

○ 예산집행내역

- 아트벤치 설치 : 85,000천원

- 심우장 입구 정비(도로시설과) : 15,000천원(구비)

․ 사업내용 : 잔디식재, 벤치설치, 휀스 정비 등

․ 공사기간 : 2012. 12 ~ 2013. 4

□ 조지훈 집터 앞 어반폴리(Urban folly) 프로젝트 - 도시디자인과

○ 소요예산 : 28백만원  ※ 구비 : 89백만원 (총사업비 :117백만원)

○ 사업내용 : 조지훈기념 건축조형물 조성

○ 추진현황

- 사업기간 : 2012. 12 ~ 2013. 12

○ 예산집행내역

- 어반폴리(조지훈기념 조형물) 조성 : 88,770천원(구비)

- 어반폴리(조지훈기념 조형물) 조성(설계변경) : 11,830천원

- 관급자재(옥외용벤치 등) 구매 및 사설안내표지판 이전설치 : 16,595천원

성북동 한양도성 관광안내광장 조성사업 정산내역서

자치구명 : 성북구

사 업 명 : 성북동 한양도성 관광안내광장 조성사업

사업개요

가. 목 적 : 성북동은 서울 한양도성 북측, 북악산에 둘러싸인 구릉지에 형성되어 있는 자연경관이 뛰어난 주거지이며, 세계문화유산 잠정목록인 한양도성의 출발점으로, 한양도성 조망권 확보를 위하여 출발점인 성북쉼터를 정비하고 성북동·한양도성 관광안내광장을 조성함으로써, 성북동을 한양도성과 함께 국가브랜드 차원의 관리가 필요한 역사․문화 보존지역으로 조성코자 함

나. 기 간 :  2012. 4. ∼ 2013. 12

다. 내 용 :

○ 성북동 관광안내공원 조성 : 성북구 성북동 118-2 성북쉼터 일대 (1,456㎡)

○ 성북예술창작터 조성 : 성북구 성북동1가 74-1 성북전시관

○ 성북동 무인관광안내시스템 설치 : 성북동 관광안내공원 외 3개소

○ 성북동 아트벤치 프로젝트 : 성북동 1가 115-24 성북동 빌딩 앞

○ 조지훈 집터 앞 어반폴리 프로젝트 : 성북동 142-1 일대

보조금 집행 내역

가. 정산 총괄표

(단위: 원)

구분	교부액	집행액	집행잔액
2012년	900,000,000	447,879,960	27,120,040
2013년	-	409,459,310	15,540,690
계	900,000,000	857,339,270	42,660,730
※ 보조금 이자발생액 : 0원 , 반납예정액 : 42,660730원 [반납일정] - 2013년도 집행잔액(15,540,690원) : 2014 하반기 추경편성완료 - 2012년도 집행잔액(27,120,040원) : 2015 하반기 추경편성 후 반납예정

나. 비목별 집행내역 – 세부지출내역 참고(엑셀자료-따로붙임)

구 분	비 목	예산액	집 행 내 역		비고
			금 액	세부 지출 내역
합 계		900,000,000	857,339,270	총 55건
(시비) 보조금	일반운영비	10,000,000	9,982,310	무인관광안내시스템 운영 등 22건
	시설비및부대비	720,000,000	687,058,850	성북쉼터 리모델링사업 실시설계 용역 등 28건
	자산취득비	170,000,000	160,298,110	성북동 무인관광안내시스템 (키오스크)제작·구매 등 5건

2014.  10.    .

작성자 : 문화체육과 행정7급     전  혜  란    (인)                     확인자 : 문화체육과 행정5급     유  종  기    (인)