2020년 이월 대상사업 추진현황

(서울특별시 / 공사발주 및 시행 - 강북·도봉·양천·구로·금천·영등포구)

□ 사업개요

◦ 사 업 명 : 도시숲(바람길숲) 조성

◦ 사업기간 : 2019.1. ~ 2021. 12.

◦ 사 업 비 : 10,000,000천원(국비 5,000,000천원, 시비 5,000,000천원)

□ 이월요구 세부내역(국비기준) - 시설부대비 13,000천원 제외

(단위 : 천원)

예산현액(A) - 시설비 -	원인행위액(B)	지출액(C)	이월액(D)	집행잔액(A-(C+D))
4,987,000	3,483,537	178,198	3,305,339	1,503,463

※ 집행잔액 = 긴급재난지원금마련 감추경 1,497,400천원 + 원인행위 잔액 6,063천원

사업추진 경과 (사업계획 수립단계부터 작성)	사업 지연사유 (단계별 지연사유 작성)
◦미세먼지저감 서울시·산림청간 업무협약(‘18.3.) ◦도시숲조성 사업대상지 제출 및 선정(‘18.9.~’19.1.)	◦해당없음
◦바람길숲 조성 사업계획 수립(‘19.1.) ◦서울 바람길숲 조성 기본계획용역시행(‘19.5.~12.)	◦해당없음 ◦해당없음
◦바람길숲 용역 관련 전문가 자문회의(‘19.10.24.) ◦바람길숲 조성 기본 및 실시설계 추진(‘19.7.~’20.7.)	◦해당없음 ◦관련절차 이행 일정에 따른 용역준공 지연(2개월)
◦바람길숲 용역중간보고회 개최(3회/‘20.3.19.~5.20.) ◦바람길숲 용역 설계경제성 검토(3회/‘20.5.19.~5.27.)	◦6개 자치구 협의, 의견수렴 및 조정 등에 시일소요 ◦내역검토, 현장점검, 사업비 조정회의 등 시일소요
◦바람길숲 용역 건설기술심의(‘20.7.22.) ◦바람길숲 설계서 공사 계약심사(‘20.8.24.)	◦건설기술심의 자료보완 등 시일소요 ◦심사자료 보완(원가계산, 내역오류 수정 등) 등 시일소요

□ 이월사유

◦ 설계경제성검토(5.27.), 건설기술심의(7.22.), 공사계약심사(8.24.), 공사비 재배정(9.9.) 등 관련절차 이행에 시일이 소요되어 공사발주(10월) 및 착공(11월)이 늦어졌으며, 동절기 공사제한 등으로 사고이월 필요

□ 향후 추진계획

◦ 장기계속공사(총 차수 계약기간 : ‘20.10~’21.12.)로서 당초 예정된 ‘21년 12월 준공을 목표로 정상추진