2018년 지방보조금 사업계획서(예시)

(제100회 전국체전 대비 시설 개보수)

1. 사업개요

ㅇ 시행주체 : 00구청

ㅇ 대상시설 : 00구민체육센터

ㅇ 사업기간 : 2018. 5월 ~ 12월

ㅇ 시설개요

- 시설위치 : 서울특별시 00구 00로 00

- 소유기관 : 00구청(담당자 : 김철수, □02-0000-0000)

- 관리기관 : 00구시설관리공단(담당자 : 이영희, □02-0000-0000)

- 주요시설 : 주경기장 1동(면적 : 00m×00m), 보조경기장(면적 : 00m×00m)

- 부대시설 : 주차장(000면), 탈의실, 샤워실, 화장실, 식당, 카페 등

2. 사업추진계획

ㅇ 2018. 5월 : 설계서 작성

ㅇ 2018. 7월 : 공사 발주

ㅇ 2018. 8월 : 공사 착공

ㅇ 2018. 12월 : 공사 준공

3. 공정별 투자 계획                                        (단위 : 천원)

공 종 별	사업비	비 고
총사업비	2,468,256
①설계비	84,186
②감리비	21,952
③시설부대비	3,118
④도급공사비	1,559,000
- 토목공사	407,500
- 건축공사	224,500
- 조경공사	110,000
- 전기공사	52,000
- 기계설비공사	650,000
- 정보통신공사	100,000
- 소방공사	5,000
- 기타공사	10,000
⑤관급공사비	800,000

4. 사업비 산출내역서

ㅇ 작성 : 00구청 김철수(02-0000-0000)

00건축사무소 김건축(02-0000-0000)

구분			예산액(천원)	비고
총사업비			2,468,256
	①설계비		84,186
		◦ 기본 및 실시설계비 : 1,559,000천원 × 5.4% = 84,186천원	84,186
	②감리비		21,952
		◦ 감리비 : 1,559,000천원 × 1.41% = 21,952천원	21,952
	③시설부대비		3,118
		◦ 1,559,000천원 × 0.2% = 3,118천원	3,118
	④도급공사비(소계)		1,559,000
		토목공사비 ◦ 보도블럭 철거·설치 : 5,000㎡ × 75천원 = 375,000천원 ◦ 경계석 철거·설치 : 500㎡ × 65천원 = 32,500천원	407,500
		건축공사비 ◦ 관람석 철거·설치 : 500석 × 95천원 = 47,500천원 ◦ 스탠드 방수 : 1,600㎡ × 98천원 = 157,000천원 ◦ 마루 센딩 : 1식 × 20,000천원 = 20,000천원	224,500
		조경공사비 ◦ 수목식재 : 100주 × 500천원 = 50,000천원 ◦ 파고라 설치 : 2개 × 30,000천원 = 60,000천원	110,000
		전기공사비 ◦ 자동승강 LED조명 설치 : 50개 × 1,000천원 = 50,000천원 ◦ 수배전반설치 : 1식 × 2,000천원 = 2,000천원	52,000
		기계설비공사비 ◦ 수영장 제습공조기 : 2개 × 100,000천원 = 200,000천원 ◦ 수영장정수필터교체 : 3개 × 150,000천원 = 450,000천원	650,000
		정보통신공사비 ◦ 전광판(6m×4m, 풀컬러LED) 구매설치 : 1식 × 30,000 = 30,000천원 ◦ 음향설비교체 : 1식 × 50,000천원 = 50,000천원 - 스피커 300W 10개, 앰프 300W 2개 ◦ 음향케이블 및 배관교체 : 1식 × 20,000천원 = 20,000천원	100,000
		소방공사비 ◦ 소방설비교체 : 1식 × 5,000천원 = 5,000천원	5,000
		기타공사비 ◦ 폐기물처리 : 1식 × 10,000천원 = 10,000천원	10,000
	⑤관급공사비		800,000
		◦ 인조잔디구매설치 : 1식 × 500,000천원 = 500,000천원 ◦ 수납식관람석구매설치 : 1식(1,000석) × 300,000천원 = 300,000천원	800,000

5. 현황사진

관람석 노후(교체)	조명 조도부족(LED조명 교체)
바닥 노후(교체)	샤워실 노후(리모델링)
전광판 부재(구매설치)	방송장비 고장(교체)
관람석 부족(수납식관람석 구매설치)