붙임2	서물물연구원 재정 신속집행 제고대책 및 향후전망

□ 신속집행 추진실적 (6.14.기준) ☞ 집행예상액은 6.14. 기준 예상 원인금액으로 작성

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액(A)	대상액(B)	6.14.기준 집행 예상액(C)	6.14.기준 집행률(C/B)	상반기 집행예상		상반기 목표대비 (56.5-E)
					집행액(D)	집행율 E=D/B
합계	1,995	1,995	840	42.1%	1,475	73.9%	-17.4%
수질시험연구 장비 확충	1,995	1,995	840	42.1%	1,475	73.9%	-17.4%

□ 집행 부진사유  ☞ 자세하게 작성

○ 먹는물분석과 : 색도계외 장비(81백만원)

- 조달청을 통한 외자구매는 구매기간이 최소 4~5개월 소요로 인해 신속       집행 어려움, 현재 입찰 진행 중

○ 재료연구과 : 오존열화시험장치(50백만원)

- 오존열화시험 성능평가시험장치 구매는 연구사업 관련 자료검토     및 자문회의(6월 예정) 결과 반영하여 제작구매 추진(9월 발주 예정)

○ 수처리과 : 정수처리공정시스템(260백만원)

- 사전규격공개 시 정보통신산업진흥원에서 특정 SW구매시 물품공급        및 기술지원 협약추진 권고의견이 접수되어 협약추진 후 발주예정

○ 청사 증축관련 실험장비 구매는 청사 증축완료 후 추진 예정

- 대상 : 일반 실험대 등 5종 44대(총 259백만원)

○ 수처리과 : 배출수 폭기실험제작(50백만원)

- 연구과제 진행중 현장 실험장소를 강북아리수정수센터에서 구의정수센터로 변경하여 협의 진행

- 안전성 및 전력공급 가능여부 등 협의에 시간이 소요

- 파이롯 플랜트의 구상(규모, 폭기, 펌프 등)에 시간이 소요

□ 상반기 목표달성을 위한 집행실적 제고 대책 및 집행 전망  ☞ 자세하게 작성

○ 수질시험연구장비 구매: 총 635백만원 상반기 6월까지 집행예정

- 광학현미경 1대 계약체결 및 납품진행 중: 32백만원

- GC/MS/MS 3대 계약체결 및 납품진행 중: 599백만원

- 건조기 및 배양기 계약체결 진행 중: 4백만원

※ 사업소 장비구매 6월까지 집행가능 635백만원

□ 하반기 집행예정

○ 먹는물분석과(색도계 외 장비(81백만원))

- 외자 조달로 구매하는 장비는 하반기 9월까지 구매 예정 (유도결    합  플라즈마원자발광분광기, 입자계수기) 등 81백만원 집행예정

○ 수처리과 (정수처리공정시스템)

- 6월중순 협약추진 완료 후 재무과 발주의뢰 예정

○ 재료연구과 (오존열화시험장치 50백만원)

- 오존열화시험 성능평가시험장치 구매는 연구사업 관련 자료검토     및 자문회의(6월 예정) 결과 반영하여 제작구매 추진(9월 발주 예정)

○ 청사 증축관련 실험장비 구매는 청사 증축완료 후 추진 예정

- 대상 : 일반 실험대 등 5종 44대(총 259백만원)

○ 신물질과 : 클린시스템 설치(45백만원)

- 5. 28일 계약 7월중 집행 예정