붙임2	물연구원(증축) 재정 신속집행 제고대책 및 향후전망

□ 신속집행 추진실적 (6.14.기준) ☞ 집행예상액은 6.14. 기준 예상 원인금액으로 작성

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액(A)	대상액(B)	6.14.기준 집행 예상액(C)	6.14.기준 집행률(C/B)	상반기 집행예상		상반기 목표대비 (56.5-E)
					집행액(D)	집행율 E=D/B
합계	2,490	2,490	1,086	43.6%	1,470	59%	-2.5%
청사증축공사 (시설비)	2,390	2,390	1,059	44.3%	1,400	58.6%	-2.1%
청사증축공사 (감리비)	100	100	27	27%	70	70%	-13.5%

□ 집행 부진사유  ☞ 자세하게 작성

○ 무연고 분묘 발견에 따른 이장처리, 관급자재 공급지연 및 기타 토공사 지연 등으로 인해 준공기한을 연장함에 따라 상반기 집행률 저조

※ 공사기간(45일 연장)

- 당초: 2018. 10. 5~2019. 7. 31.(1차: 2018. 10. 5~2019. 5. 30.)

- 변경: 2018. 10. 5~2019. 9. 16.(1차: 2018. 10. 5~2019. 7. 15.)

□ 상반기 목표달성을 위한 집행실적 제고 대책 및 집행 전망  ☞ 자세하게 작성

○ 6월 중 1,470백만원 집행, 최종 집행율 59% 달성

- 공사 기성준공금 약274백만원 집행

- 감리비용 약70백만원 집행

- 공사근로자 노무비 약40백만원 집행