<서식 1>

사고이월 사업별명세서

○ 사 업 명 : 둔촌동 보훈병원~방아삼거리간	사업 소장	김 명 용 (인)
송배수관 정비공사	사업주관과장	남 정 열 (인)
○ 공사기간 : 2016.09.20 ～ 2016.12.31	작 성 자	시설주사 김효수 (인)
	예산담당(사업소)	행정주사 임홍희 (인)

○ 예산과목(사업코드 : 21102000)

(관)자본적지출(항)유형자산취득(세항)구축물(목)시설비(세목)노후송배수관정비

(단위 : 천원)

예산현액	배정일자	배정액	구 분		지출원인행위액		지 출 액		사고이월액
700,000	2016.07.01	700,000	계		468,308		237,732		244,082 (13,506)
			공 사 비		275,186		44,610		230,576
				도 급 비		275,186		44,610		230,576
				관 급 비
			보 상 비
			이전비․기타		193,122		193,122		(13,506)

○ 이월사유 (육하원칙에 의거 구체적으로 기술)

- 본 공사시행을 위해 2016.09.20일 공사 착공하였으나 지하철 9호선(923공구) 공사일정 지연으로 지하철 공사구간 포장복구 최종 완료시점이 ‘17년 9월로 예정되어 공사기간 동안 굴착이 불가능하여 강동구 지역주민의 깨끗하고 안정된 아리수 공급을 위해 부득이 이월된 사항임

○ 착공연월일 : 2016.09.20          ○ 최초준공연월일 : 2016.12.31

(- 1차연기준공연월일 : 2017.11.30  - 2차연기준공연월일 :     - 최종준공연월일 : 2017.11.30)

<작성요령>

(1) 사업명마다 최초계약서, 원인행위 및 지출내역서, 계약변경합의서, 연기방침서, 준공연기이행각서 등 관련서류 첨부

(2) 보상비는 감정평가서, 지번별 사정액 조서 및 기타보상추진과 관련한 근거 서류 첨부 (보상협의통지, 중토위 감정의뢰서류, 재결통지서 등)

(3) 지출원인행위 미필 이월액(부대경비)은 별첨 서식에 의거 정확히 작성

(4) 지출원인행위액 및 지출액은 반드시 관련 회계장부와 일치하여야 함

※ 첨부 시, 해당 부분만 첨부하고 별도표시 요망

(5) 이월요구와 관련한 방침서 : 본부→부장, 사업소→사업소장

(6) 사고이월액은 지출원인행위 미필 이월액을 포함한 총이월액을 기재하고, 지출원인행위 미필 이월액은 (   )안에 별도 기재

첨부 : 1. 관급자재 구매액 일자별 현황 양식 1부.

2. 지출원인행위 미필 이월사유서 양식 1부.

관급자재 구매액 일자별 현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 사 업 명 : 둔촌동 보훈병원~방아삼거리간 송배수관 정비공사

(단위 : 원)

일 자 별	구 매 액	비 고 (구매내용)
계	176,000,000	자재사업소 예산 재배정후 일괄구매
2016.07.18	176,000,000	닥타일주철직관,타이튼,150㎜*6m등 41종

지출원인행위 미필 이월사유서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 사 업 명 : 둔촌동 보훈병원~방아삼거리간 송배수관 정비공사

○ 예산과목

(관)자본적지출 (항)유형자산취득 (세항)구축물 (목)시설비 (세목)노후송배수관정비

○ 지출원인행위 미필대상 총액 : 13,506,000원

○ 지출원인행위 미필 이월금액 : 13,506,000원

○ 이월액 산출내역

- 복구비 및 기타 : 13,506,000원

○ 이월사유

- 공사에 필요한 관급자재비, 복구비, 폐기물처리비 등

2016.  12.    .

작성자 : 시설관리과 시설주사 성명 김효수 (인)

확인자 : 강동수도사업소장    성명 김명용 (인)