남산 회현자락 한양도성 보수.정비 및 공원조성공사(3단계)

(공원조성과 / 중부공원녹지사업소 시설과)

□ 2016 사업개요

◦위    치 : 중구 회현동 1가 100-177

◦규모(면적) : 45,000㎡

◦사업기간 : 2015.12.19.~2016.12.31(공정율 99%, 12월 현재)

◦사 업 비 : 507,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦ 이월내역

- 예산과목 : 노후공원재조성, 남산공원 회현지구 정비, 시설비

- 이월세부내역                                         (단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '15이월비 제외	(재)배정액(B)	원인행위액(C)	지 출 액(D)	사고이월액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		507,000,000	507,000,000	197,066,440	177,743,900	329,256,100 (322,944,600)	-
설 계 비
공 사 비		461,418,500	461,418,500	151,484,940	138,473,900	322,944,600
	도 급 비	416,921,240	416,921,240	106,987,680	93,976,640	322,944,600
	관 급 비	44,497,260	44,497,260	44,497,260	44,497,260	-	-
보 상 비
감 리 비
시설부대비						( )
기 타 (폐기물)		45,581,500	45,581,500	45,581,500	39,270,000	6,311,500 ( - )	-

◦이월사유(사고이월 사유를 제3자도 납득할 수 있도록 육하원칙에 따라 구체적으로 기재)

- 한양도성사업은 사적보존을 위한 문화재보호법에 의한 문화재청 현상변경

허가등 절차를 거처 진행되는계속차수공사로 잔여예산은 3차에 이월

- 한양도성도감과의 분수광장주변 보호각 설치 계획에 따른 공사중지

➤ 10월에 공사 발주한 경우 10월전까지 추진상황(지연된 사유) 등을 구체적으로 기재

➤ 보상비의 경우 총 ㅇ필지 중 ㅇ필지 보상 등 ’16년 추진실적 및 이월대상 필지에 대한 보상추진경위, 지연사유, 향후계획 등 구체적으로 기재