테마가 있는 서울의공원 조성

(남산 유스호스텔 진입로 세계인권선언문 제작구매 설치)

(공원조성과 / 중부공원녹지사업소)

□ 2013 사업개요

◦위    치 : 중구 퇴계로26가길(남산공원내)

◦규모(면적) : 세계인권선언문 제작·구매 설치

◦사업기간 : 2013.8.26. ～ 2014.4.3.(공정율 30%, 14.2월말 현재)

◦사 업 비 : 22,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 공원조성과, 생활권공원확충, 시민고객이 감동하는 고품격 공원관리, 노후공원 재조성, 테마가 있는 서울의공원 조성, 시설비

- 이월세부내역                                            (단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액(B)	원인행위액(C)	지 출 액(D)	사고이월액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		22,000,000	22,000,000	20,837,300	0	20,837,300	1,162,700
설 계 비
공 사 비		22,000,000	22,000,000	20,837,300	0	20,837,300	1,162,700
	도 급 비	22,000,000	22,000,000	20,837,300	0	20,837,300	1,162,700
	관 급 비
보 상 비
감 리 비
시설부대비						( )
기 타 ( )						( )

◦이월사유

- 세계인권선언문 설치관련 시장님 보고결과(지시사항) 사업계획 변경에 따른 사업기간 연장(2014. 4. 3일까지)

첨부 1.지출원인행위부 및 지출부 각1부

2.용역계약서 등 관련서류 각1부.

남산공원 회현지구 정비

(공원조성과 / 중부공원녹지사업소)

□ 2013 사업개요

◦위    치 : 서울시 중구 회현동 1가 100-177번지 일대(중앙광장)

◦규모(면적) : 서울 한양도성 보존,정비:448m, 공원조성:약45,000㎡

◦사업기간 : ‘14. 1. 2. ～  6. 30. (’14.1 현재 공정율 10%)

◦사 업 비 : 190,190,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 노후공원 재조성, 남산공원 회현지구 정비, 401-01

- 이월세부내역                                            (단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액(B)	원인행위액(C)	지 출 액(D)	사고이월액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계			200,000,000	190,190,000		190,190,000	9,810,000
설 계 비			200,000,000	190,190,000		190,190,000	9,810,000
공 사 비
	도 급 비
	관 급 비
보 상 비
감 리 비
시설부대비						( )
기 타 ( )						( )

◦이월사유

- 장기 계속사업으로 2013년 12월에 용역이 발주되어, 현재 문화재 유구발굴이 진행중에 있음

- 문화재 발굴 및 전문가 자문의견 등 충분한 사업검토에 따른 절대공기 부족으로 사고이월하여 추진하고자 함.

첨부 1.지출원인행위부 및 지출부 각1부

2.용역계약서 등 관련서류 각1부.  끝.

모험의숲 시범조성 (중랑캠핑숲)

(공원조성과 / 중부공원녹지사업소)

□ 사업개요

◦위    치 : 중랑구 망우동 산33(중랑캠핑숲) 일대

◦규모(면적) : 10,000㎡

◦사업기간 : ‘13. 10. 14. ~ ’14. 12.13. (’14.1현재 공정율 10%)

◦총사업비 : 791,000천원(공사 745백만원, 설계 460백만원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 생활권공원확충, 노후공원재조성, 모험의숲시범조성, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액(B)	원인행위액(C)	지 출 액(D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		45,080,000	45,080,000	39,704,970	0	39,704,970	5,375,030
설 계 비		45,080,000	45,080,000	39,704,970	0	39,704,970	5,375,030
공 사 비
	도 급 비
	관 급 비
보 상 비
감 리 비
시설부대비
기 타 ( )

◦이월사유

- 모험의숲 조성은 시범사업으로 국내외 사례조사, 관련법규, 도입시설, 공원조성계획변경 절차이행 등 충분한 조사와 검토기간이 소요될 것으로 판단되어 ‘14년 하반기까지 용역을 추진하는 사업으로 절대공기 부족으로 사고이월하여 추진하고자 함.

첨부 1.지출원인행위부 및 지출부 각1부

2.용역계약서 등 관련서류 각1부.  끝.