(붙임2) 16년 산사태 예방 사방공사 추가지역 목록(우기후)

(2016. 12. 12 현재)

구 분	기관명	위 치	추진상황	추진현황 및 일정	비고 (구청담당)
16년 추가지역	노원구	노원구 월계동 산3-1 (초안산 가족캠핑장 상부 계류)	공사중 (공정율 97%) 12.17 준공예정	○ ’16.6.17 공사비 재배정 요청(구⇒시) ○ ’16.6.22 예산 재배정(502,804천원) ○ ’16.7.19 공사발주 ○ ’16.9.26~12.30 공사시행(수림종합조경)	(김혜량 2116-3946)
말죽거리공원 민원사항	서초구	서초구 양재동 산17-21 일대 (말죽거리공원, 절개지 2개소) 가정행정법원 사면, 강남대로 사면	공사완료 (‘16.10.18)	○ ’16.3.17 민원방문(호주건설 육종택) ○ ’16.3.18 현장조사(서울시) ○ ’16.3.22 민원 검토처리 요청(시⇒구) ○ ’16.3.28 민원회신(서울시⇒민원인) ○ ’16.4.7 정비예산 요청(구⇒시) ※ 총 99백만원(공사비92 설계비 7) ○ ’16.4.11 정비예산 회신(시⇒구) ※ 우선 설계 후 공사비 예산 감안 배정 ○ ’16.5.9 설계비 재배정 요청(구⇒시) ○ ’16.5.11 설계비 재배정(15,774천원) ○ ’16.5.24~6.17 실시설계용역 완료 ○ ’16.6.17 공사비 재배정 요청(구⇒시) ○ ’16.6.22 공사비 재배정(27,962천원) ○ ’16.8. 9 공사발주 ○ ’16.9.19~10.18 공사시행(삼미조경)	○○○ 민원 (김보영 2155-6846)

구 분	기관명	위 치	추진상황	추진현황 및 일정	비고 (구청담당)
국가안전 대진단 지적사항	강서구	강서구 화곡동 산8-1 (봉제산, 용천사 절개지)	공사중 (공정율 75%) 12.20 준공예정	○ ’16.7.18 설계비 재배정 요청(12,413천원) ○ ’16.7.19 회신(금년도 예산낙찰차액 활용) ○ ’16.7.28~9.25 실시설계(지은조경) ○ ’16.8.26 설계심의(결과:조건부채택) ○ ’16.9.26 공사비 재배정 요청(구⇒시) ○ ’16.9.29 예산 재배정(235,758천원) ○ ’16.9.29 공사발주 ○ ’16.10.26~12.24 공사시행(위드이플랜)	국가안전 대진단 지적사항 (정진갑 2600-4182)
국가안전 대진단 지적사항	종로구	종로구 창신동 산6-13(174,929천원) 종로구 부암동 182-38(10,333천원)	공사완료 (’16.12.2)	○ ’16.7.22 공사비 재배정 요청 ○ ’16.7.27 공사비 재배정(185,262천원) ○ ’16.8.2 공사발주 ○ ’16.9.1~12.29 공사시행(효원랜드)	국가안전 대진단 지적사항 (남창림 2148-2852)
민원해소 추가요청 (‘16.9.13) 집행잔액 사용	종로구	종로구 부암동 66-1(88,000천원) (정정 65-3 북악산, 산불4초소 주변) 종로구 부암동 1-1(132,000천원) (정정 산2-1 북악산, 대대본부)	공사완료 (’16.12.2) 공사중 (공정율 95%) 12.14 준공예정	○ ’16.9.13 예산 재배정 요청(구⇒시) ○ ’16.9.29 예산 재배정(220,000천원) ○ ’16.9.29~10.8 실시설계(늘푸른) ○ ’16.10.24 공사발주 ○ ’16.11.8~12.14 공사시행(산오름)	(남창림 2148-2852)

구 분	기관명	위 치	추진상황	추진현황 및 일정	비고 (구청담당)
관악구청장 해빙기 점검 지적사항	관악구	관악구 대학동 산56-2(334,504천원) (관악산, 칼바위능선)	공사완료 (‘16.10.17)	○ ’16.3.18 예산배정 요청(구⇒시) ※ 구청장 합동점검 결과 낙석 발생 등 ○ ’16.4.04 전문가 자문결과(구⇒시) ○ ’16.4.21 설계비 재배정 요청(구⇒시) ○ ’16.4.26 설계비 재배정(19,538천원) ○ ’16.5.04~6.13 : 실시설계 용역실시 ○ ’16.6.27 공사비 재배정 요청(구⇒시) ○ ’16.7.01 공사비 재배정(334,504천원) ○ ’16.7.05 공사발주 ○ ’16.7.28~10.17 공사시행(도원건설)	구청장 해빙기 점검 (김병진 879-6552)
민원해소 추가요청 (‘16.9.13) 집행잔액 사용	관악구	관악구 미성동 1566-34(85,000천원) (미성동 위험절개지) 관악구 난곡동 산125-4(98,000천원) (난곡동 위험절개지) 관급구매설치 ‘16.11.4 완료	공사완료 (‘16.11.7)	○ ’16.9.13 예산 재배정 요청(구⇒시) ○ ’16.9.29 예산 재배정(183,000천원) ○ ’16.10.6~10.10 실시설계 (다산산림기술사) ○ ’16.10.13 공사발주(미성동 절개지) ○ ’16.10.19~11.7 공사시행(JK그룹)	(이보인 879-6551)
기존 사방시설물 보수	성북구	성북구 정릉동 산87-1 (북한산, 여래사 삼거리 부근)	공사완료 (‘16.11.13)	○ ’16.9. 7 예산 재배정 요청(구⇒시) ○ ’16.9.29 예산 재배정(22,000천원) ○ ’16.9.29 자체 설계완료 ○ ’16.10.12 공사발주 ○ ’16.10.20~11.13 공사시행(건율)	(염승현 2241-3695)
		성북구 정릉동 산87-1 (북한산, 운선암 뒤)	공사완료 (‘16.12.9)	○ ’16.11.4 예산 재배정 요청(구⇒시) ○ ’16.11.8 예산 재배정(20,000천원) ○ ’16.11.11 공사발주 ○ ’16.11.15~12.14 공사시행(산청임업)

구 분	기관명	위 치	추진상황	추진현황 및 일정	비고 (구청담당)
민원해소 추가요청 (‘16.9.19) 집행잔액 사용	강동구	강동구 상일동 152-4 (명일공원, 벽산빌라 뒤)	공사중 (공정율 90%) 12.14 준공예정	○ ’16.9.19 예산 재배정 요청(구⇒시) ○ ’16.9.29 예산 재배정(150,000천원) ○ ’16.10.6~11.5 실시설계(토담임업) ○ ’16.11.3 : 공사발주 ○ ’16.11.11~12.20 공사시행(일산이엔지)	(한원균 3425-6473)