[붙임3]

국고보조금 교부신청서

사 업 명	2016년도 작은도서관 조성 지원 사업
신 청 자	주 소	서울특별시 중구 세종대로 110(태평로1가)
	기 관 명	서울특별시		전화번호	02-2133-0206
	대표자명
교부신청액	일금 오천만원 (￦ 50,000,000)
총사업비 (단위:천원)	계	국고보조금	지방비		자부담	기타
			시․도비	시․군․구비
	100,000	50,000	-	50,000	-	-
사업개요	ㅇ 보조사업의 목적 - 교육문화 인프라 시설이 부족한 신정3동의 민원센터 내에 생활밀착형 작은도서관을 조성하여 독서문화 확산에 기여 ㅇ 사업기간 - 2016. 7. ~ 2016. 12. ㅇ 사업내용 - 지역특성 및 조성건물 특수성 등을 반영하여 ‘다문화 특성화 도서관’으로 조성
「보조금관리에관한법률」 제16조의 규정에 의거 “작은도서관 조성 지원 사업” 국고보조금을 신청합니다. 2016 년 4 월 일 문화체육관광부장관 귀하
붙임 : 교부신청서 1부

2016년 작은도서관 조성사업 국고보조금 교부신청서

1. 사업개요

ㅇ 지자체명 : 서울시 양천구

ㅇ 조성공간 : 신정3동 넓은들 민원센터 내 1층

ㅇ 주    소 : 서울시 양천구 남부순환로88길 5-7

ㅇ 도서관명 : 신정3동 넓은들 작은도서관(가칭)

ㅇ 사업유형 : 생활밀착형

ㅇ 사업기간 : 2016년  7월 ～ 2016년 12월

ㅇ 규    모 : 184㎡(설계 중 변경 가능)

ㅇ 운영주체 : 지자체 직영

ㅇ 특    징

- 서울에서 인구수가 가장 많고 인근에 초·중·고등학교 7개가 있는 등 지역주민의 활용가능성이 높은 생활밀착형 작은도서관임

- B1층의 ‘다문화가족지원센터’와 연계한 다문화특성화도서관으로 조성, 원스톱 다문화 커뮤니티 공간으로 운영 가능

- 주민현황 : 신정3동 : 20,216세대/54,786명

※ 신정3동 다문화가족 현황 : 412세대 912명(양천구 2,087세대, 5,061명)

2. 조성 후 운영계획

ㅇ 조성 이후 지자체의 운영예산 지원계획                    (단위:천원)

연도	2016	2017	2018	2019	2020	계
예산	10,000	11,000	12,000	12,000	12,000	57,000

ㅇ 운영 및 활동계획

- 운영인력 : 총 20여명(직원 1명, 자원봉사자 20명)

- 운영시간 : 평일 09:00 ～ 18:00, 토요일 09:00 ～13:00

- 비치도서 ‧ 물자

․도서 13,695권 비치(향후 15,000권 확보 목표 : 1,305권 추가 구매)

․PC 4대, 프린터 1대, 복사기 1대 등

- 주민참여 촉진을 위한 홍보전략 등

: 설문서 배부, 구정홍보물 배부, 동 주민센터 각종 회의 시 홍보 등

3. 예산계획

ㅇ 총괄표

(단위 : 천원)

계	국비	지방비		기타	비고
		시도비	시군구비
100,000	50,000	-	50,000

ㅇ 집행계획(지방비 포함 총 사업비 집행계획)

(단위 : 천원)

구 분	세부 내역	재원별 현황				전체 대비 비율
		국고	지방비	기타	소계
시설비 (설계비포함)	설계비	4,000	4,000		8,000	88%
	리모델링공사비	40,000	40,000		80,000
자산및물품취득비	컴퓨터, 리더기, RFID 회원카드 등	3,000	3,000		6,000	12%
	서가, 책상, 의자 등	3,000	3,000		6,000
계		50,000	50,000		100,000	100%

4. 사업추진일정

추진일정	주요 내용	비고
○ ‘16. 4월 ○ ‘16. 7월 ○ ‘15. 8월 ○ ‘15. 10월 ○ ‘15. 11월	○ 신정3동 작은도서관 조성 교부신청서 제출 ○ 신정3동 작은도서관 조성 세부추진계획 수립 ○ 설계용역 ○ 공사착공 ○ 공사준공	구 ⇒ 서울시

5. 작성자

ㅇ기관명 : 서울시 양천구청            소속 : 교육지원과

ㅇ담당자 : 직급 7급                   성명 : 송재은

ㅇ연락처 : 전화 02-2620-3118           팩스 : 02-2620-4117

ㅇ이메일 : sjeward@yangcheon.go.kr