시설물 유지관리 실적 및 계획

□ 단일공사

시설물명	2014 실적			2015계획
	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간
합 계		1,210			1,568
성 내 교	-콘크리트표면보수 126㎡ -받침장치 교체 90개소	490	‘14.10 ~ ’15.5	-	-	-
천호지하차도	-벽체타일철거 및 설치 2,800㎡ -콘크리트표면보수 1,452m	720	‘14.5 ~ ’14.11	-	-	-
탄천2교	-	-	-	-아스콘포장90a -신축이음 70m -콘크리트 단면보수 700㎡	934	‘15.2~8
광 평 교	-	-	-	-아스콘포장 46a -교면방수 4,600㎡ -신축이음보수 126m	634	‘15.2~8

□ 일상유지보수공사(연간단가)

시설물명	2014 실적			2015계획
	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간
합 계		862			1,901
광 평 교	-접속교옹벽 목재보수 134m -강화유리교체 2매	3	‘14.3 ~ ’14.11	-단일공사 시행	-	‘15.3~ 15.12
세곡1교	-보수내역 없음	-	‘14.3 ~ ’14.12	-보수계획 없음	-	-
세곡3교	-보수내역 없음	-	‘14.3 ~ ’14.12	-보수계획 없음	-	-
방이고가	-차량방호울타리정비 12m	7	14.3 ~ ’14.11	-보수계획 없음	-	-
가락 지하차도	-침사지토사제거27㎡ -콘크리트표면보수84㎡	11	14.3 ~ ’14.11	-균열보수 81m -재료분리 68㎡	21	‘15.3~ 15.12
헌 릉 교	-교대표면보수 89㎡ -교대세굴콘크리트타설 10㎥ -콘크리트단면보수 2.6㎡	4	‘14.3 ~ ’14.10	-보수계획 없음	-	-
탄천2교	-교면포장 38a, -포장 그루빙(종,횡) 1,227m	91	‘14.3 ~ ’14.10	-단일공사 시행	-	-
대 치 교	-물끊기 장치 설치 36m	2	‘14.3 ~ ’14.10	-보수계획 없음	-	-
대치 지하차도	-아스팔트균열보수 5개소 -경계석뒷채움몰탈채움 640m	31	‘14.3 ~ ’14.10	-균열보수(106m) -박리, 철근노출(9.81㎡)	22	‘15.3~ ’15.12
송파 지하차도	-침사지 토사제거106㎡	21	‘14.3 ~ ’14.10	-균열, 누수(1m)	1	‘15.3~ ’15.12
위례터널	-보수내역 없음	-	-	-보수계획 없음	-	-
위례 지하보차도	-보수내역 없음	-	-	-보수계획 없음	-	-
탄천우안 지하차도	-보수내역 없음	-	-	-보수계획 없음	-	-
고 덕 교	-보수내역 없음	-	-	-보수계획 없음	-	-

시설물명	2014 실적			2015계획
	보 수 내 용	예 산	보수기간	보 수 내 용	예 산	보수기간
대 곡 교	-후타재보수 13m -점검통로출입문보수 1개소	4	‘14.3~ ’14.10	-구교 차수덮개판 보수(1개) -신교 교면포장(3.7a)	20	‘15.3~ ’15.12
영동2교	-신축이음보수 37m -연석덮개정비55m -P2 배수파이프 정비 2개소	79	‘14.5 ~ ’14.10	-단면보수 195㎡ -균열보수 77m -신축이음 정비 6개소	216	‘15.3~ ’15.12
삼 성 교	-교면방수 및 포장 7a -상판보수 88㎡ -신축이음장치보수 30m	256	‘14.3~ ’14.10	-가로보 단면복구(23㎡) -주형 단면복구(5㎡)	10	‘15.3~ ’15.12
오 륜 교	-비둘기방지망 설치 1,952㎡	116	‘14.3 ~ ’14.12	-군열보수 163m -도장보수 10㎡	20	‘15.3~ ’15.12
영동3교	-보수내역 없음	-	-	-아스콘 균열보수 29m -균열보수 3m	5	‘15.3~ ’15.12
성 내 교	단일공사 시행	-	-	-균열보수 8m -받침정비 5개소	31	‘15.2~ ’15.12
성내5교	-보수내역 없음	-	-	-철근노출(2.69㎡) -침식 및 골재노출(16.8㎡)	5	‘15.3~ ’15.12
장지1교	-보수내역 없음	-	-	-보수내역 없음	-	-
장지2교	-보수내역 없음	-	-	-보수계획 없음	-	-
영동5교	-보수내역 없음	-	-	-신축이음 정비 8개소 -교면방수 및포장 640㎡	451	‘15.3~ ’15.12
서 부 교	-보수내역 없음	-	-	-보수계획 없음	-	‘15.3~ ’15.12
강일육교	-보수내역 없음	-	-	-보수계획 없음	-	-
매봉터널	-보수내역 없음	-	‘14.3 ~ ’14.10	-상행선 보도부 균열보수 49m -하행선 보도부균열보수 190m	33	‘15.3~ ’15.12
석촌지하차도	-침사지토사제거 14㎡	8	‘14.3 ~ ’14.10	-균열보수48m -콘크리트단면보수33㎡	30	‘15.3~ ’15.12
상일 2교	-보수내역 없음	-	‘14.3 ~ ’14.10	아스콘 균열(102m) 난간 및 연석 균열(23.7m)	4	‘15.3~ ’15.12

시설물명	2014 실적			2015계획
	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간
잠실호수교	-교대표면보수100㎡ -후타재보수 5.3m -포장보수 37㎡ -상판보수 21㎡	18	‘14.3 ~ ’14.10	-신축이음장치교체31m -난간 연석 보수 39㎡	25	‘15.3~ ’15.12
복정 2교	-보도난간 정비 2개소	1	‘14.3 ~ ’14.10	-교대교각 균열 44m	6	‘15.3~ ’15.12
탄 천 교	-A2방호울타리보수4개소 -A1~P3배수홈통정비 220m -포장소파보수117m -교면방수1,828㎡ -상판보수 104㎡	203	‘14.3 ~ ’14.10	-교면방수 및 재포장73a -가로보 균열보수90m	800	‘15.3~ ’15.12
일원터널	-단면보수8㎡ -방음벽현황판 정비2개소	2	‘14.3 ~ ’14.10	-도로부 아스팔트 망상균열 286.38㎡ -옹벽균열 5.28m	72	‘15.3~ ’15.12
천호지하차도	단일공사 시행	-	-	-균열보수 121m -단면보수 49㎡	36	‘15.3~ ’15.12
성내유수지교	-콘크리트 표면보수 79㎡	5	‘14.3 ~ ’14.10	-후타재 정비 176㎡ -표면보수 327㎡	93	‘15.3~ ’15.12
여의천교	-보수내역 없음	-	-	-보수내역 없음	-	-
파이시티램프B	-보수내역 없음	-	-	-보수내역 없음	-	-
파이시티램프C	-보수내역 없음	-	-	-보수내역 없음	-	-
램프 A	-보수내역 없음	-	-	-보수내역 없음	-	-
램프 B	-보수내역 없음	-	-	-보수내역 없음	-	-
램프 F	-보수내역 없음	-	-	-보수내역 없음	-	-
청계산 지하차도	-보수내역 없음	-	-	-보수내역 없음	-	-
신원지하차도	-보수내역 없음	-	-	-보수내역 없음	-	-
내곡지하차도	-보수내역 없음	-	-	-보수내역 없음	-	-
신원BOX	-보수내역 없음	-	-	-보수내역 없음	-	-