□ 시설물 유지관리 실적 및 계획

○ 시설보수과

- 단일공사

시설물명	2013실적			2014계획
	보 수 내 용	예 산	보수기간	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간
합계		800			2,992
성내교	-교면포장 30.2a -연석단면보수 185㎡	800	‘13.10 ~ ’13.12	-단면보수 450㎡ -받침장치 교체 등	500	‘14.3 ~ ’14.10
영동6교				-교면방수 및 포장 126a -신축이음장치 교체 263m	1,642	‘14.3 ~ ’14.10
천호지하차도				-타일철거 및 설치 2,650㎡ -균열보수 500m	850	‘14.3 ~ ’14.10

- 장기계속 단가계약

시설물명	2013실적			2014계획
	보 수 내 용	예 산	보수기간	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간
합계		1,614			1,479
숯내교	-			-
광평교	-교면방수 및 포장 20a -콘크리트 표면보수 120㎡	148	‘13.4 ~ ’13.6	-신축이음교체 125.5m -거더 균열주입 6.1m -거더 단면복구 5.0㎡	102	‘14.3 ~ ’14.12
세곡1교	-			-
세곡3교	-보도포장 2.3a -콘크리트 표면보수 89㎡	12	13.4 ~ ’13.6	-단면복구(철근피복 부족)24㎡	5	14.3 ~ ’14.12
방이고가	-교면포장 10a -바닥판하면 철골도장 150㎡	77	13.4 ~ ’13.6	-받침장치 교체 30개소	300	14.3 ~ ’14.12
가락지하차도	-아스콘포장 45a -콘크리트 단면보수 420㎡ -시공쪼인트 보수 60m	262	‘13.4 ~ ’13.6	-박스구간 단면복구 70㎡ -바닥판 단면복구(철근노출) 47㎡	25	14.3 ~ ’14.12
탄천1교	-보도포장 4.6a, 균열보수 27m -콘크리트 단면보수 114㎡ -배수관 재설치 5개소 -교좌장치 보수 10개소	147	‘13.5 ~ ’13.12	-균열보수 35m -단면복구 및 단면보수 54㎡ -보도포장 1.5a	80	‘14.6 ~ ’14.10
봉은교				-균열보수 17m	10	‘14.6 ~ ’14.10
헌릉교	-콘크리트 단면보수 13㎡	3	‘13.5 ~ ’13.8	-균열보수 34m, 단면보수 5㎡ -표면그라인딩 54㎡ -기초콘크리트타설 10m	20	‘14.6 ~ ’14.10
탄천2교	-교면포장 25.8a -신축이음장치 보수 113m -콘크리트 단면보수 12㎡	268	‘13.5 ~ ’13.12	-교면포장 9a, 신축이음장치 60m -균열보수 80m -화단부 정비 370㎡	200	‘14.6 ~ ’14.10
대치교	-배수관철거 및 부설 5m	1	‘13.5 ~ ’13.8	-균열보수 16m, 단면보수 60㎡	50	‘14.6 ~ ’14.10
대치지하차도	-시공쪼인트 설치 24m -균열보수 104m, 단면보수 16㎡	11	‘13.5 ~ ’13.11	-타일교체 16㎡	2	‘14.6 ~ ’14.10
송파지하차도				-아스콘포장 소파 30㎡	2	‘14.6 ~ ’14.10

시설물명	2013 실적			2014 계획
	보 수 내 용	예 산	보수기간	보 수 내 용	예 산	보수기간
영동6교	-소파포장․상판 보수 179㎡ -보도포장 16a, 경계석 정비 240m, 균열보수 11m -받침장치 보수 24개소 -조류방지망 설치 319㎡ -보차도연석부실런트주입 420m	263	‘13.7 ~ ’13.11	단일공사	60	‘14.3~ ’14.10
대곡교	-콘크리트 표면보수 0.2㎡	1	‘13.8 ~ ’13.11	- 신교 후타재 보수 24㎡ 신교 교각 표면처리 47㎡ 신교 신축이음 교체 60m 구교 받침재도장 114개 구교 신축이음 교체 20m 구교 후타재 보수15㎡	79	‘14.3~ ’14.10
영동2교	-교면포장 11a -콘크리트 표면보수 53㎡	76	‘13.9 ~ ’13.12	-신축이음 보수 240m -균열보수 77.4m -단면보수 1.45㎡	10	‘14.5 ~ ’14.10
삼성교	-미끄럼방지포장 400㎡ -난간보수 2m, 단면보수 6㎡	42	‘13.5 ~ ’13.12	-신축이음 보수 35m, 가로보 단면복구 9㎡, 바닥판상면 단면복구 600㎡, 바닥판 하면 방수후 재포장 600㎡ -A2 유간 콘크리트 깨기 1식 -보도부측 바닥판하면 유도 배수관 설치 30m바닥판 하면 단면복구 48㎡, 받침 장치 쐐기파손 보수 1식	306	‘14.3~ ’14.10
오륜교	-보도포장 2.7a -강박스도장및실런트주입 8㎡	36	‘13.5 ~ ’13.12	-균열보수 164m, 단면보수 1㎡ -도장보수 5㎡	20	‘14.3 ~ ’14.6
영동3교	-			-단면보수 1.7㎡, 균열보수 2.7m	2	‘14.5 ~ ’14.10
성내교	단일공사			단일공사
성내5교	-신축이음장치 보수 4m -콘크리트단면보수 18㎡	7	‘13.9 ~ ’13.10	-
장지1교	-콘크리트균열보수 10m -유도배수관 정비 20m	4	‘13.9 ~ ’13.10	-
장지2교	-			-
영동5교	-콘크리트 표면보수 1,000㎡-보도부 난간설치 1개소	96	‘13.10 ~ ’13.12	-
서부교				-연석및보도부균열 : 53m -차량방호시설설치:50m -단면보수및도장:340㎡	50	‘14.3 ~’14.10
매봉터널				-벽면타일보수 335ea -단면보수 253㎡	30	‘14.3 ~’14.10
석촌지하차도	-방음판교체 1개소, 유도배수관 설치 3m, 단면보수 6㎡ -스테인레스 강판설치 9.6m	4	‘13.9 ~ ’13.12	-균열보수 139m -단면보수 40㎡	30	‘14.3~ ’14.10
상일2교	-난간 교체 3m	1	‘13.9 ~ ’13.11	-난간 교체 3m -아스콘균열보수 117m	4	‘14.5 ~ ’14.10
잠실호수교	-포장 및 후타재 보수 10㎡	3	‘13.10 ~ ’13.12	-신축이음장치 교체 31m -표면처리 39㎡	15	‘14.5 ~ ’14.10
복정2교	-			-
탄천교	-교면포장1.5a, 상판보수57.5㎡ -보도부 연석절단 38개소 -신축이음장치 보수 48m	90	‘13.7 ~ ’13.12	-유도배수관 재설치 120m -신축이음부 실링처리 126m -균열주입 103m	30	‘14.5 ~ ’14.10
일원터널	-갱부상부 수밀코킹 56㎡ -철근콘크리트 타설 2.6m	4	‘13.9 ~ ’13.11	-타일재시공 211개 -균열주입 5m	2	‘14.5 ~ ’14.10
천호지하차도	-집수정유입관수밀코킹 13m	1	‘13.9 ~ ’13.11	단일공사
성내유수지교	-신축이음장치 보수 49m -신축이음 후타재 보수 33m	57	‘13.9 ~ ’13.11	-신축이음장치 교체 60m -단면보수 3㎡, 균열주입 3m	45	‘14.5 ~ ’14.10

○ 교량보수과

- 단일공사

시설물명	2013실적			2014계획
	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간
합 계		1,922			2,880
잠실철교(도)	-도장보수 10,344㎡	857	'13.6~12	-도장보수 10,300㎡	880	'14.3~12
올림픽대교	-교면포장 64a, -단면보수 2,782㎡ -중앙분리대도색 758㎡	599	'13.4~11	-	-	-
청담대교	-아스팔트포장 35a -교면방수 2,625㎡ -아스팔트균열보수 4,389m -콘크리트단면보수620㎡	466	‘13.5~11	-	-	-
탄천1고가교	-	-	-	-콘크리트균열보수 1,630m -교면포장 11,400㎡	1,000	14.3~8
탄천2고가교	-	-	-	-콘크리트균열보수 324m -교면포장 10,000㎡	1,000	14.3~8

- 장기계속 단가계약

시설물명	2013실적			2014계획
	보 수 내 용	예 산	보수기간	보 수 내 용	예 산	보수기간
합 계		1,844			1,664
고덕천교	-포장균열보수 55m -단면복구 57.2㎡ -후타재보수 27m	20	‘13.3~12	-	-	-
구룡터널	-	-	-	-환기소 내부 충진보수	6	‘14.3 ~12
탄천1고가	-교량배수구 청소 3개소 -스틸박스 뚜껑설치 1개소 -앵커볼트 설치 534개소 -빗물받이 설치 27m -강재보수 도장 19㎡	21	13.3~12	-단면보수 210m -스틸박스 도장 442㎡	70	-
탄천2고가	-표면보수 513㎡ -강재보수도장(내.외부) 146㎡	52	13.3~12	-콘크리트 균열보수 343m -신축이음 보수 1식	60	-
내곡IC교	데크플레이트 도장 780㎡ 중분대우수유입방지 180㎡ 방호벽 차수조인트 33m	47	‘13.3~12	유도배수관 설치 104m	31	‘14.3.~12
수서IC교	교면포장 및 방수 11a 단면복구 78㎡	46	‘13.3~12	단면복구 18㎡	6	‘14.3~12
일원지하차도	- 균열보수 210m	5	‘13.3~12	균열보수 170m	30	‘14.3~12
개포지하차도	균열보수 150m	4	‘13.3~12	포장보수 3.5a	40	‘14.3~12
암사지하차도	-단면복구 15㎡	3	‘13.3~12	-	-	-
수서지하차도	-	-	-	-	-	-

시설물명	2013실적			2014계획
	보 수 내 용	예 산	보수기간	보 수 내 용	예 산	보수기간
천호대교	-조류 방지망 설치 1,372㎡ -스파이크 니들 설치 265m -신축이음 교체 42m -배수관 정비 193m -아스팔트 균열보수 4,556m	341	‘13.3~12	-신축이음 교체 364m -단면복구 35㎡ -균열보수 156m	304	‘14.3~12
올림픽대교	-중앙분리대도색 758㎡ -배수관 설치 83m -신축이음교체 등	176	‘13.4~10	-교면방수 2.5a -단면보수 120㎡ -아스팔트 균열보수 450m	71	‘14.3~12
잠실철교	-표면보수 119㎡ -배수관 정비 612m	163	‘13.3~12	아스콘 균열보수 1,000m 표면처리 200㎡ 단면보수 50㎡ 방호울타리 정비 150m 점검통로 설치 80m	396	‘14.3~12
잠실대교	-신축이음교체 46.8m -콘크리트표면보수 930.5㎡ -교량받침도색 440개소 -아스팔트포장 50.4a -교면방수 5041㎡ -상판보수 63.3㎡	703	‘13.3~12	-점검로설치 80m -교면방수포장 34a -신축이음정비 50m	330	‘14.3~12
청담대교	-콘크리트방호벽설치 6개 -차선규제봉 설치 12개	4	‘13.3~11	-신축이음정비 3개소 -단면복구 160㎡ -박스내부 정비 도장 330㎡ -배수구 정비 44개소	222	‘14.4~9
청담2교	-단면복구(벽체) 7.6㎡	2	‘13.3~11	-	-
청담1교	-단면복구 8.6㎡ -표면처리 14.4㎡ -표면보수 30㎡	4	‘13.5~7	-교면포장 570㎡ -연석 박리박락 17㎡ -표면보수 110㎡	55	‘14.3~12
신천1교	-	-	-	-	-	-
신천2교	-방호벽 단면복구 288㎡ -교면 포장 28a -도막방수 28a	146	‘13.9~10	-표면처리 630㎡	32	‘14.3~12
한남대교 남단2교	-	-	-	-	-	-
상행1교	-교량배수구 청소 2개소 -신축이음 교체 35m -아스팔트 보수 12a -균열보수 38m	75	‘13.3~11	-	-	-
상행2교	-벽체단면복구 1㎡ -델리네이터 13개소 설치	0.5	‘13.3~11	-	-	-
상행3교	-벽체 단면복구 7㎡ -벽체 표면보수 389㎡ -방호벽 차수조인트 3.2m	20	‘13.3~11	-통과높이 표지판 1개	1	-
상행4교	-단면복구(벽체) 1㎡	0.4	‘13.3~11	-신축이음부 보수 20m -슬래브단부보수 10m	10	‘14.4~8
하행1교	-단면복구 24.8㎡ -델리네이트 22개소 -단면복구 1㎡	6	‘13.3~12	-	-	-
하행2교	-단면복구 21㎡	3	‘13.3~12	-	-	-
하행3교	-교량배수구 청소 2개소 -단면복구(레미가드) 2㎡	1	‘13.3~12	-	-	-
하행4교	-델리네이트 23개소 -균열 비계틀 20m -단면복구 4㎡	2	‘13.3~12	-	-	-