아리수정수센터 ‘15년 청소근로환경시설 개선계획

청소근로환경시설(휴게시설, 세면․목욕시설, 세탁시설, 탈의시설) 현황

시설명	시설면적 (㎡)	휴게시설 위치(층)	휴게실 면적 (㎡)	이용자(명)			환기시설 유 무	냉난방 유 무	휴게실 표찰명	사물함 개수
				계	여성	남성
본관휴게실(여)	3,728	지상1층	10	1	1		유	무	무	2
본관휴게실(남)	3,728	지상1층	5	1		1	무	무	무	0
문화재휴게실(여)	3,326	지상1층	15	3	3		유	유	유	3
...

문제점(개선 필요사항)

○ 남·녀 휴게공간 부족

○ 남·녀 샤워실, 세탁실, 탈의실 일체형 휴게공간 없음

‘15년 청소근로환경시설 개선 추진계획(가급적 자세히 작성)

○ 개선대상 : 청소근로자 남‧녀 휴게실 신설

- 샤워실, 세탁실, 탈의실이 구비된 일체형 휴게공간을 설치코저 함

- 장소 : 문화재 2층 유휴공간

○ 개선내용 : 남·녀 휴게공간 설치

- 문화재 2층 유휴공간에 남‧녀 일체형 휴게공간 설치

- 남‧녀 샤워실, 세탁실, 휴게공간 설치

○ 추진일정 : 2015. 2~2015. 5

- 2015.2월중 설계완료

- 2015.3월중 공사발주

- 2015.5월중 공사완료

○ 소요예산 :38,000천원

붙임 : 1. 개선 대상 휴게공간 현장사진

2. 시설 개선 소요예산 내역서

작 성 자	○○○과장 : ☎5410 ○○○팀장 : ☎5412 담당 : ☎5413

붙임 1

구의아리수정수센터 개선 대상 청소근로환경시설 현장사진

<시설명 : 구의아리수정수센터>

구 분	개선 전(남 휴게실)	개선 전(여 휴게실)
휴게실
	*사진설명	*사진설명
세면․ 목욕실
	*사진설명	*사진설명
세탁시설
	*사진설명	*사진설명
탈의시설 (별도로 있는 경우)
	*사진설명	*사진설명

붙임 2

시설 개선 소요예산 내역서

○ 기 관 명 :구의아리수정수센터

○ 개선대상 : 남·녀휴게실

○ 개선내용 : 1인당 권장면적에 부합하는 휴게공간 마련

○ 소요내역

(단위 : 원)

공사별		재료비	노무비	경비	합계	구성비	비고
건축공사	건축	15,747,000	7,246,000			100%
	기계
	토목	-	-	-	-
	조경	-	-	-	-
					-
	소계	15,747,000	7,246,000
전기공사
통신공사
소방공사
직접공사비 계		15,747,000	7,246,000			100.0%
제경비					15,007,000	34.73%
총 계					38,000,000