[서식 제5호]

2014년 국고보조예산 집행실적보고

1. 사업실적

사 업 별	사 업 명	사업계획	사업실적	진 도(%)	비 고
화장로 정비개선	시립승화원 화장로개보수	화장로 23기 정비	주연소로 2기, 재연소로 8기, 가스냉각기 5대, 싸이크론 집진기 3대교체 및 세라믹 화이버, 백필터, 가스냉각기, 중간연도 등 화장로 23기 정비	100%
	추모공원 화장로개보수	화장로 11기 정비	주연소로 턱벽돌, 세라믹모듈 교체, 백필터, 열교환기, 백연방지설비 교체 및 청소, 송풍기 보수 등	100%
자연장지 조성사업	용미리 1묘지 단지정비사업	자연장지 조성 (3,334㎡)	자연장지 3,334㎡정비를 통한 추모목 162주 식재	100%
	2묘지 종합 자연장지조성사업	자연장지 조성 (99,000㎡)	추진실적 없음(2015년도 사업으로 변경)	0%

※ 사업진도 80%미만은 부진사유 첨부

2. 사업비 집행실적

사업별	사업명	예 산			집행액			이월액			집행잔액			비고
		계	국고	지방비	계	국고	지방비	계	국고	지방비	계	국고	지방비
화장로 정비개선	승화원 화장로 개보수	2,129	1,064.5	1,064.5	2,129	1,064.5	1,064.5	-	-	-	-	-	-
	추모공원 화장로 개보수	1,202	601	601	630	315	315	-	-	-	572	286	286
자연장지 조성사업	1묘지 단지정비 사업	826	234	592	557	132	425	-	-	-	269	102	167
	2묘지 종합 자연장지 조성사업	4,000	2,800	1,200	-	-	-	-	-	-	4,000	2,800	1,200

3. 사업효과 분석 : 별첨

❍  시설물 설치에 대한 대표적인 사진 각 1매 첨부(착공전, 공사진행, 완공후)

❍  준공검사 또는 기성고 확인증명서 관계서류 첨부