		미세먼지 저감 도시숲 조성관리(서울특별시)

* 담당자 : 조경과장(문길동), 조경시설팀장(이현삼), 담당(김세준)

* 담당자 : 자연생태과장(안수연), 산림이용팀장(김상국), 담당(임성수)

1. 집행 실적 및 계획 현황

□ (실적)

- 미세먼지 차단숲

·국비기준 예산현액 1,500백만원 대비 62백만원이 원인행위 되었으며, 현재 설계용역 진행 중임

- 도시바람길숲

·국비기준 예산현액 5,500백만원 대비 332백만원이 집행되었으며, 현재 설계용역 진행 중으로 집행률은 6%임.

□ (계획)

- 미세먼지 차단숲

·8월 설계용역 준공금 62백만원 및 12월까지 공사 준공금 994백만원 집행 예정(예산현액 대비 70.4%)

- 도시바람길숲

·7월 설계용역 준공금 443백만원 및 12월까지 공사 준공금 3,503백만원 집행 예정(예산현액 대비 71.7%)

< 집행 실적 및 월별 집행 계획 >

						(백만원)
내역사업명		예산 현액 (국비기준)	집행 실적 (20.6.30기준)		월별 집행 계획
					7월		8월	9월	10월	11월	12월
계		7,000	332		451		509	509	2,256	2,256	5,002
ㅇ 차단숲		1,500					62	62	62	62	1,056
- ’20년 본예산		1,500					62	62	62	62	1,056
ㅇ 도시바람길숲		5,500	332		447		447	447	2,194	2,294	3,946
- ’20년 본예산		5,000	0		4		4	4	1,751	1,751	3,503
- ’19년 본예산 이월		500	332		443		443	443	443	443	443

2. 집행 부진 사유

- 미세먼지 차단숲

·설계용역 발주 시 유찰(2회)로 인한 계약 지연(구로구)

·설계용역 추진 관련 공개공지 사용 협의 지연(금천구)

- 도시바람길숲 조성

·자치구 회의, 설계경제성(VE) 검토, 건설기술심의, 계약심사 등 관련절차 이행에 시일소요(7월말 설계준공, 9월 공사 착수 예정)

3. 조치 계획 및 전망

- 미세먼지 차단숲

·전문가 자문, 공개공지 사용협의 가능 대상지  우선적 선별 등으로 조속한 용역 마무리 및 공사착공하여 연내 준공

- 도시바람길숲 조성

· 7월말 설계 준공 후 8월 공사발주, 9월 공사계약 및 착공 등 정상 추진(장기계속공사로 발주 : 2021년 12월 준공 예정)

4. 긴급 재난지원금 마련에 따른‘20년 사업예산 조정

- 미세먼지 차단숲(3,000백만원 → 2,113백만원)

						(백만원)
구분		기정예산	변경예산		증·감		조정결과
계		3,000	2,113		감) 887		2,113
시설비		2,990	2,103		감) 887		국비 : 1,052 시비 : 1,051
시설부대비		10	10		-		국비 : 5 시비 : 5

- 도시바람길숲(10,000백만원 → 7,005백만원)

						(백만원)
구분		기정예산	변경예산		증·감		조정결과
계		10,000	7,005		감) 2,995		7,005
시설비		9,974	6,979		감) 2,995		국비 : 3,490 시비 : 3,489
시설부대비		26	26		-		국비 : 13 시비 : 13

참고		지자체별 예산 및 사업량 현황

■ 미세먼지 차단숲 예산 현황

(백만원)

사업명	구분1	구분2	예산현액	원인행위	지출액	집행률(%)
미세먼지 차단숲	시비	시설비	1,051	62	-	-
		시설부대비	5	-	-	-
	국비	시설비	1,052	62	-	-
		시설부대비	5	-	-	-
	소계	시설비	2,103	124	-	-
		시설부대비	10	-	-	-
	계		2,113	124	-	-

■ 사업현황

구분	구로구	금천구	공종률 (%)
사업개요	·위 치 : 구로동 일대 (서울디지털국가산업단지 1단지) ·규 모 : 10,000㎡ ·내 용 : 차단숲 조성(수목식재 등) ·소요예산 : 1,000백만원 (국비 500, 시비 500)	·위 치 : 가산동 일대 (서울디지털국가산업단지 2,3단지) ·규 모 : 20,000㎡ ·내 용 : 차단숲 조성(수목식재 등) ·소요예산 : 2,000백만원 (국비 1,000, 시비 1,000)	-
1분기 (1월~3월)	·계획수립 ·용역타당성 심사	·계획수립 ·용역타당성 심사 ·설계용역 발주	5
2분기 (4월~6월)	·설계용역 발주 ·설계용역 계약 및 착수보고 ·자문회의 개최, 중간보고	·설계용역 계약 및 착수보고 ·중간보고	25
3분기 (7월~9월)	·자문회의 개최 ·설계용역준공 ·계약심사 및 일상감사 등 ·공사발주 및 착공	·자문회의 개최 ·설계용역준공 ·계약심사 및 일상감사 등 ·공사발주 및 착공	50
4분기 (10월~12월)	·공사시행 및 준공	·공사시행 및 준공	100

■ 도시바람길숲 예산 현황(20년)

(백만원)

사업명	구분1	구분2	예산현액	원인행위	지출액	집행률(%)
도시 바람길숲	시비	시설비	3,489	-	-	-
		시설부대비	13	-	-	-
	국비	시설비	3,490	-	-	-
		시설부대비	13	-	-	-
	소계	시설비	6,979	-	-	-
		시설부대비	26	-	-	-
	계		7,005	-	-	-

■ 사업현황

구 분	추 진 내 용	공종률 (%)
사업개요	·위 치 : 관악산 안양천 일원(금천구, 구로구, 양천구, 영등포구) 북한산 우이천 일원(강북구, 도봉구) ·내 용 : 바람길숲 조성(생성숲 6개소, 연결숲 22개소, 확산숲 5개소) ·총사업비 : 20,000백만원(국비 10,000, 시비 10 ,000) ·공사기간 : 2020.9. ~ 2021.12.	-
1분기 (1월~3월)	- 2020. 3.17 : 중간보고회 · 대상지 선정 자치구 협의(2차) 결과 및 수종 선정 등 보고	5
2분기 (4월~6월)	- 2020. 4.~5.: 중간보고회(2회) · 산림청 도시숲 자문단 자문의견 및 조치내역 보고 등(4.8.) · 사업대상지 세부 위치별 자치구 협의 및 조치계획 보고(5.20.) - 2020. 5. 19.~5.27. : 설계 경제성(VE) 검토 회의(3회)	8
3분기 (7월~9월)	·건설기술심의, 계약심사 및 설계용역준공(7월말) ·공사발주 및 계약(8월) - 장기계속공사(‘20.~’21년) ·공사착공(9월)	52
4분기 (10월~12월)	·공사시행 및 1차 공사 준공(12월) (장기계속공사 : 2021년 2차 공사 시행)	100