양식 2		작은도서관 조성지원 사업계획서

「2017년 작은도서관 조성 지원 사업」지원신청서					서울시
					송파구
문화체육관광부가 추진하는 2017년도 작은도서관 조성 지원 사업 대상자 공모에 붙임과 같이 신청서를 제출하며, 지원대상으로 선정되는 경우 귀 부가 정하는 제반 사항을 준수할 것을 약속합니다. ※ 본 신청서에는 사실과 다른 내용이 포함되지 아니하였으며, 만일 허위사실 등이 확인되는 경우에는 작은도서관 조성 지원 대상의 선정과 관계없이 귀 부의 조치를 수용하겠음. 2017년 2월 3일 송파구청장 (직인)
지자체명
담 당 자	담당부서	교육협력과	전 화	02-2147-2382
	직 급	행정 8급	FAX	02-2147-3861
	성 명	이지현	E-mail	isizzang @songpa.go.kr
첨부서류	□‘17년 작은도서관 조성 사업계획서(요약서, 세부설명서) □ 증빙자료(해당 시 첨부)

[2017년 작은도서관 조성 지원 사업]

방이1동작은도서관 조성 사업 요약서

시․도명

서울특별시

시․군․구명

송파구

사업유형

☑ 생활밀착형            □ 농산어촌지역

※ 농산어촌지역 : 국가균형발전특별법 제2조8항에 해당하는 지역

작은도서관명

방이1동작은도서관

규모

56㎡(17평)

주    소

(구주소) (05640) 서울시 송파구 방이동 200, 방이1동주민센터 2층

(신주소) (05640) 서울시 송파구 위례성대로 16길 22, 방이1동주민센터 2층

지자체 현황

재정자립도

42.9%

(2016년)

공간소유

지자체

건물(부지)

용도

제1동 근린생활시설

반경 2㎞이내

공공도서관 및 작은도서관 현황

지샘터올림픽공원도서관(265㎡)

방이2동작은도서관(50㎡)

기존공간 용도

기존 새마을문고

시설물내

타 영업시설

없음

사업비(천원)

총계

50,000

국비

25,000

지방비

25,000

개 관 일

1991년

운영방법

직영

전담인력

계획

새마을문고

동분회 회원들

운영비 확보계획

* 구비 확보 : 분기별 운영비 500천원, 도서구입비 420천원 교부

* 시비 확보 : 공공작은도서관 연계협력사업비(프로그램 운영 지원 등) 11,000천원

* 연도별 운영비 확보계획

(단위:천원)

연도	2017	2018	2019	2020	2021	계
예산	3,680	10,200	10,800	11,400	12,000	48,080

공공도서관과 연계방안

작은도서관으로 리모델링하고 향후 구립 공공도서관과 독서프로그램 운영 연계, 상호대차 고려

작은도서관의 특성

인근에 학교가 있고 주택가에 위치해서 이용자가 많으나 이용자 대비 장서가 많이 부족함. 좁은 장소가 아동·청소년 열람실과 성인열람실로 공간이 분리되어 있어 답답해 보이고, 안쪽 청소년열람실에서 도서 분실이 빈번히 발생하여 관리에 애로가 많음. 전체적으로 시설이 노후하여 리모델링이 요구됨.

[2017년 작은도서관 조성 지원 사업]	[서울시(송파구)]
방이1동작은도서관 조성 사업계획서

1. 사업개요

사업명	방이1동작은도서관 조성		조성규모	56㎡(17평)
사업기간	2017년 1월 ~ 12월		장서구입량	10,017권
공간구분 및 활용	동 청사내 작은도서관 조성(리모델링)
운영시간	평일	9시 ～ 18시	공휴일	휴관
연간 운영일	240일		정기휴관일	토·일요일, 법정공휴일
지역 특성	* 반경 2㎞이내 상주인구 : 78,370명(방이1동 16,160명, 방이2동 25,351명, 오금동 36,859명) * 주변 문화시설 : 한성백제박물관, 올림픽공원

2. 추진경과

ㅇ ‘16. 2. : 수요조사

ㅇ ‘16. 9. : 사업계획서 제출

ㅇ ‘17. 2. : 사업계획서 변경 제출

3. 2017년 신규사업 사전절차 이행여부(증빙자료 별첨)

내역사업명	2017년 예산(안) (백만원)	부지확보	기본계획 수립 (O,X)	운영계획서 작성여부 (O,X)	비고
▪방이1동작은도서관 조성	50	○	×	○	부지확보 증빙 (토지대장), 기본계획서, 운영계획서 별첨 제출

4. 2017년도 지특회계 예산(국고보조금) 신청내역

(단위 : 백만원)
계 (A=B+C)	국고(B)	지방비(C)			전체 사업비 대비 지방비 비율(%) (C/A)	비고
		시도비	시군구비	기타
50	25		25		50%

5. 2017년도 예산 확보 및 집행계획

(단위 : 천원)

구 분	세부 내역	재원별 현황				전체 대비 비율
		국고	지방비	기타	소계
도서구입	아동·성인도서 구매	7,000			7,000	14%
자산취득비 (물품구매)	전자 편의물품 및 책상·의자 등 집기비품 구매	5,000			5,000	10%
시설비 (리모델링)	냉·난방공사 및 붙박이 맟춤가구 샷시공사,출입문,목공공사 등	13,000	25,000		38,000	76%
계		25,000	25,000		50,000	100%

6. 조성계획

가. 주변 여건 및 주민 현황 등

인근에 학교가 있고 주택가에 위치해서 이용자가 많으나 책과 독서공간이 부족하여 주민 민원이 많음. 좁은 장소가 아동·청소년 열람실과 성인열람실로 공간이 분리되어 있어 답답해 보이고, 안쪽 청소년열람실에서 도서 분실이 빈번히 발생 함. 공간을 분리하고 있는 가벽을 해체하여 하나로 만들어 이용자 관리의 편의성을 높이고, 부족한 장서를 확충하여 주민들에게 안락한 독서문화공간을 제공하고자 함.

나. 공간 배치

(단위 : ㎡)

총면적	입구	안내	서가	열람	회의공간	디지털 자료실	비고
56	5	5	20	26

다. 추진 일정

추진일정	주요 내용	비고
○ ‘17. 1월. ○ ‘17. 2월. ○ ‘17. 4월. ○ ‘17. 5월.	○ 주민 및 운영자 의견 수렴 ○ 보조금 교부신청서 및 사업계획서 변경 제출 ○ 시공업체 선정 및 착공 ○ 시공완료 및 개관식

7. 운영계획 (양식3 작성 첨부 필수, 별도 세부운영계획서 별첨 가능)

가. 운영 주체

ㅇ 운영주체

①지자체 직영( √ ), ②민간위탁(   ), ③기타(   )

ㅇ 운영위원회 구성․운영계획

- 인    원 : 5명 내외

- 주요 구성원 분포

: 도서관에 이해도가 높고 구의 독서문화 진흥에 적극적인 주민, 학생, 사서 등

- 주요활동 계획

:  작은도서관 자문역할 및 작은도서관 운영방침 및 내규제정

도서관 인지도 제고활동 및 작은도서관 활성화 도모

운영위원회장, 작은도서관 전담사서, 공공도서관 및  자치구 담당자와 네트워크 구축 등

ㅇ 자원봉사회 구성

- 인    원 : 15~20명 (추후 계속 모집)

- 주요 구성원 : 어르신, 주부, 학생 등 관심있는 누구나

- 주요 봉사분야 및 계획

도서대출 반납, 도서관 정리, 독서활동 학습지도, 독서 관련 프로그램 운영 등

나. 운영 계획

ㅇ 운영 지원계획 및 예산(5년간)

연 도		2016	2017	2018	2019	2020	계
예 산		3,680	3,680	10,200	10,800	11,400	39,760
세부내역	도서 구입비	420×4분기	420×4분기	1,100×4분기	1,200×4분기	1,300×4분기
	운영비	500×4분기	500×4분기	550×4분기	600×4분기	650×4분기
	자원봉사자 실비보상금	-	-	300×12월	300×12월	300×12월

(단위:천원)

ㅇ 운영인력 : 자원봉사자 15~20명 (추후 계속 모집)

ㅇ 운영시간 : 월~금 9시~18시 (자원봉사자실비 지원으로 점진적 야간 및 주말개방 추진)

ㅇ 운영자 역량강화 교육실시

- 내 용 : 도서관리, 도서선정, 책 유지보수 방법 등 작은도서관 운영 전문교육

- 일 시  : 연 8회

ㅇ 독서문화활성화를 위한 프로그램 운영

- 교육내용 : 책과 만나는 연극놀이, 재미있게 글쓰기 등

- 운영횟수 : 총 2개 프로그램, 8회 (방학 중)

ㅇ 장서확보 : 분기별로 1,000천원 도서구입 (연도별 10% 증서)

ㅇ 주민참여 촉진을 위한 홍보전략 등

- 보도자료, 구정소식지, 현수막으로 작은도서관 리모델링 홍보로 주민 유치

다. 운영 실적

도서관명	규모			예산지원액(천원)			이용인원
	면적(㎡)	열람석	장서수	2014	2015	2016	2014	2015	2016
방이1동 작은도서관	56	21	10,017	3,760	3,680	3,680	10,621	10,700	11,050

8. 공공도서관 등과의 연계협력 운영계획

가. 연계협력 기관 및 역할

기관명	기능 및 역활
송파구청	공공도서관 확충 및 운영 지원
송파글마루도서관	대표도서관(도서관 통합관리, 통합 회원 관리 등)
송파어린이도서관 송파어린이영어작은도서관	도심형 어린이도서관 모델 제시
새마을작은도서관 소나무언덕작은도서관	지역주민의 가장 가까운 곳에서 생활 친화적 문화공간 제공

나. 연계협력사업 운영계획

추진일정	주요내용
‘17. 6. ~ 12.	공공-작은도서관과 함께 하는「한 도서관 한 책 읽기」 - 독서 활성화를 위한 송파구 한 책 독서문화프로그램 실시 - 작은도서관을 홍보하고 참여자를 모집하여 독서토론 실시
‘17. 8. ~	공공-작은도서관 연계협력 여름방학 독서프로그램 운영
‘17. 9. ~	관내 어린이집, 학교와 연계한 독서문화 프로그램 운영
‘17. 10. ~	송파북페스티벌 책 축제 참여, 도서교환전 및 독서프로그램 부스 운영
‘18. 7. ~	공공도서관과 상호대차시스템 구축 검토

9. 사업위치도 및 현장사진

10. 기타사항

- 해당없음

11. 담당자 연락처 (상세 내역 확인이 가능한 실무자 연락처 기재)

시․도	소속/과(기관명)	직급	이름	전화	핸드폰	Fax
	e-mail		주소
			( )
시․군․구	소속/과(기관명)	직급	이름	전화	핸드폰	Fax
	송파구/교육협력과	행정8급	이지현	02-2147-2382	*************	02-2147-3861
	e-mail		주소
	isizzang@songpa.go.kr		(05552) 서울시 송파구 올림픽로 326(신천동)

양식 3		작은도서관 운영계획서

구 분		내 용
사 업개요	시 설 명	방이1동작은도서관
	사업기간	2017. 1. ~ 12.
	소요예산	50백만원(국비25, 구비25)
	시행주체	서울특별시 송파구
운영계 획	수요분석	이용대상	주요이용층 송파구 관내 주민, 연인원 15천명(일일 60명)
		유사시설	【동별 새마을문고 21개소】 풍납1동(62㎡), 거여1동(70㎡), 거여2동(52㎡), 마천1동(50㎡), 마천2동(33㎡), 방이2동(50㎡), 오륜동(76㎡), 오금동(66㎡), 송파1동(55㎡), 송파2동(33㎡), 삼전동(50㎡), 가락본동(50㎡), 가락2동(58㎡), 문정1동(65㎡), 문정2동(49㎡), 장지동(36㎡), 잠실본동(33㎡), 잠실3동(33㎡), 잠실4동(86㎡), 잠실6동(52㎡), 잠실7동(36㎡)
	콘텐츠 확보	필요수량 (목표량)	1개소, 장서수(도서 13,000권, 비도서 20점)
		확보계획	ㅇ기확보된 수량 : 도서 10,017권
			ㅇ연도별 확보계획 : - 장서확보 : 연도별 10% 증서
	운 영	개시일	1994. 1월
		일정 (프로그램)	도서대출 반납, 독서활동 학습지도, 독서·문화프로그램 운영 (매주 월~금 9:00~18:00)
		조직	1관 1팀(지자체 직영, 새마을문고 방이1동분회 자원봉사자 활용)
		인력	새마을문고 회원 16명, 추후 계속 모집
		연간 운 영 비 (백만원)	합계		인건비	콘텐츠구입비		공공요금		시설유지비	기타
			4			2					2
		운영비 확보방안	시비 및 구비 확보
담당자	직 책	소 속		직 급			성 명		전화번호(휴대전화)
	담당과장	송파구 교육협력과		행정5급			김성환		02-2147-2363(*************)
	담 당 자	송파구 교육협력과		행정6급			오미자		02-2147-2371(*************)
	실 무 자	송파구 교육협력과		행정8급			이지현		02-2147-2382(*************)
2017년 2월 3일 주관기관 기관장 송파구청장 박춘희 (인)